예천군 고시 제 2014 - 464 호

곤충나라 사과테마파크 조성사업 시행계획 승인 고시

농어촌  정비법 제59조 규정에 의거「곤충나라 사과테마파크 조성사업」 시행계획을 다음과 같이 고시합니다.

2014년  7월  31일

예  천  군  수

1. 사업목적

• 지역특화자원인 곤충과 사과를 테마로 친환경적 체험활동이 가능한 차별화된 농촌테마파크 조성

• 주변 관광자원 및 지역주민과 연계하여 녹색테마관광 기반구축을  통해 농가소득증대 및 지역경제 활성화

2. 사 업 명 : 곤충나라 사과테마파크 조성사업

3. 사업구역 : 경상북도 예천군 상리면 백석리 일원

4. 사업면적 : 76,000㎡정도

5. 사업개요

• 7대 지역개발지구 : 사과전시체험지구, 수변전망휴게지구, 입구쉼터지구, 숲속체험지구, 산림휴양지구, 흰돌체험마을지구, 갈대수질정화지구

• 수변순환동선 : 수변탐방로

6. 총사업비 : 10,500백만원 (국비 5,000백만원, 지방비 5,500백만원)

7. 사업예정기간 : 2013년 ~ 2016년 (4년간)

8. 사업시행자 : 예천군수(한국농어촌공사예천지사)

☐  계획 위치도

흰돌체험마을

백석저수지

	사업계획개요

Ⅰ

☐ 사 업 명 : 곤충나라  사과테마파크 조성사업

☐ 대상지역의 범위

- 위    치 : 경상북도 예천군 상리면 백석리 일원

- 면    적 : 7.6ha(76,000㎡정도)

☐ 사업기간 : 2013년 ~ 2016년(4년)

☐ 사업내용

- 7대 특화지구 : 사과전시체험지구, 수변전망휴게지구, 입구쉼터지구,

숲속체험지구, 산림휴양지구, 흰돌체험마을지구,

갈대수질정화지구

- 수변탐방로(순환동선)

☐ 사 업 비

- 총사업비 : 10,500백만원 (국비 5,000백만원,  지방비 5,500백만원)

(단위: 백만원)

구 분	계	1년차	2년차	3년차	4년차
계	10,500	400	1,400	4,400	4,300
국 비	5,000	200	700	2,200	1,900
지방비	5,500	200	700	2,200	2,400

	기능별 사업내역

Ⅱ

(단위:백만원)

사업명	기본계획(A)		시행계획(B)		증감내역(B-A)		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계		10,000		10,500		500
곤충나라사과테마파크		8,057		8,806		749
-사과전시체험지구	∙사과가공체험관 (건축면적:1,490㎡/2,160㎡)	2,050	∙사과체험장 : 756㎡ ∙사과홍보관 : 226.5㎡	3,670	건축 세부 물량(증) 부대토목 세부물량(증)	1,620
-수변전망휴게지구	∙조형취수탑, 야외무대, 휴게시설 등	650	∙야외무대, 휴게시설, 사과조형물, 시비공원 등	1,004	사과취수탑 1식 (감) 사과조형물1식 (증)	354
-입구쉼터지구	∙다목적광장, 주차장, 댐경관시설 등	600	∙사과품종전시원, 잔디광장	143	사과품종전시원 1식 (증) 잔디광장 1식 (증) 다목적광장 1식(감) 댐경관시설 1식 (감) 주차장 1식 (감)	△457
-숲속체험지구	∙모험놀이시설, 산책로, 전망대 등	450	∙숲속체험시설(체류시설) ∙주민운동시설, 산책로 등	1,760	전망대 1식 (감) 숲속체험시설 1식 (감) 주민운동시설 1식 (증)	1,310
-산림휴양지구	∙산림휴양시설 ∙다목적마당 ∙진입도로	2,100	∙전망대/데크 ∙산책로 등	453	산림휴양시설 1식 (감) 다목적마당1식(감) 진입도로 1식 (감) 전망대/데크 1식 (증) 산책로 1식 (증)	△1,647
-갈대수질정화지구	∙갈대밭, 산책로 등	250	∙갈대밭, 산책로 등	32	갈대식재 세부물량(감) 산책로 포장(감)	△218
-흰돌체험마을지구	∙사과전시원(1,500㎡)	150		-	사과전시원 1,500㎡ (감)	△150
-수변탐방로	∙데크교량 3개소 ∙데크탐방로 470m ∙황토길 1,170m	1,750	∙데크교량 2개소 ∙데크탐방로(합성목재) 645m ∙황토길 100m	1,744	데크교량 1개소 (감) 데크탐방로 175m(증) 황토길 1,070m(감)	△6
-전기공사	∙전기공사 1식	57	-	-	전기공사1식(감)	△57
부대경비		1,943		1,694		△249
-용지매수및보상비		530		484		△46
-프로그램운영비		80		50		△30
-기본설계비		142		142		-
-세부설계비		233		251		18
-공사감리비		540		583		43
-사업관리비		107		114		7
-문화재지표조사		-		15		15
-소규모환경영향평가		-		-		-
-잡지출		-		16		16
-한전납입금		-		22		22
-예비비		311		17		△294

	사업비 수지예산서

Ⅲ

(수입)                                                                                (단위:천원)

구 분	기본계획	시 행 계 획				비 고
		금회승인	기승인	금회승인	향후계획
합 계	10,000,000	10,500,000		10,500,000
국 비	5,000,000	5,000,000		5,000,000
지 방 비	5,000,000	5,500,000		5,500,000

(지출)                                                                                (단위:천원)

구 분	기본계획 (A)	시 행 계 획				비 고
		계	기승인	금회승인	향후계획
합 계	10,000,000	10,500,000		10,500,000
◦ 공사비	8,057,000	6,080,090		6,080,090
- 사과전시체험지구	2,050,000	2,882,462		2,882,462
- 수변전망휴게지구	650,000	754,732		754,732
- 입구쉼터지구	600,000	92,048		92,048
- 숲속체험지구	450,000	1,017,016		1,017,016
- 산림휴양지구	2,100,000	333,619		333,619
- 갈대수질정화지구	250,000	16,159		16,159
- 흰돌체험마을지구	150,000	-		-
- 수변탐방로	1,750,000	966,240		966,240
- 전기공사	57,000	-		-
- 폐기물처리	-	17,814		17,814
◦ 지급자재대		2,725,548		2,725,548
◦ 용지매수보상비	530,000	484,014		484,014
- 용지매수		425,934		425,934
- 보 상		58,080		58,080
◦ 부대경비	1,101,720	1,193,384		1,193,384
- 프로그램운영비	80,000	50,000		50,000
- 기본설계비	142,105	142,105		142,105
- 세부설계비	232,935	251,239		251,239
- 공사감리비	539,852	583,035		583,035
- 사업관리비	106,828	114,208		114,208
- 문화재지표조사	-	15,000		15,000
- 소규모환경영향평가	-	-		-
- 잡지출	-	15,983		15,983
- 한전납입금	-	21,814		21,814
◦ 예 비 비	311,280	16,964		16,964