□ 주요 투자사업 추진현황

우리 예천군에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
신도시 공공용지 취득	3,197	-	3,197	-	-	2023	2021	100
신도시 2단계 공공시설용지 확보	10,000	-	1,000	2,000	7,000	2026	2022	10
보문면 행정복지센터 신축공사	2,800	-	42	118	2,640	2025	2023	2
우리가락 우리마당 야외상설공연 지원	100	-	100	-	-	2023	2022	100
2023 삼강주막 나루터 축제	192	-	192	-		2023	2023	100
체험관광상품 운영지원 사업	98	-	98	-	-	2023	2023	100
세계유교문화 축전 지원	100	-	100	-	-	2023	2023	100
2023 예천활축제	800	-	800	-	-	2023	2021	100
2023 예천국제 스마트폰 영화제	220	-	220	-	-	2023	2022	100
예천도서관 통합 신축사업	10,022	813	132	-	9,077	2025	2020	10
용문사 주변 관광자원화 사업	1,500	42	627	431	400	2025	2020	30
2023 예천농산물축제	473	-	473	-	-	2023	2023	100
임대형 수직농장 조성사업	10,000	-	-	5,000	5,000	2025	2023	20
곤충양잠산업 거점단지 조성사업	20,000	-	20	11,480	8,500	2025	2022	30
예천 미세먼지 차단숲 조성사업	7,610	393	7,034	183	-	2024	2021	90
신도시 파크골프장 조성	2,000	-	2,000	-	-	2024	2022	80
예천목재문화 체험장 캠핑장 건립사업	4,500	-	-	176	4,324	2025	2022	10
예천 예누리길 조성사업	5,875	439	1,523	3,913	-	2024	2023	40
백송~오천간 도로개설	4,000	-	1,138	2,862	-	2024	2023	40
도청 신도시 (2단계) 주차장 부지확보	2,806	-	281	842	1,683	2026	2023	10
신도청 외곽도로 (모아엘가 ~ 홍구동사거리) 개설	8,000	-	94	2,906	5,000	2025	2023	2
화지교 개체공사	2,700	-	-	1,670	1,030	2025	2023	30
2023년 스마트시티 솔루션 확산	4,000	-	2,624	1,376	-	2024	2023	30
예천읍 전선지중화 사업	20,000	18,693	1,307	-	-	2025	2021	70
서본·노상지구 새뜰마을사업	3,447	1,709	1,324	414	0	2024	2020	70
대한육상연맹 교육훈련센터 건립	24,600	13,147	1,484	4,869	5,100	2025	2021	35
금곡천 생태하천 복원사업	20,000	10,000	3,000	4,000	3,000	2025	2018	60
예천보 개체사업	3,000	-	1,573	1,427	-	2024	2022	70
예천군 공공산후조리원 건립	9,900	0	2,400	7,500	-	2025	2022	10
제50회 한국중고연맹 회장기 전국 중고 양궁대회 및 제49회 문화체육관광부 장관기 전국 중고 양궁대회 개최	110	-	110	-	-	2023	2023	100
예천 축구 페스타 개최	160	-	160	-	-	2023	2022	100
예천군수배 전국 스프린트 육상경기대회 개최	100	-	100	-	-	2023	2022	100
제52회 춘계 전국 중고 육상경기대회 겸 제11회 춘계 전국 초등학교 육상경기대회	180	-	180	-	-	2023	2022	100
제51회 KBS배 전국육상경기 대회 겸 코리아오픈국제 육상대회 개최	220	-	220	-	-	2023	2022	100
2023 예천 KTFL 전국실업 육상경기대회 개최	100	-	100	-	-	2023	2022	100
곤충생태원 편의기능 강화사업	2,000	-	52	1,560	388	2025	2021	10
꿀벌자원육성품종증식장 조성사업	2,400	-	62	1,870	468	2025	2023	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘23년 말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지6 참고)

우리 예천군에서 ‘23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
예천군 도시재생 (노하·동본·남본지역) 뉴딜사업	18,330	1,000	7,200	1,200	8,930	-	1,000	70

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

예천군 도시재생(노하·동본·남본지역) 뉴딜사업

담당자

도시과 김승건(☎650-6242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지와 골목상권이 혼재된 예천읍을 대상으로 주민공동체 활성화와

골목상권 활력 증진으로 주민공동체 거점 조성, 마을가게 운영, 보행환경

개선 등으로 자생할 수 있는 도시생활 환경기반 강화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. ~ 2025. (5년간)

○ 위    치 : 예천군 예천읍 노하·동본·남본·서본리 일원

○ 규    모 : A=230,428㎡(163,220㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,330백만원(국비 7,200 도비 1,200 군비 8,930 지방채 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,330	7,633	4,683	6,014	0
지 방 채	1,000	0	1,000	0	0
국 비	7,200	3,260	1,850	2,090	0
시 도 비	1,200	543	308	349	0
시군구비	8,930	3,830	1,525	3,575	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020. 11월 : 공모사업 선정(국토부)

○ 2021. 12월 : 단샘어울림센터 리모델링 완료

○ 2023.  5월 : 아이사랑안심케어센터 신축공사 완료

○ 2023.  6월 : 남본리 쌈지공원 조성사업 완료

○ 2023. 10월 : 한우왕조2000 조성사업 착공

□ 향후계획

○ 2024.  1월 : 도시재생활성화계획(중대한변경) 변경용역 착수

○ 2024.  2월 : 맛고을거리 야간경관 특화거리 조성사업 설계용역 착수

○ 2024.  5월 : 남본시장센터 조성사업 설계용역 착수

○ 2024.  7월 : 도시재생활성화계획 변경 승인 고시

○ 2024.  8월 : 맛고을거리 야간경관 특화거리 조성사업 착공

○ 2024.  9월 : 남본시장센터 조성사업 착공

○ 2024. 11월 : 맛고을거리 야간경관 특화거리 조성사업 준공

○ 2024. 12월 : 남본시장센터 조성사업 준공

○ 2025.  9월 : 한우왕조2000 조성사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 13,688백만원 -> 변경 18,330백만원

○ 사업기간 : 당초 2021. ~ 2024. -> 변경 2021. ~ 2025.

우리 예천군에서 ‘23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 3 민간투자사업

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후
BTL	예천군 하수관거정비 임대형 민자사업	푸른예천환경(주)	43,272	31,287	3,981	4,016	43,312	2015. 5.24. ~ 2035. 5.23.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

예천군 하수관거정비 임대형

민자사업

담당자

맑은물사업소 최승복

(☎650-6371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인

정비 및 운영관리를 통해 지하수, 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리

효율 제고 등을 도모하여 국민의 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 5. 24. ~ 2035. 5. 23.  ○ 위치 : 예천읍 일원

○ 민간사업자 : 푸른예천환경 주식회사  ○ 총사업비 : 43,272백만원

○ 사업규모 : 오수관거 44.542㎞, 배수설비 3,190개소

□ 재정부담 현황

○ 관리운영권 설정 20년(2015. ~ 2035.)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	82,596	31,287	3,981	4,016	43,312
국 비	48,624	18,419	2,344	2,366	25,495
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,469	8,132	1,034	1,042	11,261
기 타	12,503	4,736	603	608	6,556

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 2015. 5월 사업 준공 이후 운영 중

□ 향후계획

○ 2035. 5월까지 분기별 정부지급금 지급

□ 사업변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	91,304,825,911	71,385,179,157	감 19,919,646,754
시설임대료(경상가)	82,025,074,730	63,657,149,337	감 18,367,925,393
운영비(불변가)	9,279,751,181	7,728,029,820	감 1,551,721,361