109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 예천군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
녹색문화상생 벨트조성	92,316	70,663	7,152	-	-	2020	2010	95
목재문화체험관 조성	5,200	3,657	1,543	0	0	2019	2011	100
읍실 농촌마을 공공하수도 시설 설치	3,675	2,840	835	0	0	2019	2014	100
보문 상수도 급수구역 확장	15,870	6,501	4,850	2,400	2,119	2021	2014	75%
호명 상수도 급수구역 확장	15,000	11,005	3,995	0	0	2020	2014	95%
신음 농어촌마을 공공하수도시설 설치	4,549	2,777	1,772	0	0	2019	2014	100
예천 제3특화 농공단지 조성	18,700	717	-	538	17,445	2023	2015	10%
예천박물관 전시시설 확충 및 수장고 증축	4,650	2,268	1,303	1,079		2020	2016	77
2017 곤충나라 Clean 예천농산물대축제	300	-	263	300	300		2016	100%
제6회 예천용궁순대 축제 개최	100		90	100	100	-	2017	100%
제4회 전국 서예 (휘호)대전 개최	380	240	70	70			2017	100
예천군 청소년수련관 기능보강							2017
예천 대심리 신청사 옆 주차장 조성	3,250	2,500	3,250	-	-	2019	2017	100
호명 신도시 공영주차장 매입	3,381	1,353	1,014	1,014	-	2020	2017	100
벼 건조 저장시설 지원	1,965.5	675	1,290.5	-	-	2019	2017	100%
KBS배 전국 육상대회 개최							2018
예천 군민체육대회 개최							2017
예천 우리소리축제 개최	140	100	20	20			2018	100
금곡천 생태하천 복원사업	20,000	1,200	598	2,000	16,800	2022	2018	10
용궁역 테마공원 조성	3,000		920	2,080		2020	2018	30
예천 대심리 큰하무실~석정간 도시계획도로 개설	4,400	1,000	1,900	850	650	2021	2018	55
예천 남산 도시림 조성사업							2019
2020 예천장터 농산물대축제	300		263	300	300		2019	100
예천대심등기소~변전소간 도시계획도로 개설	2,300	-	2,300	-	-	2021	2019	40
예천 신예천교~석정 입구 간 인도설치	2,550	900	1,650	-	-	2020	2019	70
문화체육관광부장관기제40회전국시·도대항육상 경기대회개최							2019
제10회 삼강주막나루터축제 개최	285		110	175			2019
대심 변전소 뒤 도시계획도로(중로 1-2호) 개설	4,700	-	4,700	-	-	2021	2019	60
대심 이미기길 도시계획도로(중로1-10호) 개설	6,000	-	2,300	-	3,700	2021	2019	30
예천 서본공원 조성	6,000	-	5,000	-	1,000	2021	2019	60
예천국궁장조성사업							2019
문화체육센터 리모델링 사업							2019
예천 곤충나라 생태정원 조성사업	추진 불가						2019
경북도청 신도시 복합커뮤니티센터 건립	33,000	-	732	11,502	20,766	2022	2019	5%
2020년 예천곤충엑스포							2019
제9회(2020년) 용궁순대축제	100		90	100	100		2019	100%
2019 예천국제스마트폰영화제 개최	370		170	200			2019	100
2020 예천 버블파이트 런 행사 개최	행사 미개최						2019
2020 시즌오픈전국육상대회 개최							2019
실업/대학육상대회 겸 코리아오픈국제육상대회 개최							2019
제49회춘계전국중고육상대회							2019
농산물가공 지원센터 설립	2,800	-	-	1,290	1,510	2021	2019	-

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙․시도의뢰, 자체심사)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

녹색문화상생벨트(예천)

담당자

문화관광과 민선기(☎650-6908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙동강 연안의 우수한 강 문화와 생태자원을 관광자원으로 특화

○ 기존 관광자원과 연계하여 녹색문화 신 성장 동력으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2020년(10년간)

○ 위 치 : 예천군 풍양면 삼강리 일원

○ 규 모 : 부지 322,826㎡, 건축 9,949㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,316백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	92,316	70,663	7,152	0	14,501
국 비	48,731	43,723	5,008	-
시 도 비	6,265	5,624	641	-
시군구비	22,819	21,316	1,503	-
지 방 채
민간자본	14,501				14,501
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2011.11월 ~ 2014.10월 : 관련행정절차 및 설계용역 완료

○ 2012. 2월 ~ 2014.12월 : 토지보상업무 완료

○ 2015. 1월 : 기반시설 및 건축, 조경공사 착공

○ 2015.12월 : 문화재 정밀발굴조사 완료

○ 2018.12월 : 캠핑장 조경 조성공사 착공

○ 2019. 4월 : 전시물 제작⦁설치 완료

○ 2019. 7월 : 캠핑장 건축공사 착공

○ 2019.12월 : 캠핑장 조경 조성공사 및 캠핑장 건축공사 준공

○ 2019.12월 : 강문화전시관 주변 정비(도로) 사업 착공

○ 2020. 3월 : 녹색문화상생벨트 다목적광장 조성공사 착공

○ 2020. 4월 : 녹색문화상생벨트 어린이 놀이터 조성공사 착공

: 낙동강 역사전시 및 보부상 문화마당 주변 정비공사 착공

○ 2020. 5월 : 삼강문화단지 외부사인 제작 및 설치 착수

○ 2020. 6월 : 강문화전시관 주변 정비(도로) 사업 준공

□ 향후계획

○ ‘20. 7월 : 삼강관광지 확정측량 및 조성계획 변경 용역 발주

○ ‘20. 8월 : 다목적광장, 어린이놀이터, 역사전시 및 보부상 문화마당 정비공사 준공

○ ‘20. 9월 : 삼강문화단지 외부사인 제작 및 설치 준공

○ ‘20.11월 : 삼강관광지 확정측량 및 조성계획 변경 용역 완료

○ ‘20.12월 : 삼강관광지 준공

○ ‘21년   : 녹색문화상생벨트 조성사업 총 사업비 정산 및 반납요청

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

	당초	변경	비고
사업규모	339,061㎡	322,826㎡	감 16,235㎡
총사업비	115,452백만원	92,316백만원	감 23,136백만원
사업기간	2011~2015	2011~2019	증 4년

※ 기획재정부 총사업비관리과-914호(2017.8.3.) 및 문화체육관광부 관광개발과-3282(2017.8.11.)호와 관련하여 위와 같이 조정됨.

사업명

목재문화체험장 조성사업

담당자

산림축산과 조선진(☎650-6316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 목재문화를 체험하고 이용할 수 있는 공간을 제공하며 목재 및        목제품에 대한 종합적인 지식과 정보 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012 ~ 2019

○ 위 치 : 경상북도 예천군 효자면 도효자로 2142 (구. 용두휴게공원)

○ 규 모

∙ 본  관 : 지상 2층, 건축면적 918.18㎡ (278평)

∙ 부속동 : 지상 1층, 건축면적 199㎡ (60평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200	3,657	1,543	0	0
국 비	4,160	2,758	1402	0	0
시 도 비	312	206	106	0	0
시군구비	728	693	35	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목재문화체험장 조성 완료

□ 향후계획

○ 목재문화체험장 운영 및 체험 프로그램 개발

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

읍실 농어촌마을 공공하수도

시설 설치공사

담당자

환경관리과 신언석

(☎650-6371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염총량제 시행에 따른 낙동강 수질개선을 위하여 공공하수처리시설

설치사업으로 청정환경보존 및 지역주민의 주거환경개선을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 예천군 은풍면 우곡리 일원

○ 규 모 : 하수처리시설 Q=90㎥/일, 오수관거 L=4.73km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,675백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,675	2,840	835	0	0
국 비	2,573	2,129	444	0	0
시 도 비	124	26	98	0	0
시군구비	328	328	0	0	0
지 방 채
민간자본
기 타	650	357	293	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  3월 사업 착공

○ 2019. 10월 사업 준공

□ 향후계획

○ 사업완료로 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q=70㎥/일, 오수관거 L=2.57km

→ Q=90㎥/일, L=4.73㎞

○ 총사업비 : 3,160백만원 → 3,675백만원

사업명

보문상수도 급수구역 확장사업

담당자

환경관리과  현영민(☎054-650-6345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예천상수도의 여유량을 미 급수지역인 보문면 일원에 공급함으로써 미 급수지역의 상수도 보급률 향상 및 수도운영 효율성 제고로 지역주민의 보건위생 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

○ 위 치 : 예천군 보문면 일원

○ 규 모 : 송•배•급수관 부설 L=69.3㎞, 가압장 5개소, 배수지 1개소(400톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,870	6,501	4.850	2,400	2,119
국 비	11,109	4,200	3,395	1,680	1,834
시 도 비	1,428	542	437	216	233
시군구비	3,333	1,759	1.018	504	52
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 06. : 기본 및 실시설계 용역 완료 및 총사업비 변경

○ 2017. 03. : 사업자 선정 및 공사착공

○ 2019. 06. : 1.2차 사업준공 및 3차 공사 발주

○ 2020. 03. : 4차 사업발주

○ 2020. 06. : 3차 사업준공

□ 향후계획

○ 2021. 03. : 5차 사업 발주

○ 2021. 12. : 준공 및 용수공급

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모(당초 관로L=34.2㎞ → 변경 관로L=58.9㎞)

○ 총사업비(당초 10,000백만원 → 변경 15,870백만원),

○ 사업기간(당초 ′15 ~ ′17 → 변경 ′15 ~ ′19)

사업명

호명상수도 급수구역 확장사업

담당자

환경관리과 현영민(☎054-650-6345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방상수도 취수원이 산재되어 있어 개발행위가 재한됨에 따라 상수원보호구역을 해제하여 도청신도시 상수도 여유량을 호명, 용궁, 개포, 지보 급수지역에 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.

○ 위 치 : 예천군 호명면, 용궁면, 개포면, 지보면 일원

○ 규 모 : 송수관 부설 L=32.2㎞, 가압장 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000	11,005	3,995	-	-
국 비	10,500	6,960	3,540	-	-
시 도 비	1,350	895	455	-	-
시군구비	3,150	3,150	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016. 03. : 사업자 선정 및 공사착공

○ 2017. 12. : 1차사업 도청 신도시, 개포지구 완료

○ 2019. 07. : 2차사업 통합가압장 및 지보지구 완료

○ 2019. 08. : 3차사업 발주

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 준공 및 용수공급

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신음 농어촌마을 공공하수도시설 설치공사

담당자

환경관리과 신언석

(☎650-6371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염총량제 시행에 따른 낙동강 수질개선을 위하여 공공하수처리시설

설치사업으로 청정환경보존 및 지역주민의 주거환경개선을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 예천군 개포면 신음리, 가곡리, 우감리 일원

○ 규 모 : 하수처리시설 Q=100㎥/일, 오수관거 L=7.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,549백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,549	2,777	1,772	0	0
국 비	3,184	2,293	891	0	0
시 도 비	119	9	110	0	0
시군구비	427	49	378	0	0
지 방 채
민간자본
기 타	819	426	393	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  3월 사업 착공

○ 2019. 10월 사업 준공

□ 향후계획

○ 사업완료로 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q=70㎥/일, 오수관거 L=4.43km

→ Q=100㎥/일, L=7.7㎞

○ 총사업비 : 3,600백만원 → 4,549백만원

사업명

제3특화 농공단지 조성

담당자

새마을경제과 김세일(☎650-6232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청이전에 따른 산업용지 수요증가와 신산업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년 (8년간)

○ 위 치 : 보문면 신월리 일원

○ 규 모 : A=194,878㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,700	717	-	538	17,445
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	18,700	717	-	538	17,445
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 예천제3농공단지 지정 신청

- 겅상북도와 사전협의 결과 신청물량 부족으로 4/4분기 신청

○ 기업체 입주의향서 유치 추진

□ 향후계획

○ 2020. 11월 : 산업(농공)단지 지정계획 신청 및 고시

○ 2021. 02월 : 설계심의(VE)

○ 2021. 03월 : 편입토지 및 지장물 보상업무 위탁 용역

○ 2023. 12월 : 공사 준공 및 분양

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2019 예천장터 농산물대축제

담당자

농정과 임도상(☎650-6276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물축제를 통한 풍성한 수확의 기쁨을 군민과 출향인, 관광객 모두가       함께 참여하는 화합의 한마당 축제 개최

○ 지역 우수 농특산물을 대내외에 널리 홍보하여 경쟁력을 확보하고 판매를       증진시켜 농가소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 18.(금) ~ 10. 20.(일), 3일간

○ 위 치 : 예천읍 시가지 일원(보건소, 상설시장)

○ 규 모 : 축제 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  303백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
시군구비			263	300	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료(2019. 10.)

□ 향후계획

○ 금년에 제기된 문제점을 보완하여 다음해에 내실 있는 축제 준비

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

제8회 예천용궁순대축제

담당자

농정과 안태희(☎650-6271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 지역의 대표 음식으로 자리매김 한 용궁 순대를 주제로 명승지인        회룡포, 삼강주막과 연계한 축제를 개최하여 지역 경제 활성화와 관광       기반을 구축하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. 6.(토) ∼7. 7.(일)/2일간

○ 위 치 : 용궁면 읍부리 용궁전통시장 내

○ 규 모 : 축제 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  90백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
시 도 비			30	30	30
시군구비			60	70	70

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료(2019. 7.)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

예천박물관 전시시설 확충 및 수장고 증축사업

담당자

문화관광과 이재완

(☎650-8311)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예천의 유구한 역사에 비해 현재의 예천박물관은 전시 공간이 협소하여 관람객들의       욕구를 충족시키지 못하고 있어 “문화유산의 거점도시, 예천” 이미지에       맞는 전시실로 개편하고, 늘어가는 소장유물을 안전하게 보존할 수장고를       증축하여 주민기대에 부응하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 17. 1. ~ 20. 12.

○ 위 치 : 경상북도 예천군 감천면 복골길 150

○ 규 모 : 부지면적 210,241m2, 건축연면적 2,948.56m2 (지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,650	2,268	1,303	1,079	0
국 비	1,600	773	429	398	0
시 도 비	500	238	123	140	0
시군구비	2,550	1257	751	541	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

○ 17. 6월 : 전시물 제작설치 실시설계 착수

○ 18.12월 : 전시물 제작설치 실시설계 완료

○ 19. 1월 : 예천박물관 전시물 제작설치 착수보고회 개최

○ 19. 3월 : 박물관 리모델링 사업 건축(1차), 전기(1차), 통신공사 완공

○ 19. 7월 : 소방공사 완공

○ 19.10월 : 건축(2차), 전기(2차) 완공

○ 20. 5월 : 어린이체험실 및 로비공간, 외관 등 인테리어 마감 완료

□ 향후계획

○ 20.11월 : 패널, 영상, 상설전시실 인테리어 공사 완료

○ 20.11월 ~ 12월 : 대여유물 이관 및 유물설치

○ 20.12월 : 홍보물 제작 등 시범운영 실시

□ 사업변경 내역

구분	변경 전		변경 후		비고
사업기간	2017. 1. ~ 2019. 12.		2017. 1. ~ 2020. 12.
주요시설	전시실	907.5㎡	상설 전시실	733.41㎡
			기획 전시실	203.5㎡
	수장고	169.2㎡	지하 수장고	208.32㎡
			1층 수장고	99.9㎡
	세미나실	229㎡	세미나실	241.90㎡
사업비	총사업비 : 4,150백만원 - 국 1,600백만원 - 도 500백만원 - 군 2,050백만원		총사업비 : 4,650백만원 - 국 1,600백만원 - 도 500백만원 - 군 2,550백만원		2018.12.31. 특별교부세 5억원 확보(군비로 포함)

사업명

제6회 단샘글씨겨루기 개최

담당자

문화관광과 김구현(☎650-6396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모의 서예휘호대회를 개최함으로서 전국 각지의 서예인이 모이는  큰 장을 마련하여, 선현들의 정신문화가 담긴 경북의 문화 예술과 가치를 계승  발전시키고 서예술 문화의 저변확대에 힘쓰는 동시에, 일반인들의 많은 관심과 참가 및 방문을 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2019. 12

○ 위 치 : 용문면 능천리 329-1, 초정서예연구원

○ 규 모 : 휘호대회 및 전시회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :     70백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	380	240	70	70
국 비
시 도 비	182	140	21	21
시군구비	198	100	49	49
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019.  9. 28. : 휘호대회 개최(431명 참가)

○ 2019. 10. 19. : 시상식 개최

○ 2019. 10. 19. ~ 11. 9. : 전시회 개최

□ 향후계획

○ 내실있는 사업이 될 수 있도록 지속적인 관심 필요

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

예천 대심리 신청사 옆 주차장 조성

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 방문 민원인 증대와 주차공간 부족을 해결하여

민원인들의 교통 불편 해소 및 일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 주차장 조성 A=3,511㎡ (99면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,250	2,500	750
국 비
시 도 비
시군구비	3,250	2,500	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업완료

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

호명 신도시 공영주차장 매입

담당자

건설교통과 오천룡(☎650-6560)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경북도청이전신도시 1단계 사업지구 내 주차장용지를 매입하여 향후 인구증가로 인한 주정차 문제해결과 주차공간을 미리 확보함으로써 주정차로 인한 생활불편요소를 사전에 대비코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2020.

○ 위 치 : 예천군 호명면 산합리 1411, 1425

○ 규 모 : A=5,644㎡(1,707평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,381백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		1,353	1,014	1,014	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  4. : 예천군 공유재산관리계획(주차장 용지 매입) 승인

○ 2017.  9. : 주차장 용지 매매 계약 체결 및 계약금 지급

○ 2017. 11. : 지방재정 투자심사 의뢰

○ 2018.  3. : 주차장 용지 매입 중도금(1차) 지급

○ 2019.  2. : 주차장 용지 매입 중도금(2차) 지급

○ 2020.  3. : 주차장 용지 매입 잔금 지급 및 명의이전 완료

○ 2020.  4. : 무료 주차장 운영 중

□ 향후계획

○ 호명 신도시 공영주차장 시설 정비 완료 후 유료 운영 전환

사업명

벼 건조저장시설 지원

담당자

농정과 김건일(☎054-650-6267)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벼 건조저장시설 설치 지원으로 쌀의 고품질 유지 및 수확기 농가별 판로 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2019. 4.

○ 위 치 : 예천군 개포면 예지로 1216 외 2필지

○ 규 모 : 평사일로 500톤 3기, 호퍼사일로 500톤 2기, 건조기 30톤 4기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,965.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1965.5	675	1290.5
국 비	950	100	850
시 도 비	57	34.5	22.5
시군구비	133	80.5	52.5
지 방 채
민간자본	825.5	460	365.5
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 ~ 2019년 : 벼 건조저장시설 지원 사업완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

금곡천 생태하천 복원사업

담당자

안전재난과 이동욱(☎650-6154)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금곡천 내 각종 콘크리트 구조물(낙차공, 보 등)을 자연형  어도 및 여울을 설치하여 각종 수생물의 이동경로를 확보함으로서 하천 수생태계를 복원하고 친수공간 조성으로 자연과 사람이 공존하는 수변 문화 공간을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022(4년간)

○ 위 치 : 경북 예천군 예천읍 생천리~용문면 원류리

○ 규 모 : 생태하천 복원 L=8.715km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000	1,200	598	2,000	16,800
국 비	600	600	297
시 도 비	12,400	180	89	1,300	10,920
시군구비	7,000	420	212	700	5,880
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019.4 기본 및 실시설계 용역 진행중

○ 2019.8 소규모 환경영향평가 용역 진행중(2020.6 환경청 협의 중)

□ 향후계획

○ 2020.07 생태하천 복원심의 요청(환경공단)

○ 2020.08 건설기술심의(경상북도)

○ 2020.09 총괄 공사 발주

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

제2회 예천 우리소리축제 개최

담당자

문화관광과 김구현(☎650-6396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통국악 발전을 위한 명창 초청 공연 및 지역 문화예술단체와의 공연을

통한 교류의 장을 마련하여 우리소리의 우수성을 대중에게 전달

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2019. 12

○ 위 치 : 한천체육공원 일원

○ 규 모 : 연령별 경연대회 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :     70백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	140	100	20	20
국 비
시 도 비	60	50	4	6
시군구비	80	50	16	14
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. 19. : 경연대회 개최(24개팀)

□ 향후계획

○ 내실있는 사업이 될 수 있도록 지속적인 관심 필요

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

용궁역 관광테마 조성사업

담당자

문화관광과 신정명(☎650-6391)

□ 사업목적 및 필요성

○ 간이역의 정비를 통한 주변 환경 개선과 특색있는 테마관광 자원 조성

○ 회룡포, 삼강주막 등과 연계한, 체류형 관광벨트 조성 추진 및 관광 활성

화와 지역 경제 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2020.(2년간)

○ 위 치 : 예천군 용궁면 용궁역 일원

○ 규 모 : 10,294㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000		920	2,080
시 도 비	1,950		598	1,352
시군구비	1,050		322	728

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2017. 11. 기본계획 수립용역 시행

○ 2018.  8. 용궁역 부지 무상사용 계약 체결

○ 2019.  5. 용궁역 관광명소 활성화전략 수립용역 시행

○ 2019. 11. 기본 및 실시설계 발주(건축‧토목)

○ 2020.  5. 용궁역 전시‧콘텐츠 기획 및 제작설치 발주

□ 향후계획

○ 2020.  8. 용궁역관광테마조성 건축‧토목 공사 발주

○ 2020. 12. 사업 준공

사업명

예천 대심리 큰하무실~석정간

도시계획도로 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=570m B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,400	1,000	1,900	850.0	650.0
국 비	2,430	500	950	425.0	325.0
시 도 비	243	50	95	42.5	32.5
시군구비	2,187	450	855	382.5	292.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 보상 협의 (90%)

○ 공사 1차분 진행 중

□ 향후계획

○ 보상 잔여분 협의 진행

○ 공사 2차분 발주

사업명

예천대심등기소~ 변전소 간 도시계획도로 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=165m B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,300		2,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 보상 협의

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

예천 신예천교~석정 입구  간 인도설치

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 군청 방문 민원인이 증가하고 있으나,

보행자도로가 미설치되어 가중된 보행자들의 교통 불편을 해소하고

쾌적한 도시환경 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 인도설치 L=1,500m, 신호등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원 (투자심의 2,600백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,550	900	1,650	-	-
국 비	500	500
시 도 비
시군구비	2,050	400	1,650	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

제10회 삼강주막 나루터축제 개최

담당자

문화관광과 이유민(☎6902)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼강주막과 나루터의 문화를 활용하는 문화관광 축제를 개최하여 관광객들과       군민들에게 다양한 체험과 볼거리를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 13.(금) ~ 9. 15.(일)

○ 위 치 : 삼강주막 및 삼강문화단지 일원

○ 규 모 : 삼강주막 나루터축제 개최 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	285		110	175
국 비
시 도 비	35		10	25
시군구비	250		100	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’19. 3. ~ 4. : 기본계획 수립

○ ’19. 5. ~ 8. : 세부계획 수립 및 참여단체 섭외, 홍보물 제작

○ ’19. 9 : 축제 개최

□ 향후계획

○ 2020 삼강주막 나루터축제 개최 예정(10. 1. ~ 10. 3.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경 : 110백만원(2019) → 175백만원(2020)

사업명

대심 변전소 뒤 도시계획도로

(중로 1-2호) 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=360m B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원 (투자심의 4,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,700		4,700
국 비
시 도 비
시군구비	4,700		4,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

대심 이미기길  도시계획도로

(중로1-10호) 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=480m B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	-	2,300		3,700
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	-	2,300		3,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

예천 서본공원 조성

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원) 실효에 따른 난개발과 주민 정주여건

악화 등을 사전에 방지하고, 공원을 정비하여 주민편의 시설 및 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 서본리 일원

○ 규 모 : 보상 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	-	5,000	-	1,000
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	-	5,000	-	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 보상 협의 진행 중

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 수립 후 사업 시행

사업명

2019 예천국제스마트폰영화제

담당자

문화관광과 김구현(☎650-6396)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화도시 예천의 브랜드 창출 및 스마트폰영화제 선점

○ 관광문화도시 이미지 대외 홍보 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2019. 12

○ 위 치 : 예천군 호명면 경북도청 신도시 일원

○ 규 모 : 조직위구성, 홍보 및 접수, 오리엔테이션, 영화제(2일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :     170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	370		170	200
국 비
시 도 비	30			30
시군구비	340		170	170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. 18. : 개막식 개최

○ 2019. 10. 19. : 시상식 개최

□ 향후계획

○ 내실있는 사업이 될 수 있도록 지속적인 관심 필요

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

농산물가공지원센터 설립

담당자

농업기술센터 생활자원팀

정미정 (☎650-6485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업의 6차 산업화를 통한 농가소득 향상과 발전 잠재력을 개발하고 농산물 가공 기술의 효율적인 이전, 소규모 창업 여건 보완 등 가공 생산 체계 기반 구축 등 종합적 지원으로 농업인의 농외소득 활동 기반 마련을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 경상북도 예천군 예천읍 지내리 253-3, 253-11

○ 규 모 : 가공지원센터 개축(608㎡), 부속건물 신축(385㎡), 가공장비 설치(62종)

※ 연면적 – 608.25㎡, 건축면적 – 494.49㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800	-	-	1,.290	1,510
국 비	500	-	-	200	300
시 도 비	150	-	-	150	-
시군구비	2,150	-	-	940	1,210
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   0%)

○ 2019년 12월 투자심사 확정 및 내년도 국·도비 예산 확보

□ 향후계획

○ 2020년 음료가공장비 및 기계실 장비 구축을 위해 예산 확보

○ 2020년 실시설계완료 후 일상감사, 계약원가 심사 등 행정절차 진행예정

○ 2020년 건축공사 계약 및 건축공사 착공예정

□ 사업변경 내역(해당 없음)

10-2. 지방채 발행사업

우리 예천군에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행한 사업이 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 예천군에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	예천군 하수관거정비 임대형 민자사업	푸른예천 환경(주)	43,227	14,995	4,172	4,223	62,933	2015.5. ~ 2035.5.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

예천군 하수관거정비 임대형 민자사업

담당자

환경관리과 신언석(☎650-6371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수, 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 국민의 삶의 질을 향상시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 5 ~ 2035. 5             ○ 위치 : 예천읍 일원

○ 민간사업자 : 푸른예천환경 주식회사  ○ 총사업비 : 43,227백만원

○ 사업규모 : 오수관거 44.542㎞, 배수설비 3,190개소

□ 재정부담 현황

○ 관리운영권 설정 20년(2015 ~ 2035)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	86,323	14,995	4,172	4,223	62,933
국 비	51,212	9,230	2,561	2561	36,860
시 도 비
시군구비	14,044	3,258	934	1,034	8,818
기 타	21,067	2,507	677	628	17,255

□ 추진단계

○ 2015. 5월 사업 준공이후 운영 중

□ 향후계획

○ 2035. 5월까지 분기별 정부지급금 지급

□ 사업변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	91,304,825,911	74,773,547,893	감 16,531,278,018
시설임대료(경상가)	82,025,074,730	67,045,518,073	감 14,979,556,657
운영비(불변가)	9,279,751,181	7,728,029,820	감 1,551,721,361