Ⅱ	특수공시

2019 회계연도 특수공시 사업내역

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	’19년까지 투자비	비고
1	녹생문화상생 벨트 조성	- 내용: 삼강문화단지 일원에 강문화전시관, 역사전시마당, 보부상문화마당, 수변공연장, 생태공원, 캠핑장 등을 조성	923	77,785
2	호명신도시 공영주차장 토지매입	- 사업내용: 공용주차장 조성 토지 매입 - 면적 5,644㎡(1,707평) - 위치: 예천군 호명면 산합리 1411, 1425	3,381	2,367
3	예천박물관 전시시설 확충 및 수장고 증축	- 박물관 수장고 확장 (138.51㎡(42평)→181.72㎡(55평) - 기획전시실, 어린이체험실, 연구실, 자료실 등 기능 확충	4,650	3,570
4	금곡천 생태하천 복원사업	- 위치: 예천군 예천읍 생천리~용문면 원류리 내용: 생태하천 복원(L=8.715km)	20,000	1,200
5	2019년 예천세계활축제 추진	내용: 예천세계활축제 개최(행사 1식)	800	800

녹색문화상생벨트 조성

사업 담당: 문화관광과, 민선기(☎ 054-650-6908)

	목 적
○ 낙동강 연안의 우수한 강 문화와 생태자원을 관광자원으로 특화 ○ 기존 관광자원과 연계하여 녹색문화 신 성장 동력으로 활용

1		사업개요

○ 위    치 : 예천군 풍양면 삼강리 일원(삼강문화단지)

○ 사업기간 : 2011년∼2020년

○ 사업규모 : 부지 210,389㎡, 건축 5,736㎡(민자제외)

○ 총사업비 : 923억원(국비 487억, 도비 63억, 군비 228억, 민자 145억)

○ 사업내용

- 강문화전시관, 역사전시마당, 보부상문화마당, 수변공연장, 생태공원, 캠핑장 등

2		연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계(집행액)	92,316	70,633	7,152	14,501
국 비	48,731	43,723	5,008
도 비	6,265	5,624	641
군 비	22,819	21,316	1,503
민 자	14,501			14,501

3		사업추진 내역

○ 2011년11월~2014년10월  관련행정절차 및 설계용역 완료

○ 2012년 2월~2014년12월  토지보상업무 완료

○ 2015년 1월  기반시설 및 건축, 조경공사 착공

○ 2015년12월  문화재 정밀발굴조사 완료

○ 2018년12월  캠핑장 조경 조성공사 착공

○ 2019년 4월  전시물 제작⦁설치 용역 완료

○ 2019년 7월  강문화전시관 임시개장

○ 2019년 7월  캠핑장 건축공사 착공

○ 2019년12월  캠핑장 조경 조성공사 및 캠핑장 건축공사 준공

○ 2019년12월  강문화전시관 주변 정비(도로) 사업 착공

○ 2020년 3월  녹색문화상생벨트 다목적광장 조성공사 착공

○ 2020년 4월  녹색문화상생벨트 어린이 놀이터 조성공사 착공

낙동강 역사전시 및 보부상 문화마당 주변 정비공사 착공

○ 2020년 5월  삼강문화단지 외부사인 제작 및 설치 착수

○ 2020년 6월  강문화전시관 주변 정비(도로) 사업 준공

4		기대효과

○ 낙동강 문화와 생태의 관광자원화를 통한 교육, 힐링, 관광의 복합적

관광단지로 특화

○ 회룡포 등 주변관광지와의 연계를 통한 관광권역화로 북부권을

대표할 관광지로 발전

5		관련 사진 등 첨부

호명 신도시 공영주차장 매입

사업 담당: 건설교통과, 오천룡(☎ 054-650-6560)

	목 적
○ 호명 신도시 주차장용지를 매입하여 향후 인구 증가로 인한 주정차 문제 해결과 주차공간을 미리 확보함으로써 주정차로 인한 생활불편요소를 사전에 대비하고자 함.

1		사업개요

○ 위    치 : 예천군 호명면 산합리 1411, 1425

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

○ 사업규모 : A=5,644㎡(1,707평)

○ 총사업비 : 3,381백만원

○ 사업내용

- 주차장 용지 매입(2필지, A=5,644㎡)

2		연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계(집행액)	3,381	1,353	1,014	1,014	-
국 비
도 비
군 비	3,381	1,353	1,014	1,014	-

3		사업추진 내역

○ 2017년  4월 예천군 공유재산관리계획(주차장 매입) 승인

○ 2017년  9월 주차장 용지 매매 계약 체결 및 계약금 지급

○ 2017년 11월 지방재정 투자심사 의뢰

○ 2018년  3월 주차장 용지 매입 중도금(1차) 지급

○ 2019년  2월 주차장 용지 매입 중도금(2차) 지급

○ 2020년  3월 주차장 용지 매입 잔금 지급 및 명의이전 완료

○ 2020년  4월 무료주차장 운영(향후 유료 전환 예정)

4		기대효과

○ 도심 내 주차 공간 확보를 통한 주·정차 문화 개선에 이바지

○ 도시개발 이전 공영주차장을 확보함으로써 도시생성에 따른 문제를 선제적으로 대응하여 행정 만족도 제고에 기여

5		관련 사진 등 첨부

예천박물관 전시시설 확충 및 수장고 증축

사업 담당: 문화관광과, 이재완(☎ 054-650-8311)

	목 적
○ 예천박물관의 기존 시설을 용도에 걸맞게 리모델링하여 수준높은 전시시설 확충 및 지역문화유산의 체계적 관리를 도모하고자 함

1		사업개요

○ 위    치 : 예천군 감천면 복골길 150

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년.

○ 사업규모 : 박물관 증축, 연면적(2,313.68㎡→2,945.38㎡, 지하1층, 지상2층)

○ 총사업비 : 46.5억원(국비 21억, 도비 5억, 군비 20.5억)

○ 사업내용

- 수장고 확장(138.51㎡(42평)→181.72㎡(55평)

- 기획전시실, 어린이체험실, 연구실, 자료실 등 기능 확충

2		연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계(집행액)	4,650	2,267	1,303	1,080	-
국 비	2,100	773	790	537	-
도 비	500	237	169	94	-
군 비	2,050	1,257	344	449	-

3		사업추진 내역

○ ‘16.  8. : 지방 투자심사(결과 : 국비확보 후 시행, 조건부 승인)

○ ‘17.  3. : 제안공모 공고

○ ‘17.  5. : 우선협상대상자 선정

○ ‘17.   6. : 설계 및 전시물 제작설치 계약 및 착수

○ ‘18.   2. : 공사부문(건축, 전기, 소방, 통신) 설계 완료

기술자문 심사(승인)

○ ‘18.   3. : 계약원가심사 요청(건축, 전기, 소방)

철거공사 시행

○ ‘18.   4. : 철거공사 완료 및 폐기물처리 용역완료

○ ‘18.   6. : 공사착공 및 감리착수(건축, 전기, 소방, 통신)

○ ‘18. 10. : 전시부문 설계 완료

○ ‘18. 12. : 특별교부세 5억 확보

○ ‘19.  2. : 건축공사(2차) 설계용역 착수

○ ‘19.  3. : 건축·전기·통신공사 완공

○ ‘19.  4. : 건축공사(2차) 설계용역 완료

○ ‘19.  5. : 건축공사(2차) 착공

○ ‘19.  7. : 소방공사 완공

○ ‘19.  8. : 설계 및 전시물 제작설치 용역 중지

○ ‘19. 10. : 건축공사(2차) 완공

○ ‘19. 12. : 전시물 제작 및 설치 착수

○ ‘20.   5. : 어린이체험실 및 로비공간, 외관 등 인테리어 마감

○ ‘20.   8. : 유물복제물 제작 완료

○ ‘20.   9. : 영상, 패널, 디자인, 영상물 제작 완료

○ ‘20.  11. : 패널, 영상, 상설전시실 인테리어 공사 완료

○ ‘20.  12. : 대여유물 이관 및 유물설치

○ ‘20.  12. : 홍보물 제작 등 시범운영 실시

4		기대효과

○ 신도청 시대, 박물관 기능 강화로 군민의 문화적 자긍심 고취와 지역문화 융성기반 구축

○ 지역문화유산의 체계적 관리와 정체성 확보

5		관련 사진 등 첨부

금곡천 생태하천 복원사업

사업 담당: 안전재난과, 이동욱(☎ 054-650-6154)

	목 적
○ 지방하천(금곡천)을 자연상태로 복원하여 수생태계 종적 연속성 확보, 생태환경 개선, 자정력 증대로 수질개선 및 자연과 사람이 조화를 이루는 생태하천을 조성하고자 함.

1		사업개요

○ 위    치 : 예천군 예천읍 생천리~용문면 원류리

○ 사업기간 : 2019~2022(4년간)

○ 사업규모 : 생태하천 복원 L=8.715km

○ 총사업비 : 20,000백만원

○ 사업내용

- 축제 및 보축 L=2.341㎞, 어도 및 낙차공 9개소, 생태탐방로 1개소,

어류서식처 2개소, 생태저류지 1개소 등

2		연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계(집행액)	20,000	-	1,200	2,000	16,800
국 비	600	-	600
도 비	12,400	-	180	1,300	10,920
군 비	7,000	-	420	700	5,880

3		사업추진 내역

○ 2019. 4월 : 실시설계용역 착수

○ 2019. 8월 : 소규모 환경영향평가 용역 착수

○ 2020. 5월 : 설계경제성검토(VE) 용역 완료

○ 2020. 6월 : 문화재 현상변경(문화재청, 경북도) 완료

○ 2020. 7월 : 소규모 환경영향평가 협의의견 반영

○ 2020. 8월 : 환경부 기술검토(대구지방환경청,환경공단 설계검토)

○ 2020. 9월 : 생태하천복원심의회 의뢰(경상북도)

○ 2020.10월 : 건설기술심의(경상북도) 및 원가심사

○ 2020.11월 : 공사 착공

○ 2022.12월 : 준공

4		기대효과

○ 이수·치수·환경의 조화를 통해 재해예방 및 자연형 하천으로 복원

○ 하천생태계 연결성 확보 및 하천자정능력 증진으로 수생태계 건강성 향상

○ 쾌적한 수변환경 조성 및 고유의 문화, 지역성을 고려한 하천문화를 통해 삶의 질 향상

5		관련 사진 등 첨부

2019 예천세계활축제 추진

사업 담당: 문화관광과, 조재익(☎ 054-650-6032)

	목 적
○ 궁장과 시장을 보유한 국궁과 세계적 선수를 배출한 양궁을 통해 명실공히 한국활의 메카로 인정받는 예천의 활브랜드 축제를 통해 정체성과 인지도를 높이고 문화관광 상품으로 육성

1		사업개요

○ 명     칭 : 2019 예천세계활축제(Yecheon World Archery Festival 2019)

○ 기     간 : 2019.10.18.(금) ~ 20(일) / 3일간

○ 장     소 : 활로 하나되는 세계

○ 총사업비 : 8억원(국비 1억, 도비 0.5억, 군비 6.5억)

○ 주최/주관 : 예천군·매일신문사 / 예천세계활축제추진위원회

○ 후     원 : 경상북도, 대한궁도협회, 대한양궁협회, NH농협은행예천군지부

2		연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계(집행액)	800	-	800	-	800
국 비	100	-	100	-	100
도 비	45	-	45	-	45
군 비	655	-	655	-	655

※예천활축제는 격년 행사축제입니다.

3		사업추진 내역

월별	내 용		비고
	전 반 기	후 반 기
1월	⦁홈페이지 운영 계약	⦁2019 활축제 기본구상
2월	⦁추진방향 내부검토	⦁축제 시기 ․ 장소 결정 ⦁회장 배치계획 구상
3월	⦁감독 선임(3월~10월/8개월) ⦁보조금신청 및 예산확보(8억원)	⦁활관련 단체 등 간담회 ⦁활축제 프로그램 제안공모
4월	⦁축제콘텐츠 확보 관련 회의(주1회) ⦁사전홍보 물품 제작(3종)	⦁기본계획 수립
5월	⦁사전 리플릿 제작(5,000부) ⦁관내 도로변 대형광고판 홍보(3개소) ⦁국궁 ․ 양궁대회 현장 홍보(수시)	⦁포스터 게첨(위생 ․ 숙박 700개소) ⦁종합홍보계획 수립 ⦁활 ․ 화살만들기 공모전 추진
6월	⦁온라인 사전 홍보 용역 발주 ⦁2차 홍보물품 및 리플릿 제작	⦁전국 학생 미술 실기대회 추진 ⦁전국 양궁동호인대회 추진
7월	⦁세계활쏘기 대회 계획 수립 ⦁전시 ․ 체험 ․ 판매부스 모집	⦁VR체험장 계획 수립 ⦁활서바이벌 대회 모집
8월	⦁세계활전시관 설치 운영 계획 ⦁활쏘기체험, 활사냥체험, 활서버이벌 등 계획 수립	⦁자원봉사자 모집 및 운영 계획 ⦁통합홍보 용역 발주
9월	⦁실행계획 수립 ⦁부서별 준비상황 보고회 개최 ⦁안전관리계획 수립 ⦁거리퍼레이드 계획 수립	⦁개막식 ․ 폐막식 계획 수립 ⦁가로등 배너 설치 ⦁TV스팟 광고 홍보 ⦁식권 제작
10월	⦁행사장 부스 설치 ⦁자원봉사자 발대식 개최 ⦁안전보험 가입	⦁활축제 개최 ⦁화보집 제작 ⦁축제 결과보고

4		기대효과

○ 활축제의 대표 콘텐츠 저변확대

∙ 세계전통활쏘기 대회, 활쏘기 체험, 활 서바이벌 대회, 필드아처리,  국궁ㆍ양궁동호인 대회 등

○ 지난 축제의 미비점을 보완하고 장점을 확대하여“2019 예천세계 활축제”의 차별성 부각

○ 푸드트럭 및 휴식공간을 확대하여 축제장의 체류 여건을 개선하고 행사장 전체를 포토존으로 활용할 수 있도록 공간 구성

○ 세계전통활연맹과 협력하여 국제적인 매뉴얼을 제작. 세계인이 공감할 수 있는 다양한 활쏘기 프로그램 운영

5		관련 사진 등 첨부