		2020회계연도 지방재정공시(결산)

2020회계연도 지방재정공시(결산)

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 예천군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
녹색문화상생벨트 조성	92,316	72,697	2,565	659	16,395	2021	2010	99
보문 상수도 급수구역 확장	15,870	11,351	2,400	2,119	-	2021	2014	95
예천 제3농공단지 조성사업	18,700	717	-	1,024	16,959	2023	2015	15
회룡포 힐링정원 테마공원 조성	2,000	564	1,372	64	-	2020	2017	100
금곡천 생태하천 복원사업	20,000	1,200	2,000	2,000	14,800	2022	2018	15
예천 대심리 큰하무실~석정간 도시계획도로 개설	4,400	2,900	850	650	-	2021	2018	95
예천 대심 등기소~변전소 간 도시계획도로 개설	2,300	2,300	-	-	-	2021	2019	100
예천 신예천교 ~석정 입구 간 인도 설치	2,550	2,550	-	-	-	2020	2019	100
대심 변전소 뒤 도시계획도로 (중로 1-2호) 개설	4,700	4,700	-	-	-	2020	2019	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
대심 이미기길 도시계획도로 (중로1-10호) 개설	6,000	2,300	-	3,700	-	2021	2019	30
예천 서본공원 조성	6,000	5,000	-	1,000	-	2021	2019	70
예천 국궁장 조성사업	3,980	-	434	3,546	-	2021	2019	50
문화체육센터 리모델링 사업	2,000	-	938	1,062	-	2021	2019	55
신도시 복합커뮤니티센터 건립	37,300	2,432	3,916	22,567	8,385	2022	2019	10
제49회 춘계전국중고 육상대회	150	-	150	-	-	2020	2019	100
농산물가공지원센터 설립	2,930	-	1,290	1,640	-	2021	2019	60
공설운동장 리모델링 사업	5,300	-	320	4,780	200	2022	2020	30
용문사 주변 관광자원화 사업	3,000	-	-	576	2,424	2023	2020	5
삼강문화단지 주변 관광자원화사업	17,760	-	-	400	17,360	2025	2020	5
서본·노상지구 새뜰마을사업	3,347	-	329	719	2,299	2023	2020	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘20년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

녹색문화상생벨트 조성

담당자

문화관광과 민선기(☎650-6908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙동강 연안 및 백두대간에서 이어지는 다양한 생태 및 역사자원을 정비ㆍ

계승하고 강문화와 연계를 도모하여 녹색문화 신성장 동력 및 지역 관광       자원으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ∼ 2021년

○ 위 치 : 예천군 풍양면 삼강리 58-1번지 일원

○ 규 모 : A=210,389㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,316백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	92,316	72,697	2,565	659	16,395
국 비	48,731	44,806	1,964	499	1,462
시 도 비	6,265	6,022	124	35	84
시군구비	22,819	21,869	477	125	348
지 방 채
민간자본	14,501				14,501
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2008.  9월 : 대경권 광역경제권 선도프로젝트 선정

○ 2010.  3월 : 기본계획수립(문화체육관광부)

○ 2010. 11월 : 중앙 투융자 심사 승인(행정안전부)

간이예비타당성조사 완료(기획재정부)

○ 2011. 11월 : 인허가 및 설계용역 착수

○ 2012.  2월 : 용지매입 및 보상 착수(한국농어촌공사)

○ 2014.  4월 : 관광지 지정 및 조성계획 승인(경상북도)

○ 2014.  8월 : 중간평가 완료(문화체육관광부)

○ 2014. 10월 : 관련행정절차 및 설계용역 완료

○ 2014. 12월 : 용지매입 및 보상 완료

○ 2015.  1월 : 기반시설 및 건축, 조경공사 착공

○ 2015. 12월 : 문화재 발굴조사 완료

○ 2017.  8월 : 총사업비 조정 완료(기획재정부)

○ 2017.  9월 : 전시물 제작·설치사업 착수

○ 2018.  3월 : 민간사업자 선정 및 MOU체결

○ 2018.  5월 : 기반시설 및 건축, 조경공사 준공

관광지 지정 및 조성계획 변경 승인(경상북도)

○ 2018. 12월 : 캠핑장 조성공사 착공

○ 2019.  4월 : 전시물 제작·설치사업 완료

○ 2019.  6월 : 캠핑장 건축공사 착공

○ 2019. 12월 : 캠핑장 조성공사, 캠핑장 건축공사 준공

○ 2019. 12월 : 녹색문화상생벨트 강문화전시관 주변 정비(도로) 착공

○ 2020.  3월 : 녹색문화상생벨트 다목적광장 조성공사 착공

○ 2020.  4월 : 녹색문화상생벨트 어린이 놀이터 조성공사 착공

낙동강 역사전시 및 보부상 문화마당 주변 정비공사 착공

○ 2020.  6월 : 녹색문화상생벨트 강문화전시관 주변 정비(도로) 준공

○ 2020. 11월 : 녹색문화상생벨트 어린이 놀이터 조성공사  준공

낙동강 역사전시 및 보부상 문화마당 주변 정비공사 준공

○ 2020. 12월 : 녹색문화상생벨트 다목적광장 조성공사 준공

녹색문화상생벨트 조성사업(삼강문화단지) 확정측량 시행

예천 삼강 관광지 조성계획 변경 수립 용역 시행

녹색문화상생벨트 주차장 진입도로 개설공사 시행

○ 2021.  2월 : 민자시설 건립 실시협약 체결

○ 2021.  6월 : 민자부지 매각(2,805㎡, 213백만원)

□ 향후계획

○ 2021년 : 관광지 조성계획 변경

○ 2022년 : 민간자본 투자시설 착공 및 준공, 관광지 준공

○ 2023년 이후 : 총사업비 정산 및 반납

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 조정(2017년)

- 당초 총사업비 : 115,452백만원(국비 56,821, 지방비 42,680, 민자 15,951)

- 변경 총사업비 : 92,316백만원(국비 48,731, 지방비 29,084, 민자 14,501

사업명

보문상수도 급수구역 확장

담당자

맑은물사업소 현영민(☎054-650-6981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예천상수도의 여유량을 미 급수지역인 보문면 일원에 공급함으로써 미 급수지역의 상수도 보급률 향상 및 수도운영 효율성 제고로 지역주민의 보건위생 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

○ 위 치 : 예천군 보문면 일원

○ 규 모 : 송·배·급수관 부설 L=69.3㎞, 가압장 5개소, 배수지 1개소(400톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,870	11,351	2,400	2,119
국 비	7,595	7,595
시 도 비	4,549	979	1,896	1,674
시군구비	3,726	2,777	504	445
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016. 06. : 기본 및 실시설계 용역 완료 및 총사업비 변경

○ 2017. 03. : 사업자 선정 및 공사 착공

○ 2019. 06. : 1.2차 사업준공 및 3차 공사 착공

○ 2020. 03. : 4차 사업착공

○ 2020. 06. : 3차 사업준공

○ 2021. 02. : 5차 사업착공

○ 2021. 05. : 4차 사업준공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 5차 및 총괄 준공 후 용수공급

□ 사업변경 내역

○ 사업규모(당초 관로L=34.2㎞ → 변경 관로L=58.9㎞)

○ 총사업비(당초 10,000백만원 → 변경 15,870백만원),

○ 사업기간(당초 ′15 ~ ′17 → 변경 ′15 ~ ′21)

사업명

예천 제3농공단지 조성사업

담당자

새마을경제과 김세일 (☎650-6232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제2농공단지 분양이 완료되어 감에 따라 신규 산업용지 공급을 하고,         농촌 균형발전과 농가소득 증대 도모 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년

○ 위 치 : 예천군 보문면 신월리 산 68번지 일원

○ 규 모 : A=195,000㎡ (58,987평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,700	717		1,024	16,959
국 비
시 도 비
시군구비	18,700	717		1,024	16,959
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2015.  3월 : 입지 타당성 심사 (농식품부)

○ 2015. 10월 : 투융자심사 조건부 승인 (행자부)

○ 2016.  3월 ~ 2017. 4월 : 기본계획 및 실시설계 완료

○ 2016. 10월 ~ 현재 : 각종 영향평가 시행 (교통, 문화재, 환경)

○ 2020.  5월 : 자체 투자심사(재심사)

○ 2020. 10월 : 산업단지 지정계획 신청 (국토교통부)

○ 2021.  1월 : 지정계획 고시 (경상북도 고시 제2021-4호)

○ 2021.  5월 : 주민설명회 개최

□ 향후계획

○ 2021.  6월 : 관련부서 및 관계기관 협의

○ 2021. 11월 : 산단계획통합심의(경상북도)

○ 2021. 12월 : 산단계획 승인·고시

○ 2022.  3월 : 보상 및 착공

○ 2023. 12월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 284,000㎡ → 194,878㎡

○ 총사업비 : 28,600백만원 → 18,700백만원

○ 사업기간 : 2015년~2019년 → 2016년 ~ 2023년

○ 구    분 : 특화농공단지 → 일반농공단지

사업명

회룡포 힐링정원 테마공원 조성

담당자

문화관광과 민선기(☎650-6908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 회룡포의 명성에 맞는 힐링정원 조성을 통해 회룡포 본연의 경관 복원을

통한 관광인프라를 구축하고 관광객에게 새로운 즐길거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ∼ 2020년

○ 위 치 : 예천군 용궁면 대은리 416-2번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 A=4,873㎡, 수림복원 L=710m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	564	1,372	64
국 비	1,000	277	692	31
시 도 비	300	84	207	9
시군구비	700	203	473	24
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018년 : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ 2019.  1월 ~ 8월 : 문화재현상변경 및 편입토지 협의

○ 2019.  9월 : 미로공원 조성사업 착수

○ 2019. 12월 : 수림복원 사업 착수

○ 2019.  4월 : 수림복원 사업 준공

○ 2020.  7월 : 미로공원 조성사업 준공

○ 2021년 : 대상지 잔여 사업 시행

□ 향후계획

○ 2022년 이후 : 총사업비 정산 및 반납

사업명

금곡천 생태하천 복원사업

담당자

안전재난과 손성민 (☎650-6154)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태복원 및 깨끗하고 쾌적한 수변환경 조성으로 예천군민의 삶의 질 향상과       생명력 있는 하천으로 관리하여 건강하고 살아있는 생태하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년 (4년)

○ 위 치 : 예천군 예천읍 생천리 ~ 용문면 원류리

○ 규 모 : 생태하천복원 L=8.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	20,000	1,200	2,000	2,000	14,800
국 비	600	600
시 도 비	12,400	180	1,300	1,300	9,620
시군구비	7,000	420	700	700	5,180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 2021.  4월 : 생태하천복원심의회 기술검토 완료

○ 2021.  5월 : 경북도 건설기술심의위원회 심의 완료

□ 향후계획

○ 2021.  9월 : 사업총괄 발주

○ 2022. 12월 : 공사 준공

사업명

예천 대심리 큰하무실 ~ 석정간 도시계획도로 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및  일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=570m B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,400	2,900	850	650
국 비	2,200	1,450	425	325
시 도 비	220	145	42	32
시군구비	1,980	1,305	382	292
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

예천 대심 등기소 ~ 변전소간 도시계획도로 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및  일자리 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=165m B=15.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300	2300
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	2300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

예천 신예천교 ~ 석정 입구 간 인도 설치

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 군청 방문 민원인이 증가하고 있으나,

보행자도로가 미설치되어 보행자들의 교통 불편 해소하고

쾌적한 도시환경 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 인도설치 L=1,500m, 신호등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,550	2,550
국 비	500	500
시 도 비
시군구비	2,050	2,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

대심 변전소 뒤 도시계획도로

(중로 1-2호) 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자치 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=360m B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,700	4,700
국 비
시 도 비
시군구비	4,700	4,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

대심 이미기길  도시계획도로

(중로1-10호) 개설

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 신청사 이전에 따른 주변 도로 개설을 통하여 민원인들의

교통 불편 해소 및 일자치 창출에 따른 지역경기 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 대심리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=480m B=20.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	2,300		3,700
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	2,300		3,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 완료로 쾌적한 도시환경 조성하여 주변발전 도모

사업명

예천 서본공원 조성

담당자

도시과 이제성(☎650-6949)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원) 실효에 따른 난개발과 주민 정주여건

악화 등을 사전에 방지하고, 공원을 정비하여 주민편의 시설 및 공간을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 서본리 일원

○ 규 모 : 보상 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	5,000		1,000
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	5,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 보상 협의 진행 중

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 수립 후 사업 시행

사업명

예천 국궁장 조성사업

담당자

체육사업소 박명진(☎650-6415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남산공원 내 위치한 국궁장을 양궁장 주변으로 확장 이전하여  국궁문화를       계승 발전시키고 전국규모 대회 유치를 통한 지역경기 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ∼ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 청복리 231-8번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 9,202㎡, 건축 연면적 517.7㎡, 사대수 4관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,980백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,980		434	3,546
국 비	960			960
도 비	1,500			1,500
군 비	1,520		434	1,086

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 2019.  3월 ~  4월 : 기본계획 및 군 관리계획(체육시설) 결정 용역

○ 2019.  4월 ~ 10월 : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 완료

○ 2020.  2월 : 기본계획 수립

○ 2020.  3월 ~  6월 : 편입토지 감정평가 및 용지보상

○ 2020.  6월 ~ 11월 : 실시설계용역 완료

○ 2020. 12월 ~ 2021. 2월 : 건축협의, 기술자문, 원가심사, 일상감사

○ 2021.  3월 : 입찰 및 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12월 : 공사 준공

사업명

문화체육센터 리모델링 사업

담당자

체육사업소 박명진(☎650-6415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 문화체육센터 리모델링을 통해 이용자의 안전과 편의를 제공함은       물론 각종 대회개최 및 유치로 지역경기 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ∼ 2021년

○ 위 치 : 예천군 예천읍 청복리 150번지

○ 규 모 : 대지면적 72,434㎡, 건축 연면적 3,255.71㎡, 지상2층

○ 1차 : 지붕 및 외부 리모델링, 2차 : 체육관 마룻바닥 등 내부 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000		938	1,062
국 비	600		281	319
도 비	420		197	223
군 비	980		460	520

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  55%)

○ 2019.  4월 ~ 10월 : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 완료

○ 2020.  2월 : 기본계획 수립

○ 2020.  4월 : 1차 리모델링 실시설계용역 완료

○ 2020.  5월 : 1차 리모델링 건축협의, 기술자문, 원가심사, 일상감사

○ 2020.  6월 : 1차 리모델링 입찰 및 계약

○ 2020.  6월 ~ 12월 : 1차 리모델링 공사 착공 및 준공

○ 2021.  5월 : 2차 리모델링 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2021.  6월 ~  7월 : 2차 리모델링 기술자문, 원가심사, 일상감사

○ 2021.  8월 ~ 12월 : 2차 리모델링 공사 착공 및 준공

사업명

신도시 복합커뮤니티센터 건립

담당자

재무과 정재영(☎650-6890)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 신도시에 복합커뮤니티센터를 건립하여 주민들의 여가활동 공간으로 제공하고, 청소년들의 건전육성과 문화적 욕구를 충족시키고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위    치 : 호명면 산합리 1123번지 일원

○ 규    모 : 부지 5,519㎡, 연면적 10,816㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 가족센터, 다함께돌봄센터, 행정복지센터출장소(호명면),

건강생활지원센터, 지역아동센터, 청소년문화의 집 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,300백만원(토지매입비 17억원 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	37,300	2,432	3,916	22,567	8,385
국 비	2,725		402	1,611	712
시 도 비	10,146		1,173	5,860	3,113
시군구비	17,429	2,432	2,341	8,096	4,560
지 방 채	7,000			7,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020년까지 : 부지매입 및 설계용역 완료, 건설공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 10월 : 골조공사 완료

○ 2021. 12월 : 지붕공사 완료 및 내부 수장공사

○ 2022.  6월 : 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경(9,725㎡→10,816㎡)에 따라 사업비 26억원 증가

사업명

제49회 춘계전국중고육상대회

담당자

체육사업소 이경직(☎650-6397)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 육상대회 개최를 통한 지역경기 활성화와 육상 저변 확대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 06. 29. ~ 2020. 07. 2 (4일간)

○ 위 치 : 예천읍 충효로 395(공설운동장 일원)

○ 규 모 : 전국 육상대회 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	150	-	150	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	10	-	10	-	-
시군구비	140	-	140	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 제49회 춘계전국중고육상대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 전국 단위 육상대회 지속 유치로 지역경제 활성화에 기여

사업명

농산물가공지원센터 설립

담당자

농업기술센터 농산물가공팀

박정호 (☎650-6451)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업의 6차 산업화를 통한 농가소득 향상과 발전 잠재력을 개발하고 농산물       가공 기술의 효율적인 이전, 소규모 창업 여건 보완 등 가공 생산 체계 기반       구축 등 종합적 지원으로 농업인의 농외소득 활동 기반 마련을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ∼ 2021년

○ 위 치 : 경상북도 예천군 예천읍 지내리 253-3번지 일원

○ 규 모 : 가공지원센터 개축(608㎡), 다목적교육관 신축(498㎡), 가공장비 설치(62종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,930		1,290	1,640
국 비	900		200	700
시 도 비	150		150
시군구비	1,750		940	940
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 2020.  2월 ~  7월 : 가공지원센터 건축설계 용역 시행

○ 2020.  8월 ~ 12월 : 가공지원센터 건축공사 시행

○ 2020.  8월 ~ 12월 : 가공장비(음료라인 및 기타장비)제조 구매 및 설치

○ 2020. 10월 ~ 12월 : 다목적교육관 건축설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 2021. 1월 ~ 5월 : 가공장비(잼농축.건식라인.기타 기자재)제조 구매 설치

○ 2021. 8월 ~12월 : 다목적교육관 신축공사

사업명

공설운동장 리모델링 사업

담당자

체육사업소 박명진(☎650-6415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 예천공설운동장의 노후된 시설물의 리모델링을 통해 2022 예천아시아          U20육상경기선수권대회의 성공적인 개최와 육상경기장으로서 최적의         환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 예천군 예천읍 동본리 186번지 공설운동장 일원

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

○ 사 업 량 : 증축 및 리모델링 약 1,500㎡

○ 사업내용 : 본부석 캐노피 확장, 각종 기능실 증축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,300		320	4,780	200
국 비	1,200			1,000	200
시 도 비	500			500
시군구비	3,600		320	3,280

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021.  1월 : 설계용역 계약 및 착수

○ 2021.  2월 : 기본 및 중간설계(자문 및 실무협의)

○ 2021.  3월 : 설계용역 중간보고회 개최 및 실시설계

○ 2021.  4월 ~ 5월 : 각종 행정절차 이행(건축협의, 건축위원회심의 등)

○ 2021.  6월 : 설계용역 완료, 입찰

□ 향후계획

○ 2021.  7월 : 계약 및 착공, 감리용역 착수

○ 2022.  4월 : 공사 준공

사업명

용문사 주변 관광자원화 사업

담당자

문화관광과 민선기(☎650-6908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 역사문화 자원인 용문사 주변 산재된 관광자원의 거점공간 구축 및

소백산 자락의 풍수명당과의 연계성 강화로 역사문화자원과 생태자원이

조화되는 역사문화 관광지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼ 2023년

○ 위 치 : 예천군 용문면 내지리 617번지 일원

○ 규 모 : A=11,526㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000			576	2,424
국 비
시 도 비	1,950			368	1,582
시군구비	1,050			208	842
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019.  9월 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 완료

○ 2020. 10월 : 투융자 심사 및 중기지방재정계획 반영

○ 2021.  3월 : 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2021.  9월 : 건축 실시설계 용역 시행

○ 2022.  1월 ~ 2023. 12월 : 공사 착수 및 준공

사업명

삼강문화단지 주변 관광자원화 사업

담당자

문화관광과 민선기(☎650-6908)

□ 사업목적 및 필요성

○ 3대문화권사업으로 조성된 삼강문화단지와 인접한 회룡포를 연계하여 주변의

다양한 관광자원을 활용한 힐링, 교육, 체험 등의 콘텐츠를 마련함으로써

다양한 계층의 니즈를 충족하고 체류형 관광지의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼ 2025년

○ 위 치 : 예천군 지보면 마산리 산113-7번지 일원

○ 규 모 : A=66,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,760			400	17,360
국 비
시 도 비	10,370			260	10,110
시군구비	7,390			140	7,250

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021.  2월 : 비룡산 군관리계획 결정용역 착수

○ 2021.  3월 : 전망대 부지 기반조성 실시설계 용역 착수

○ 2021.  4월 : 전망대 설치 사업계획 사전검토 용역 착수

○ 2021.  5월 : 군관리계획 변경을 위한 재해영향성검토 용역 착수

□ 향후계획

○ 2021.  7월 : 전망대 사업계획 사전검토 요청 및 도시공원 지정 행정절차 이행

○ 2021.  9월 : 전망대 실시설계 제안공모 시행 및 도시공원 지정완료,

전망대 부지 조성 실시설계 완료

○ 2021. 10월 : 전망대 설치를 위한 재해영향성검토 용역 및 환경영향평가 용역 발주

○ 2022.  3월 : 실시설계 용역 및 관련 행정절차 완료

○ 2022.  4월 : 전망대 설치 사업 발주

○ 2022.  6월 : 잔여사업 실시설계 용역 착수

○ 2022. 12월 : 잔여사업 실시설계 용역 완료

○ 2023.  3월 : 잔여사업 발주

○ 2023.  4월 : 전망대 설치 사업 준공

○ 2025. 12월 : 전체사업 준공

사업명

서본·노상지구 새뜰마을사업

담당자

도시과 이종하(☎650-6242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서본·노상지구의 취약한 기초생활인프라 확충 및 집수리 지원 등을 통한 노후        불량한 주거여건을 개선함으로써 주민들의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 주민공동체 활성화 및       마을기업 등 사회적 경제조직의 발굴·육성을 통한 지속가능한 주민공동체       실현이 가능함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3월 ∼ 2023. 12월

○ 위 치 : 예천군 예천읍 서본1리, 노상리 일원

○ 규 모 : A=66,750㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,447백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,347		329	719	2,299
국 비	2,315		329	376	1,610
시 도 비	310			104	206
시군구비	722			239	483

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 11월 : 새뜰마을사업 마스터플랜 용역 시행

○ 2020.  8월 ~ 21. 3월 : 집수리 지원 및 빈집정비사업 신청 접수

○ 2021.  3월 : 집수리 38호, 지붕개량 14호 선정 완료

○ 2021.  5월 : 마스터플랜 조건부 승인(국토교통부)

□ 향후계획

○ 2021.  6월 : 연차별 투자계획에 따라 사업추진

○ 2021.  7월 : 마스터플랜 보완사항 제출 및 승인(국토교통부)

10-2. 지방채 발행사업

우리 예천군에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
신도시 복합커뮤니티센터 건립	37,300	7,000	2,725	10,146	17,429	-	7,000

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

신도시 복합커뮤니티센터 건립

담당자

재무과 정재영(☎650-6890)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 신도시에 복합커뮤니티센터를 건립하여 주민들의 여가활동 공간으로 제공하고, 청소년들의 건전육성과 문화적 욕구를 충족시키고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)

○ 위    치 : 호명면 산합리 1123번지 일원

○ 규    모 : 부지 5,519㎡, 연면적 10,816㎡(지하1층, 지상4층)

○ 사업내용 : 가족센터, 다함께돌봄센터, 행정복지센터출장소(호명면),

건강생활지원센터, 지역아동센터, 청소년문화의 집 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,300백만원(토지매입비 17억원 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	37,300	2,432	3,916	22,567	8,385
지 방 채	7,000			7,000
국 비	2,725		402	1,611	712
시 도 비	10,146		1,173	5,860	3,113
시군구비	17,429	2,432	2,341	8,096	4,560

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020년까지 : 부지매입 및 설계용역 완료, 건설공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 10월 : 골조공사 완료

○ 2021. 12월 : 지붕공사 완료 및 내부 수장공사

○ 2022.  6월 : 공사완료(예정)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경(9,725㎡→10,816㎡)에 따라 사업비 26억원 증가

10-3. 민간투자사업

우리 예천군에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	예천군 하수관거정비 임대형 민자사업	푸른예천 환경(주)	43,227	19,167	4,176	4,241	55,012

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

예천군 하수관거정비 임대형

민자사업

담당자

맑은물사업소 정대웅

(☎650-6371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수, 방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 국민의 삶의 질을 향상시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 5월 ~ 2035. 5월         ○ 위치 : 예천읍 일원

○ 민간사업자 : 푸른예천환경 주식회사  ○ 총사업비 : 43,227백만원

○ 사업규모 : 오수관거 44.542㎞, 배수설비 3,190개소

□ 재정부담 현황

○ 관리운영권 설정 20년(2015 ~ 2035)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	82,596	19,167	4,176	4,241	55,012
국 비	48,624	11,791	2,561	2,561	31,711
시 도 비
시군구비	21,469	4,192	987	1,106	15,184
기 타	12,503	3,184	628	574	8,117

□ 추진단계(운영 중)

○ 2015. 5월 사업 준공이후 운영 중

□ 향후계획

○ 2035. 5월까지 분기별 정부지급금 지급

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계	91,304,825,911	71,385,179,157	감 19,919,646,754
시설임대료(경상가)	82,025,074,730	63,657,149,337	감 18,367,925,393
운영비(불변가)	9,279,751,181	7,728,029,820	감 1,551,721,361