2024년도 하반기

예천군상수도사업 업무상황 설명서

1.		기관 현황

(1) 설립 근거

○ 근거법령 :「지방공기업법」제5조

○ 설립조례 :「예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례」

(2018.08.13. 조례 제2306호)

○ 설립일자 : 2019년 1월 1일

○ 원시자본 : 78,746백만원 (2018.12.31.현재 자산평가액)

(2) 주요 기능 및 역할

○ 예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례 제2조(사업의 범위)

· 지방상수도사업 및 그에 부대되는 사업

· 공업용수도사업 및 그에 부대되는 사업

· 그 밖에 이와 유사한 사업 및 그에 부대되는 사업

기관(조직)별		주 요 담 당 업 무
맑은물사업소	상수도팀	▪수도정비기본계획수립 및 변경관리 ▪상수도급수구역 확장 및 노후관 갱생 ▪지방상수도 위탁운영 및 상수도 현대화사업 ▪상수도사용료 부과․징수
	관리팀	▪상수도사업특별회계 예산편성 및 결산 ▪상수도사업 (공사, 용역, 물품 등) 계약·지출

(3) 조직 기구도

관 리 자 (예천군부군수)
기업출납원 (맑은물사업소장)
상수도팀			관리팀
시설6급(팀 장)			행정6급(팀 장)
시설7급(주무관)			위생7급(주무관)
시설8급(주무관)			행정7급(주무관)
시설9급(주무관)			행정9급(주무관)
공무직

(4) 시설 현황

○ 정수장 현황

정수장명		시설용량 (㎥/일)	취수원	위 치	설치년도
계		12,700	-
지방상수도	예천정수장	10,800	한 천	예천읍 백전리 432-1	1975.04
	풍양정수장	1,900	낙동강	풍양면 낙상리 풍양면 낙상리 산 5-5	1983.09

○ 지방상수도 읍면별 급수현황

읍·면	인구수	급수인구	보급율	읍·면	인구수	급수인구	보급율
계	55,195	51,108	92.6%
예천읍	13,940	13,915	99.8%	보문면	1,591	967	60.5%
호명읍	20,959	20,955	99.9%	유천면	2,462	2,230	90.0%
용문면	2,137	1,691	78.9%	용궁면	2,264	2,261	99.2%
효자면	1,181	-	-	개포면	1,474	1,468	98.7%
은풍면	1,287	-	-	지보면	2,581	2,529	97.2%
감천면	2,486	2,272	91.0%	풍양면	2,833	2,822	99.1%

(5) 상수도 업종별 요율표

업 종 별	단 계 (㎥/월)	㎥당 단가 (원)	비 고
가 정 용	1 ～ 10	345
	11 ～ 30	805
	31이상	1,108
일 반 용	1 ～ 20	711
	21 ～ 50	1,296
	51 ～ 100	1,641
	101 ～ 300	1,944
	301이상	2,080
대중탕용	1 ～ 200	677
	201 ～ 300	951
	301 ～ 500	1,301
	501이상	1,628
산 업 용	㎥당	787

2.		주요사업 현황

2-1		농어촌생활용수 개발사업

[1) 예천상수도(용문 선리) 급수구역 확장사업

◯ 위    치 : 예천군 용문면 선리 일원

◯ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년)

◯ 사 업 량 : 급 ‧ 배수관로 부설 L=12.0㎞, 가압장 2개소, 배수지 1개소

◯ 사 업 비 : 1,900백만원(도비 1,330, 군비 570)

○ 추진상황 및 향후계획

∙ 2022.  8월 : 실시설계 용역 완료

∙ 2022.  9월 : 총괄 및 1차 공사 착공

∙ 2023.  3월 : 2차 공사 착공

∙ 2023.  5월 : 1차 공사 준공

∙ 2024. 11월 : 2차 및 총괄 공사 준공

[2) 예천상수도(효자, 은풍) 급수구역 확장사업

○ 위     치 : 예천군 효자면, 은풍면 일원(2개면 14개리)

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6년)

○ 사 업 량 :  L=94.5㎞, 가압장 11개소, 배수지 1개소

○ 사 업 비 : 34,785백만원(도비24,350,  군비10,435)

○ 추진상황 및 향후계획

∙ 2022. 11월 : 총괄 및 1차 공사 착공

∙ 2023.  5월 : 2차 공사 착공

∙ 2024.  5월 : 1차 공사 준공

∙ 2024.  6월 : 2차 공사 준공

∙ 2024.  6월 : 3차 공사 착공

∙ 2026. 12월 : 준공 및 용수 공급 예정

2-2		지방상수도 비상공급망 구축사업

[1) 지방상수도 비상공급망 구축사업

○ 위     치 : 예천읍 예천정수장 ~ 호명면 도청신도시 일원

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

○ 사 업 량 : 관로부설(D400㎜) L=13.8㎞, 가압장 1개소

○ 사 업 비 : 12,536백만원(전환8,425, 도비1,084, 군비3,027)

○ 추진상황 및 향후계획

∙ 2021. 12월 : 총괄 및 1차 공사 착공

∙ 2022. 12월 : 1차 공사 준공

∙ 2023.  3월 : 3차 공사 착공

∙ 2023.  8월 : 2차 공사 준공

∙ 2024.  3월 : 4차 공사 착공

∙ 2024.  5월 : 3차 공사 준공

∙ 2024.  6월 : 4차 및 총괄 공사 준공

2-3		낙후지역 먹는물 수질개선사업

[1) 지방상수도 예천읍 갈구리(귀밑) 급수구역 확장공사

○ 위    치 : 예천군 예천읍 갈구리 일원

○ 사 업 량 : 관로부설 L=3.0㎞

○ 사 업 비 : 300백만원(도비54, 군비246)

○ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 4월

○ 추진상황 및 향후계획

∙ 2023.  2월 : 실시설계 완료

∙ 2023.  3월 : 원가심사 및 일상감사 완료

∙ 2023.  4월 : 공사 발주

∙ 2023. 10월 : 공사 중지(관급자재 납품 지연)

∙ 2024.  4월 : 공사 준공

[2) 지방상수도 감천 천향2리(갓재미) 급수구역 확장공사

○ 위    치 : 예천군 감천면 천향리 일원

○ 사 업 량 : 관로부설 L=1.8㎞

○ 사 업 비 : 393백만원(도비60, 군비333)

○ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 10월

○ 추진상황 및 향후계획

∙ 2024.  2월 : 실시설계 완료

∙ 2024.  3월 : 원가심사 및 일상감사 완료

∙ 2024.  3월 : 공사 발주

∙ 2024. 10월 : 공사 준공

3.		경리에 관한 상황

(1) 총괄현황

과 목	예산액 ①	지출액 ②	예산잔액 ①-②=③
합 계	20,931,000,000	17,188,294,560	3,742,705,440
사업예산	10,234,000,000	10,174,524,690	59,475,310
자본예산	10,697,000,000	7,013,769,870	3,683,230,130

(2) 사업예산 운용현황

과 목			예산액	지출액	잔액
사업비용			10,234,000,000	10,174,524,690	59,475,310
관거비				6,966,313,470	1,686,530
			6,968,000,000	6,966,313,470
	308			6,966,313,470	1,686,530
	자치단체등이전		6,968,000,000	6,966,313,470
		308-07		303,313,470	1,686,530
		자치단체등이전/자치단체간부담금	305,000,000	303,313,470
		308-11		6,663,000,000
		자치단체등이전/공기관등에대한경상적위탁사업비	6,663,000,000	6,663,000,000
일반관리비				3,212,877,480	42,437,970
			3,265,258,000	3,212,877,480
	101			501,132,410	2,321,590
	인건비		503,454,000	501,132,410
		101-01		461,644,000
		인건비/보수	461,644,000	461,644,000
		101-03		39,488,410	2,321,590
		인건비/공무직(무기계약)근로자보수	41,810,000	39,488,410
	201			2,681,168,670	35,708,780
	일반운영비		2,726,820,000	2,681,168,670
		201-01		39,178,330	4,061,670
		일반운영비/사무관리비	53,140,000	39,178,330
		201-02		2,641,990,340	31,647,110
		일반운영비/공공운영비	2,673,680,000	2,641,990,340
	202			2,496,400	4,407,600
	여비		6,904,000	2,496,400
		202-01		2,496,400	4,407,600
		여비/국내여비	6,904,000	2,496,400
	204			9,480,000
	직무수행경비		9,480,000	9,480,000
		204-01		1,800,000
		직무수행경비/직책급업무 수행경비	1,800,000	1,800,000
		204-03		7,680,000
		직무수행경비/특정업무경비	7,680,000	7,680,000
	207			18,600,000
	연구개발비		18,600,000	18,600,000
		207-01		18,600,000
		연구개발비/연구용역비	18,600,000	18,600,000
예비비					742,000
			742,000
	801				742,000
	예비비		742,000
		801-01			742,000
		예비비/일반예비비	742,000

(3) 자본예산 운용현황

과목					예산액	지출액	잔액
공기업(상수도)(자본)					10,697,000,000	7,013,769,870	3,638,230,130
	상수원 관리(상수도)(자본)				10,697,000,000	7,013,769,870	3,683,230,130
		지방상수도 관리(자본예산)			1,762,000,000	1,532,224,310	229,775,690
			구축물		1,303,000,000	1,095,131,910	207,868,090
				401	1,303,000,000	1,095,131,910	207,868,090
				시설비및부대비
				401-01	1,300,000,000	1,092,131,910	207,868,090
				시설비
				401-03	3,000,000	3,000,000	0
				시설부대비
			기타유동부채상환		459,000,000	437,092,400	21,907,600
				611	459,000,000	437,092,400	21,907,600
				기타유동부채상환
		낙후지역 먹는물 수질개선사업			400,000,000	340,460,170	59,539,830
			구축물		400,000,000	340,460,170	59,539,830
				401	400,000,000	340,460,170	59,539,830
				시설비및부대비
				401-01	400,000,000	340,460,170	59,539,830
				시설비
		소방용수시설보강			40,000,000	40,000,000	0
			구축물		40,000,000	40,000,000	0
				401	40,000,000	40,000,000	0
				시설비및부대비
				401-01	40,000,000	40,000,000	0
				시설비
		농어촌생활용수 개발사업(예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장)			4,286,000,000	2,530,341,610	1,755,658,390
			건설중인자산(유형자산취득)		4,286,000,000	2,530,341,610	1,755,658,390
				401	4,286,000,000	2,530,341,610	1,755,658,390
				시설비및부대비
				401-01	3,682,000,000	2,129,433,610	1,552,566,390
				시설비
				401-02	600,000,000	399,568,000	200,432,000
				감리비
				401-03	4,000,000	1,340,000	2,660,000
				시설부대비
		지방상수도 비상공급망 구축사업			2,846,000,000	2,234,624,030	611,375,970
			건설중인자산(유형자산취득)		2,846,000,000	2,234,624,030	611,375,970
				401	2,846,000,000	2,234,624,030	611,375,970
				시설비및부대비
				401-01	2,809,300,000	2,197,924,030	611,375,970
				시설비
				401-02	28,700,000	28,700,000	0
				감리비
				401-03	8,000,000	8,000,000	0
				시설부대비
		상수관로 누수감지시스템 설치사업			70,000,000	70,000,000	0
			구축물		70,000,000	70,000,000	0
				401	70,000,000	70,000,000	0
				시설비및부대비
				401-01	70,000,000	70,000,000	0
				시설비
		노후정수장 개선사업(보조)			70,000,000	20,140,000	49,860,000
			구축물		70,000,000	20,140,000	49,860,000
				401	70,000,000	20,140,000	49,860,000
				시설비및부대비
				401-01	70,000,000	20,140,000	49,860,000
				시설비
		예천정수장 전처리시설(섬유사여재) 교체			300,000,000	285,048,400	14,951,600
			구축물		300,000,000	285,048,400	14,951,600
				401	300,000,000	285,048,400	14,951,600
				시설비및부대비
				401-01	300,000,000	285,048,400	14,951,600
				시설비
		낙동강수계 풍양취수장 시설개선사업			917,310,000	0	917,310,000
			건설중인자산(유형자산취득)		917,310,000	0	917,310,000
				401	917,310,000	0	917,310,000
				시설비및부대비
				401-01	917,310,000	0	917,310,000
				시설비
	수질개선(상수도)(자본)				5,000,000	5,000,000	0
		상수원관리지역 관리사업(자본예산)			5,000,000	5,000,000	0
			구축물		5,000,000	5,000,000	0
				401	5,000,000	5,000,000	0
				시설비및부대비
				401-01	5,000,000	5,000,000	0
				시설비
공기업(상수도)(예비비)(자본)					690,000	0	0
	예비비(상수도)(자본)				690,000	0	0
		예비비(자본예산)			690,000	0	0
			예비비		690,000	0	0
				801	690,000	0	0
				예비비
				801-01	690,000	0	0
				일반예비비