2024년도 하반기

예천군하수도사업 업무상황 설명서

1.		기관 현황

(1) 설립 근거

○ 근거법령 :「지방공기업법」제5조

○ 설립조례 :「예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례」

(2018.08.13. 조례 제2306호)

○ 설립일자 : 2019년 1월 1일

○ 원시자본 : 46,888백만원 (2018.12.31.현재 자산평가액)

(2) 주요 기능 및 역할

○ 예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례 제2조(사업의 범위)

· 공공하수도사업 및 그에 부대되는 사업

· 공공하수처리시설 및 그에 부대되는 사업

· 그 밖에 이와 유사한 사업 및 그에 부대되는 사업

기관(조직)별		주 요 담 당 업 무
맑은물사업소	하수도팀	▪하수도정비기본계획 수립 및 변경관리 ▪공공하수처리장 및 관거사업, 유지관리 ▪하수도사용료 부과․징수
	관리팀	▪하수도사업특별회계 예산편성 및 결산 ▪하수도사업 (시설공사, 용역, 물품 등) 집행

(3) 조직 기구도

관 리 자 (예천군 부군수)
기업출납원 (맑은물사업소장)
하수도팀			관리팀
시설6급(팀 장)			행정6급(팀 장)
시설6급(주무관)			위생7급(주무관)
환경8급(주무관)			행정7급(주무관)
시설8급(주무관)			행정9급(주무관)

(4) 하수처리시설 현황

지구명	대 상 시설명	위 치	시설용량 (톤/일)	설치년도
총 계		16개소	9,858
소 계		2개소	8,000
공 공 하 수 처리장	예천	예천읍 상동리 57-3	7,500	2005년
	읍부	용궁면 읍부리 7-5	500	2011년
소 계		14소	1,858
마 을 하 수 처리장	감천문화	감천면 덕율리 103-1	30	2000년
	포리	감천면 포리 833	200	2010년
	낙상2	풍양면 공덕리 681	450	2011년
	삼강	풍양면 삼강리 152-1	350	2019년
	도촌	효자면 도촌리 493-1	50	2012년
	마전	지보면 마전리 343-2	230	2016년
	암천	지보면 암천리 349-2	45	2004년
	담암	호명면 담암리 274	45	2005년
	향석	용궁면 향석리 34-12	48	2007년
	신음	개포면 신음리 41	100	2019년
	신풍	지보면 신풍리 565	70	2019년
	읍실	은풍면 오류리 62	90	2019년
	우망	풍양면 우망리 1052	70	2021년
	오천2	호명면 오천리 174	80	2022년

(5) 하수슬러지 건조시설 현황

시설명	위 치	시설용량 (톤/일)	처리공법	활용방안	설치 년도
하수슬러지 건조시설	예천읍 상동길 49-50	18 (탈수케잌 기준)	직/간접 가열식 벨트건조기	-시멘트 제조원료 -연료탄제조(슬러지) -화력발전 혼소연료	2021

(6) 하수도 업종별 요율표

업 종	단계(㎥/월)	㎥당 단가(원)
가정용	1 ∼ 20	192
	21 ∼ 40	289
	41이상	390
일반용	1 ∼ 50	493
	51 ∼ 100	641
	101 ∼ 300	839
	301이상	1,084
대중탕용	1 ∼ 300	342
	301 ∼ 500	443
	501이상	580
산업용	㎥당	361

2.		사업 현황

2-1		도시침수 대응사업

(1) 예천1배수분구 도시침수대응사업

○ 위    치 : 예천읍 시가지 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 정비 L=2.549km 빗물펌프장 1개소(Q=480㎥/분)

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

○ 사 업 비 : 19,057백만원(국비 11,416, 기금 4,585, 군비 3,056)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2021.  9월 : 하수도정비대책 수립 및 제출(대구지방환경청)

∙ 2023. 12월 : 지방건설기술심의 및 재원협의

∙ 2024.  2월 : 원가심사 의뢰

∙ 2024.  7월 : 공사 착공(총괄, 1차)

○ 향후계획

∙ 2026. 12월 : 공사 준공

2-2		하수관로 정비사업

○ 위    치 : 예천읍, 유천면, 용문면, 보문면 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=23.09㎞, 배수설비 580가구

○ 사 업 비 : 19,258억원(국비13,124, 기금3,680, 군비2,454)

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

∙ 2021.  8월 : 공사 발주 및 착공(총괄 및 1차공사)

∙ 2024.  2월 : 5차 공사 착공

○ 향후계획

∙ 2025. 12월 : 공사 준공(총괄)

2-3		하수처리장 설치사업

(1) 지보 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 지보면 지보리 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=2.92km, 하수처리장 Q=60㎥/일

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)

○ 사 업 비 : 7,392백만원(국비 4,838, 기금 1,270, 도비 250, 군비 1,034)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2023.  7월 : 재원협의 완료

∙ 2024.  4월 : 관련부서 협의 및 원가심사 완료

∙ 2024. 11월 : 공사 착공

○ 향후계획

∙ 2026. 12월 : 공사 준공

(2) 괴당 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 풍양면 괴당리, 고산리 일원

○ 사 업 량 : 하수처리장 Q=45㎥/일, 하수관로 L=2.3km

○ 사 업 비 : 4,182백만원(국비 2,916, 기금 760, 도비 150, 군비 356)

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)

○ 추진상황

∙ 2020.  3월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

∙ 2021. 11월 : 재원 협의 및 계약 원가심사 완료

∙ 2021. 12월 : 공사 발주 및 착공(총괄 및 1차 공사)

∙ 2024.  3월 : 5차 공사 착공

∙ 2024. 11월 : 종합시운전 시행

○ 향후계획

∙ 2025.  5월 : 공사 준공(총괄)

(3) 낙상1 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 풍양면 공덕리 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=3.5km

○ 사 업 비 : 2,377백만원(국비 1,664, 기금 360, 도비 86, 군비 627)

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 추진상황

∙ 2022.  12월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2024.  10월 : 기술자문 완료

○ 향후계획

∙ 2025.   1월 : 행정절차 (재원협의, 원가심사 등) 이행

∙ 2025.   4월 : 공사 발주

2-4		임대형 민자사업(BTL) 추진

(1) 예천하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

○ 위     치 : 예천읍 시가지 일원

○ 규     모 : 오수관로 L=44.542km, 배수설비 3,345개소, 펌프장 8개소

유량계 8개소(고정식 3, 이동식 5)

○ 사 업 비 : 43,272백만원(민자)

○ 정부지급금 : 4,026백만원(임대료 3,440, 운영비 586)

(국비2,389, 기금620, 군비1,017)

○ 운영기간 : 2015. 6월 ~ 2035. 6월(20년간)

○ 운 영 사 : 푸른예천환경(주) 대표 박한철

○ 추진상황

∙ 2023.  6월 운영성과평가위원회 개최(1/4분기)

∙ 2023.  9월 운영성과평가위원회 개최(2/4분기)

∙ 2023. 11월 운영성과평가위원회 개최(3/4분기)

○ 향후계획

∙ 2025.  2. : 운영성과평가위원회 개최(2024년 4/4분기)

∙ 2024.  4. : 운영성과평가위원회 개최(2025년 1/4분기)

3.		경리에 관한 상황

(1) 총괄현황

과 목	예산액 ①	지출액 ②	예산잔액 ①-②=③
합 계	26,250,000,000	18,196,033,550	8,053,966,450
사업예산	6,964,000,000	6,719,398,720	244,601,280
자본예산	19,286,000,000	11,476,634,830	7,809,365,170

(2) 사업예산 운용현황

과목						예산액	지출액	잔액
공기업(하수도)						6,964,000,000	6,719,398,720	244,601,280
	하수도 정비(하수도)
						2,795,589,000	2,553,266,970	242,322,030
		예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)
						650,260,000	554,879,000	95,381,000
			관거비
						650,260,000	554,879,000
				307
				민간이전		650,260,000	554,879,000
					307-05
					민간이전/민간위탁금	650,260,000	554,879,000
		하수도 정비
						2,145,329,000	1,998,387,970	146,941,030
			관거비
						654,940,000	639,221,720
				307
				민간이전		190,917,000	175,200,000
					307-05
					민간이전/민간위탁금	190,917,000	175,200,000
				308
				자치단체등이전		464,023,000	464,021,720
					308-07
					자치단체등이전/ 자치단체간부담금	464,023,000	464,021,720
			일반관리비
						1,490,389,000	1,359,166,250	131,222,750
				201
				일반운영비		1,123,700,000	1,022,812,860
					201-01
					일반운영비/사무관리비	59,400,000	34,363,050
					201-02
					일반운영비/공공운영비	1,063,000,000	987,149,810
					201-12
					일반운영비/교육훈련비	1,300,000	1,300,000
				206
				재료비		5,000,000	5,000,000
					206-01
					재료비/일반재료비	5,000,000	5,000,000
				207
				연구개발비		361,689,000	331,353,390
					207-01
					연구개발비/연구용역비	361,689,000	331,353,390
	수질개선(하수도)
						3,958,258,000	3,957,917,000	341,000
		환경기초시설 운영
						3,958,258,000	3,957,917,000
			처리장비
						3,958,258,000	3,957,917,000
				307
				민간이전		3,958,258,000	3,957,917,000
					307-05
					민간이전/민간위탁금	3,958,258,000	3,957,917,000
공기업(하수도)(행정운영)
						208,799,000	208,214,750	584,250
	인력운영비(하수도)
						208,799,000	208,214,750
		인력운영비
						208,799,000	208,214,750
			일반관리비
						208,799,000	208,214,750
				101
				인건비		204,959,000	204,480,310
					101-01
					인건비/보수	204,959,000	204,480,310
				204
				직무수행경비		3,840,000	3,734,440
					204-03
					직무수행경비/특정업무경비	3,840,000	3,734,440
공기업(하수도)(예비비)
						1,354,000	0	1,354,000
	예비비(하수도)
						1,354,000	0
		예비비
						1,354,000	0
			예비비
						1,354,000	0
				801
				예비비		1,354,000	0
					801-01
					예비비/일반예비비	1,354,000	0

(3) 자본예산 운용현황

구분						예산액	지출액	잔액
공기업(하수도)(자본)						19,286,000,000	11,476,634,830	7,809,365,170
	하수도 정비(자본)
						1,020,000,000	906,018,830	113,981,170
		하수도 정비(자본)
						1,020,000,000	906,018,830
			건물
						800,000,000	744,479,440	55,520,560
				401
				시설비및부대비		800,000,000	744,479,440
					401-01
					시설비및부대비/시설비	800,000,000	744,479,440
			구축물
						220,000,000	161,539,390	58,460,610
				401
				시설비및부대비		220,000,000	161,539,390
					401-01
					시설비및부대비/시설비	220,000,000	161,539,390
	수질개선(하수도)(자본)
						13,578,000,000	8,226,029,280	5,351,970,720
		예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료
						3,440,000,000	3,439,020,000	980,000
			기타비유동부채상환
						3,440,000,000	3,439,020,000
				612
				기타비유동부채상환		3,440,000,000	3,439,020,000
					612
					기타비유동부채상환	3,440,000,000	3,439,020,000
		하수관로(유천처리구역 외 하수관로 정비사업)
						5,090,000,000	3,562,732,040	1,527,267,960
			건설중인자산(유형자산취득)
						5,090,000,000	3,562,732,040
				401
				시설비및부대비		5,090,000,000	3,562,732,040
					401-01
					시설비및부대비/시설비	4,802,000,000	3,405,332,040
					401-02
					시설비및부대비/감리비	288,000,000	157,400,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비
		하수관로(가야처리분구 하수관로 정비)
						150,000,000	2,200,000	147,800,000
			건설중인자산(유형자산취득)
						150,000,000	2,200,000
				401
				시설비및부대비		150,000,000	2,200,000
					401-01
					시설비및부대비/시설비	120,000,000	2,200,000
					401-02
					시설비및부대비/감리비	30,000,000
		하수처리장 설치(지보 농어촌마을 하수도 정비)
						3,134,000,000	1,120,377,240	2,013,622,760
			건설중인자산(유형자산취득)
						3,134,000,000	1,120,377,240
				401
				시설비및부대비		3,134,000,000	1,120,377,240
					401-01
					시설비및부대비/시설비	3,104,000,000	1,090,377,240
					401-02
					시설비및부대비/감리비	30,000,000	30,000,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비
		하수처리장 설치(낙상1 농어촌마을 하수도 정비)
						264,000,000	2,200,000	261,800,000
			건설중인자산(유형자산취득)
						264,000,000	2,200,000
				401
				시설비및부대비		264,000,000	2,200,000
					401-01
					시설비및부대비/시설비	231,000,000	2,200,000
					401-02
					시설비및부대비/감리비	30,000,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	3,000,000
		하수도시설 현대화
						1,500,000,000	99,500,000	1,400,500,000
			건설중인자산(유형자산취득)
						1,500,000,000	99,500,000
				401
				시설비및부대비		1,500,000,000	99,500,000
					401-01
					시설비및부대비/시설비	1,225,000,000
					401-02
					시설비및부대비/감리비	275,000,000	99,500,000
	도시침수대응
						4,688,000,000	2,344,586,720	2,343,413,280
		도시침수대응
						4,688,000,000	2,344,586,720
			구축물
						4,688,000,000	2,344,586,720
				401
				시설비및부대비		4,688,000,000	2,344,586,720
					401-01
					시설비및부대비/시설비	4,485,000,000	2,141,586,720
					401-02
					시설비및부대비/감리비	200,000,000	200,000,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	3,000,000	3,000,000