정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-08

담당부서

작성자

(농정과 / 유통지원담당)

(김진모/6276/kjm1171@korea.kr)

정 책 명

사과수출단지 기반시설 지원사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 2000년부터 매년 백여톤의 예천사과를 수출하는 전초기지로   2003년 경상북도 농산물 수출단지로 지정받았으나 2006년   해외수출사과 검역요건이 강화되어 20년이 지난 선과장     시설로는 선과장 승인을 득하지 못해 수출이 중단되어

- 이번 사업을 통해 안정적인 생산․수출 기반구축으로 품질   고급화를 통한 국제 경쟁력을 확보하여 지속적인 수출확대   추진 필요

○ 추진기간 : 2012. 2 ～ 2013. 12

○ 총사업비 : 33억원

○ 주요내용

- 사업부지 7,313㎡, 저온저장고 1,011㎡, 선별집하장 1,326㎡,

선별 및 포장기기 4종

○ 추진경과

- 2012. 2 : 사업시행계획 승인(경상북도→예천군)

- 2012. 7 : 사업부지 매입(5,825㎡)

- 2013. 3 : 사업부지 추가매입(1,488㎡)

- 2013. 5 : 건축설계 완료

- 2013. 5 : 건축허가

- 2013. 6 : 농협중앙회 실시설계 기술검토 완료

- 2013. 6 : 시공업체 선정, (주)NH개발

- 2013. 6 : 건축공사 착공

- 2013. 11 : 선별 및 포장기기 설치

- 2013. 12 : 사업완료 예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 농정과 7급      김 진 모 (성명)

- 최종 결재자 : 예천군수        이 현 준 (성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군수	이현준	군수	2012.2～현재	예천군정 총괄
부군수	정기채	부군수	2012.2～2012.12	예천군정 부총괄
부군수	이왕용	부군수	2013.1～현재	예천군정 부총괄
과장	신동은	5급	2012.2～2013.1	농정업무 총괄
과장	황병수	5급	2013.1～현재	농정업무 총괄
담당	이병동	6급	2012.2～2012.9	유통지원업무총괄
담당	조현진	6급	2012.9～2013.1	유통지원업무총괄
담당	안상훈	6급	2013.1～현재	유통지원업무총괄
담당자	김진모	7급	2012.2～현재	수출업무담당자

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 대구경북능금농협 예천경제사업장

- 지소장 : 신태주 2012. 2～2012. 12

- 장  장 : 정해윤 2013. 1～현재

- 담당자 : 김시헌 2012. 2～2012. 12

- 담당자 : 이교덕 2013. 1～현재

○ 설계자

- 건축사사무소 상우

○ 시공자

- (주)NH개발

○ 감리자

- 건축사사무소 상우

추진실적

○ 추진경과 참조