정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-19

담당부서

작성자

(안전재난과 / 하천담당)

(김창영/6154/younkc@korea.kr)

정 책 명

한천 고향의 강 정비사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

예천읍 소재지를 관류하고 있는 한천을 군민의 정서함양 및 역사, 문화와 연계한 명품 하천정비로 주거환경 개선과 주민 삶의 질 향상

○ 추진기간 : 2011.02. ~ 2016.02.

○ 총사업비 : 22,311백만원

○ 주요내용

◦위  치 : 예천읍 백전리(한천교)~개포면 경진리(내성천 합류점)

◦사업량 : L=9.0km(하천연장)

∙치수시설 : 자연석 쌓기L=4.6km, 호안블럭 및 돌망태 L=3.0km

∙친수공간 조성 : 청렴기원마당, 도효자마당, 웅비마당,

돗자리마당, 다용도 잔디광장

∙수경시설 : 음악분수, 바닥분수

∙자전거도로 설치 L=14km

∙기타 편의시설 : 화장실, 데크쉼터 등

◦사업기간 : 2013.02.27. ~ 2016.02.11.

○ 추진경과

- 2011.02.   : 한천 고향의 강 사업확정

- 2011.08.   : 설계용역 시행 (도 치수방재과)

- 2013.01.09 : 문화재 지표조사에 따른 문화재보존대책협의(문화재청)

- 2013.03.05 : 소규모환경영향평가협의(대구지방환경청)

- 2013.02.18 : 시설사업 총괄계약 (한영종합건설(주))

- 2013.03.18 : 한천 고향의 강 정비사업 시행계획 고시(예천군 고시 제2013- 193호)

- 2013.05.01 : 전면책임감리 시행

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 :     시설 6급 강성철

- 최종 결재자 : 안전재난과장 유민종

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	전재달	6급	‘11.7.14~’13.1.1	사업계획수립
담당	강성철	6급	‘13.1.21~현재	사업계획수립
주무관	김창영	7급	‘11.02～현재	예산집행

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

(주)삼안

○ 시공자

- 한영종합건설(주)

○ 감리자

- (주)도화엔지니어링

추진실적

○ 2013.03.26 : 한천고향의 강 정비 1차사업 시행중

- 사 업 량 : L=1.2km

- 사 업 비 : 1,832백만원

- 사업기간 : 2013.03.26～2014.03.25

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-20

담당부서

작성자

(안전재난과 / 하천담당)

(김창영/6154/younkc@korea.kr)

정 책 명

복계천 수해상습지 개선사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

홍수피해 예방을 위한 치수중심의 하천정비사업으로 호우 시 침수 피해에 따른 재해 사전예방

○ 추진기간 : 2011.02. ~ 2014.12.

○ 총사업비 : 7,238백만원

○ 주요내용

◦위  치 : 용궁면 덕계리 ~ 읍부리

◦사업량 : 축제 및 호안 L=5.3km, 교량 1개소

◦사업기간 : 2013.02. ~ 2015.02.

○ 추진경과

- 2011.10.   : 설계용역 시행

- 2012.03.   : 예천군 설계자문시행

- 2012.07.   : 총사업비 협의(부산지방국토관리청)

- 2013.02.   : 1차사업 착공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 :     시설 6급 강성철

- 최종 결재자 : 안전재난과장 유민종

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	전재달	6급	‘11.7.14~’13.1.1	사업계획수립
담당	강성철	6급	‘13.1.21~현재	사업계획수립
주무관	김창영	7급	‘11.02～현재	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

(주)도화엔지니어링

○ 시공자

- (주)성원건설

추진실적

○ 2013.02.18 : 복계천 수해상습지 개선사업 1차 시행중

- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=2.8km, 교량 1개소

- 사 업 비 : 2,226백만원

- 사업기간 : 2013.02.18.～2014.02.17.

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-21

담당부서

작성자

안전재난과/하천계

(박노서/6155/

pnoseo78@korea.kr)

정 책 명

뒷내천 정비공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

홍수피해 예방을 위한 치수중심의 하천정비사업으로 호우 시 침수 피해에 따른 재해 사전예방

○ 추진기간 : 2011.08. ~ 2013.12.

○ 총사업비 : 6,552백만원

○ 주요내용

◦위  치 : 용문면 상금곡리 ~ 선리

◦사업량 : 축제 및 호안 L=2.8km, 교량 7개소

◦사업기간 : 2011.08 . ~ 2013.12.

○ 추진경과

- 2011.01.   : 설계용역 시행

- 2011.08.   : 1차사업 시행(L=540m, 교량2개소)

- 2012.03.   : 2차사업 시행(L=1,580m, 교량4개소)

- 2013.02.   : 3차사업 시행(L=1,413mm 교량1개소)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사  강 성 철

- 최종 결재자 : 안전재난과장  유 민 종

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	강성철	시설6	11.1.06~11.7.13	사업계획수립
담당	전재달	시설6	11.7.14~13.1.25	사업계획수립
담당	강성철	시설6	11.1.26~현재	사업계획수립
담당자	김해식	시설6	11.1.5~13.1.25	공사감독
담당자	박노서	시설6	13.1.26~현재	공사감독

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

(주)동화엔지니어링

○ 시공자

- 송학건설(주)

- (주)정우주택건설

- (주)천지종합건설

추진실적

○ 2013.02.28 뒷내천 정비공사 3차 시행

- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=1.41km, 교량 1개소

- 사 업 비 : 1,800백만원

- 사업기간 : 2013.02.28.～2013.12.29

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-22

담당부서

작성자

안전재난과/하천계

(박노서/6155/

pnoseo78@korea.kr)

정 책 명

덕거리 소하천 정비공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

홍수피해 예방을 위한 치수중심의 하천정비사업으로 호우 시 침수 피해에 따른 재해 사전예방

○ 추진기간 : 2011.12. ~ 2014.12.

○ 총사업비 : 3,780백만원

○ 주요내용

◦위  치 : 하리면 오류리 ~ 금곡리

◦사업량 : 축제 및 호안 L=2.0km, 교량 4개소

◦사업기간 : 2012.11 . ~ 2014.12.

○ 추진경과

- 2011.12.   : 설계용역 시행

- 2012.11.   : 1차사업 시행(L=350m, 교량1개소)

- 2013.03.   : 2차사업 시행(L=850m, 교량3개소)

- 2013.02.   : 3차사업 시행(L=180m)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사  강 성 철

- 최종 결재자 : 안전재난과장  유 민 종

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	전재달	시설6	11.7.14~13.1.25	사업계획수립
담당	강성철	시설6	11.1.26~현재	사업계획수립
담당자	김해식	시설6	11.1.5~13.1.25	공사감독
담당자	박노서	시설6	13.1.26~현재	공사감독

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

(주)오이디

○ 시공자

- (주)한국종합건설

- 덕영종합건설(주)

- 정우건설

추진실적

○ 2013.03.20 덕거리 소하천 정비공사 2차 시행

- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=0.85km, 교량 3개소

- 사 업 비 : 1,551백만원

- 사업기간 : 2013.3.20 ~ 2013.12.19

○ 2013.10.28 덕거리 소하천 정비공사 3차 시행

- 사 업 량 : 축제 및 호안 L=0.18km,

- 사 업 비 : 294백만원

- 사업기간 : 2013.10.28 ~ 2014.01.29

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개