정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013 - 04

담당부서

작성자

환경관리과/상수도담당

권기량/6345/grkwon@korea.kr

정 책 명

감천상수도 급수구역 확장공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 지방상수도 시설확충으로 상수도 보급률을 향상시키고 생활

용수를 안정적으로 보급하여 주민의 보건위생향상.

○ 추진기간 : 2011.01 ~ 2014.12. (4년간)

○ 총사업비 : 6,774백만원

○ 주요내용

- 송․배․급수관로 부설 L=48㎞, 배수지 100톤/일 1지

가압장 5개소, 전기 1식, 기계 1식

○ 추진경과

- 2010.  4월 : 농어촌도서지역2단계확충사업(수정)반영(환경부)

- 2011.  2월 : 기본및실시설계 용역 착수

- 2011.  8월 : 기본및실시설계 용역 완료

- 2011. 10월 : 도 투․융자심사 완료 (경상북도)

- 2011. 12월 : 예천군수도정비기본계획(변경) 승인 (환경부)

- 2012.  3월 : 공사 착공(총괄, 1차분)

- 2013.  2월 : 공사 착공(2차분)

- 2013.  9월 : 공사 준공(1차분)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사 권 중 희

- 최종 결재자 : 예 천 군 수  이 현 준

○사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준		’10.07.01～현재	군 수
부군수	정기채	4급	’11.07.01～’13.01.03	부군수
부군수	이왕용	4급	’13.01.04～현재	“
과장	장무환	5급	’09.08.12～’12.06.30	과장
과장	이종헌	5급	’12.07.01～’13.07.08	“
과장	엄상흠	5급	’13.07.09～현재	“
담당	권중희	6급	’11.01.01～’13.02.28	담당
담당	최덕환	6급	’13.03.01～현재	“
담당자	박래익	7급	’09.11.26～’12.09.09	담당자
담당자	권기량	7급	’12.09.10～현재	“

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 물환경정책국 수도정책과

- 경상북도 환경산림국 물산업과

○ 설계사 : (주)도화엔지니어링, (주)청우엔지니어링

○ 시공사 : 강동건설(주)

추진실적

○ 2013.09.16 : 1차공사 준공

- 송․배․급수관로 부설 L=18㎞, 배수지 100톤/일 1지

가압장 1개소