정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-02

담당부서

작성자

환경관리과/수질관리담당

(임홍기/6987/hg0576@korea.kr)

정 책 명

가축분뇨공공처리시설 설치

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 가축분뇨의 안정적 처리를 통한 축산농가 경쟁력 제고 및

공공수역 수질개선 수질개선으로 쾌적한 생활환경 조성

○ 추진기간 : 2010.  1. ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 12,000백만원

○ 주요내용 : 시설용량 80㎥/일

○ 추진경과

- 2010.  3월 : 기본조사 및 실시설계용역

- 2010.  6월 : 처리공법 선정

- 2010. 11월 : 道 기본계획설치승인신청

- 2010. 12월 : 道 도시계획변경경정 승인완료

- 2011.  5월 : 설치사업 道

- 2011.  8월 : 道 지방건설기술 심의

- 2011.  9월 : 道 원가심사

- 2011. 12월 : 공사착공

- 2013.  6월 : 시운전가동

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방행정주사   권  영  덕

- 최종 결재자 : 예 천 군 수    이  현  준

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준		‘10.07.01 ～ 현재	군수
부군수	정기채	4급	‘11.07.01～’13.01.03	부군수
부군수	이왕용	4급	‘13.01.04～현재	〃
과장	장무환	5급	‘09.08.12～’12.06.30	과장
과장	이종헌	5급	‘12.07.01～’13.07.08	〃
과장	엄상흠	5급	‘13.07.09～현재	〃
담당	권영덕	6급		담당자
담당	최병갑	6급		〃
담당	임홍기	6급	‘12.02.01～현재	〃

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 물환경정책국 물환경정책과

- 경상북도 환경산림국 물산업과

○ 설계사 : (주)삼안

○ 시공사 : 세원건설(주)

○ 감리사 : (주)삼안, 청명토목(주)

추진실적

- 2010.  3월 : 실시설계용역 - (주)삼안

- 2010.  6월 : 처리공법 선정 - 부강테크(주) BCS공법

- 2011. 12월 : 공사착공

토목 : (주)세원건설,  전기 : (주)영화전기

- 2011.  3월 : 관급기자재 발주

- 2013.  6월 : 시운전 가동

정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2013-03

담당부서

작성자

환경관리과/생활환경담당

김동태/6191/kdt111@korea.kr

정 책 명

예천군 순환형매립장 정비사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 예천 청복 비위생매립장을 위생매립장으로 조성하여 생활폐기물의 안정적인 처리기반을 구축하고 환경오염이 없은 환경친화적인 매립장운영으로 주변 환경피해를 최소화하기 위함.

○ 추진기간 : 2010. 1월 ~ 2013. 12월

○ 총사업비 : 15,856백만원

○ 주요내용

- 시설면적 19,520㎡(관리시설 1,810㎡, 매립시설 12,840㎡)

- 매립용량 : 125,000㎥

- 침출수 처리 : R/O시스템 40톤/일

○ 추진경과

- 2009. 05. 19 : 타당성 조사용역

- 2010. 03. 31 : 기본 및 실시설계용역

- 2011. 03. 22 : 군 관리계획 결정(변경)안 공람공고

- 2011. 03. 23 : 사전환경성검토서 주민의견 수렴

- 2011. 04. 02 : 주민설명회 개최

- 2011. 04. 20 : 설계경제성(VE) 검토

- 2011. 05. 02 : 군의회 의견청취［간담회, 임시회］
- 2011. 05. 31: 기술(설계) 심의［도청 제1회의실］

- 2011. 09. 05 : 관리계획 결정 및 지형도면 고시

- 2011. 10. 06 : 폐기물처리시설 변경 승인(경상북도)

- 2011. 12. 20 : 공사착공(태동건설(주))

- 2012. 01. 28 주민설명회 개최(90명 정도 복지회관)

- 2012. 03. 28 주민 협약식 체결(영상회의실)

- 2012. 05. 04 매립폐기물 굴착ㆍ선별 시작

- 2013. 04. 29 토목 1차분 준공

- 2013. 06. 10 매립폐기물 굴착ㆍ선별 완료

- 2013. 11월 현재 차수시설 및 관리동 공사중(공정율 92%)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방환경주사 박종하

- 최종 결재자 : 예천군수 이현준

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준		’10.01.01～현재	군 수
부군수	정기채	4급	’10.01.01～’13.01.03	부군수
부군수	이왕용	4급	’13.01.04～현재	“
과장	장무환	5급	’10.01.01～’12.06.30	과장
과장	이종헌	5급	’12.07.01～’13.07.08	“
과장	엄상흠	5급	’13.07.09～현재	“
담당	박종하	6급	’10.01.01～’13.01.20	담당
담당	오규섭	6급	’13.01.21～현재	“
담당자	임홍기	6급	’10.01.01～’12.02.20	담당자
담당자	김동태	7급	’12.02.21～현재	“

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 자원순환국 폐자원에너지과

- 경상북도 환경산림국 환경정책과

○ 설 계 사 : (주)건화, 청우엔지니어링

○ 시 공 사

- 토목분야 : (주)태동건설, 국기건설(주)

- 폐기물 선별 : (주)포스벨, 악취안정화 : (주)KC환경

- 전기분야 : (주)서창전기

○ 감 리 사 : (주)경호엔지니어링, (주)동성엔지니어링

추진실적

○ 2012. 12. 20 : 공사착공

○ 2012. 05. 04 : 굴착선별 시행

○ 2013. 01. 04 : 1차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 03. 19 : 1차 설계변경

○ 2013. 04. 04 : 2차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 04. 29 : 토목공사 1차분 준공

○ 2013. 06. 10 : 매립폐기물 굴착선병 완료

○ 2013. 07. 03 : 3차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 11. 12 : 중간검사(한국환경공단)

○ 2013. 11. ~  : 차수시설 및 관리동 마무리 공사

[별지 제3호서식] <사업부서 작성>

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013 - 04

담당부서

작성자

환경관리과/상수도담당

권기량/6345/grkwon@korea.kr

정 책 명

감천상수도 급수구역 확장공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 지방상수도 시설확충으로 상수도 보급률을 향상시키고 생활

용수를 안정적으로 보급하여 주민의 보건위생향상.

○ 추진기간 : 2011.01 ~ 2014.12. (4년간)

○ 총사업비 : 6,774백만원

○ 주요내용

- 송․배․급수관로 부설 L=48㎞, 배수지 100톤/일 1지

가압장 5개소, 전기 1식, 기계 1식

○ 추진경과

- 2010.  4월 : 농어촌도서지역2단계확충사업(수정)반영(환경부)

- 2011.  2월 : 기본및실시설계 용역 착수

- 2011.  8월 : 기본및실시설계 용역 완료

- 2011. 10월 : 도 투․융자심사 완료 (경상북도)

- 2011. 12월 : 예천군수도정비기본계획(변경) 승인 (환경부)

- 2012.  3월 : 공사 착공(총괄, 1차분)

- 2013.  2월 : 공사 착공(2차분)

- 2013.  9월 : 공사 준공(1차분)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사 권 중 희

- 최종 결재자 : 예 천 군 수  이 현 준

○사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준		’10.07.01～현재	군 수
부군수	정기채	4급	’11.07.01～’13.01.03	부군수
부군수	이왕용	4급	’13.01.04～현재	“
과장	장무환	5급	’09.08.12～’12.06.30	과장
과장	이종헌	5급	’12.07.01～’13.07.08	“
과장	엄상흠	5급	’13.07.09～현재	“
담당	권중희	6급	’11.01.01～’13.02.28	담당
담당	최덕환	6급	’13.03.01～현재	“
담당자	박래익	7급	’09.11.26～’12.09.09	담당자
담당자	권기량	7급	’12.09.10～현재	“

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 물환경정책국 수도정책과

- 경상북도 환경산림국 물산업과

○ 설계사 : (주)도화엔지니어링, (주)청우엔지니어링

○ 시공사 : 강동건설(주)

추진실적

○ 2013.09.16 : 1차공사 준공

- 송․배․급수관로 부설 L=18㎞, 배수지 100톤/일 1지

가압장 1개소

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-05

담당부서

작성자

(환경관리과 /하수도담당 )

(안길준/650-6371/

ak8012@korea.kr

정 책 명

마전 농어촌마을 공공하수도시설 설치공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 지보면 소재지 전역에서 발생하는 생활오수를 적정처리하여 공중위생향상과 공공수역의 수질보전에 기여하고자 함.

○ 추진기간 : 2013.06. ~ 2015.06.

○ 총사업비 : 6,030백만원

○ 주요내용

- 하수처리장 Q=230㎥/일, 하수관거 L=6.206㎞

○ 추진경과

- 2008.12.   : 예천군하수도정비 기본계획반영

- 2011.12.   : 기본 및 실시설계 용역완료

- 2012.02.   : 환경부 국고보조금 신청

- 2013.02.   : 도 투융자심사 완료

- 2013.04.   : 도 설치인가 완료

- 2012.06.   : 환경부 총사업비 변경 완료

- 2013.06.~현재 : 총괄계약(1차분 사업)  추진중

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사보    안길준(성명)

- 최종 결재자 : 예 천 군 수       이현준(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준	군수	‘10.07.01.~현재	군 수
부군수	정기채	4급	‘11.07.01.~’13.01.03.	부군수
부군수	이왕용	4급	‘13.01.04.~현재	〃
과 장	장무환	5급	‘09.08.12~’12.06.30.	과 장
과 장	이종헌	5급	‘12.07.01.~’13.07.08.	〃
과 장	엄상흠	5급	‘13.07.09.~현재	〃
담 당	장성윤	6급	‘11.07.14.~2012.09.09	담 당
담 당	박운수	6급	‘11.09.10.~현재	〃
담 당 자	안길준	7급	2011.12.~현재	담당자

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 물환경정책국 생활하수과

- 경상북도 환경산림국 물산업과

○ 설계사 : (주)도화엔지니어링,(주)청우엔지니어링

○ 시공사 : 성일토건(주)

○ 감리사 : (주)한도엔지니어링,(주)한국종합기술

추진실적

○ 2008.12.   : 예천군하수도정비 기본계획반영

○ 2011.12.   : 기본 및 실시설계 용역완료

○ 2012.02.   : 환경부 국고보조금 신청

○ 2013.02.   : 도 투융자심사 완료

○ 2013.04.   : 도 설치인가 완료

○ 2012.06.   : 환경부 총사업비 변경 완료

○ 2013.06.~현재 : 총괄계약(1차분 사업)  추진중

○ 2013. 11. : 공정률 :38.55%

- 하수관거 L=3.590㎞