정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-15

담당부서

작성자

(예천군 / 건설과)

(권기성/054-650-6336/

ggs0318@korea.kr)

정 책 명

금당실권역 농촌마을 종합개발사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 최근 국민소득 증가, 주40시간제 근무 실시 등으로 농촌공간에 대한 국민들의 의식 변화로 농촌의 쾌적한 생활공간으로서의 기능을 강조

- 바람직한 농촌모델이 될 수 있는 농촌 정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 불어넣기 위해 농촌마을종합개발사업을 추진

○ 추진기간 : 2011.01.01 ~ 2015.12.31

○ 총사업비 : 7,000백만원

○ 주요내용

(금액단위:천원)
공 종		사업량	사업비	비 고
합 계			700,000
○ 공 사 비			5,306,942
- 순공사비			4,700,342
기초 생활	마을안길정비	0.75km	356,000
	마 을 쉼 터	3개소	354,916
소득 기반	저온저장고	1동(165㎡)	137,000
문화 복지	금당실활성화센터	1식	1,276,556
	금당실문화마당	1동(99㎡)	228,000
	건강관리실	1동(83㎡)	170,322
	마을회관 신축	1.2km	390,580
경관 시설	담장정비	0.8km	752,000
	주변경관정비	1개소	33,242
농촌 관광	송림산책로	0.1km	181,126
	숲탐방로	1식	190,600
	디딜방아복원	1식	46,310
	안내시설구축		575,000
부대공사			8,690
- 소프트웨어			606,600
○제경비			1,693,058

○ 추진경과

- 2009.07.04.~8.22 : 농촌마을종합개발 선진지견학

- 2009.09    : 농촌마을종합개발사업 추진 주민결의

- 2009.10.16 : 예비타당성조사 대상지 신청

- 2009.11.12.~11.13 : 예비타당성 서면심사

- 2009.12.07.~12.18 : 예비타당성 현장심사

- 2009.12.28. : 농촌마을종합개발사업 대상지확정

- 2011.03.22 : 기본계획수립 고시

- 2011.03.23. ~ 11.22 : 세부설계 시행

- 2011.12.16 : 시행계획수립 승인

- 2011.12.12.~2015.12.31 : S/W사업 시행

- 2011.12.22.~2015.12.31 : 기반시설공사 시행

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 6급  권중희

- 최종 결재자 : 시설 5급  안철모

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	이동한	시설6급	‘13.07.09～	업무총괄
담당	이용석	시설6급	‘11.12.01～’13.07.08	업무총괄
담당	강성철	시설6급	‘11.07.14～’11.11.30	업무총괄
담당	이동한	시설6급	‘10.04.29～’11.07.13	업무총괄
담당	박왕기	시설6급	‘09.08.12～’10.04.28	업무총괄
담당	권중희	시설6급	‘09.01.02～08.11	업무총괄
담당자	권기성	시설7급	‘13.07.09~	사업추진
담당자	김황수	시설7급	‘11.12.01～’13.07.08	사업추진
담당자	김정민	시설7급	‘11.09.08~12.30	사업추진
담당자	김정회	시설7급	‘10.09.01～’11.09.07	사업추진
담당자	권혁목	시설7급	‘09.08.12~‘10.08.31	사업추진
담당자	황재극	시설7급	‘09.01.02～08.11	사업추진

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 농림축산식품부

- 예비타당성조사 후 전문가심사 결과에 따른 대상지 선정

○ 경사북도

- 기본계획수립 승인

○ 한국농어촌공사

- 기본계획 및 실시설계

- 1단계, 2단계사업 시행

○ 금당실권역 추진위원회

- 자발적인 참여를 통한 원활한 사업추진

- 주만간 상호 협력으로 권역의 발전방향 모색

- 시설물 운영관리

○ 금당실권역 자문위원

- 각 분야별 사업아이템지원 및 기본계획수립(안) 자문

추진실적

○ 1단계사업 시행

- 사업내용 : 기초생활기반시설, 문화·복지시설, 경관개선,

주민역량강화사업

- 사 업 비 : 4,231,600천원

- 기    간 : 2011.01.01.~2013.12.31.

- 추진실적 : 95%

○ 2단계사업 시행 예정

- 2014.01.01. ~ 2015.12.31