정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-10

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

대심1리 도시계획도로 개설

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 경북도청이전에 따른 인구정책 및 지역개발을 감안 시

주거기반시설이 부족한 실정으로 도로망 구축에 따른

주거기반 확충 및 지역간 균형발전.

○ 추진기간 : 2011. 1. ～ 2014. 6.

○ 총사업비 : 6,600백만원

- ‘11년도 예산액 :  380백만원

- ‘12년도 예산액 : 3,000백만원

- ‘13년도 예산액 : 3,220백만원

○ 주요내용

- 도로개설 L=900m B=25.0m

○ 추진경과

- 2011.01.20. : 실시설계용역 착수

- 2011.09.15. : 도시계획도로 실시계획인가

- 2012.12.14. : 경상북도 계약원가심사 완료

- 2013.01.09. : 일상감사 완료

- 2013.02.21. : 공사계약

- 2014.06.19. : 준공예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 황완섭

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	황완섭	지방시설 사무관	‘11.1.1～’11.7.13	과업무총괄
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘11.7.14～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘11.7.14～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘11.1.1～’11.7.13 ‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	김혁제	지방시설7급	‘11.1.1～’13.2.24	설계감독
담당자	신언석	지방시설7급	‘13.2.25～현재	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)가람이앤씨

○ 시공자

- (주)유성건설

추진실적

○ 2013.02.25 대심1리 도시계획도로 개설공사 사업 시행 중

- 사 업 량 : 도로개설 L=900m B=25.0m

- 사 업 비 : 3,220백만원

- 사업기간 : 2013.02.25 ～ 2014.06.19

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-11

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

예천IC 진입로 확장공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 사통팔달의 교통망을 구축함으로써 교통정체 해소 및

쾌적한 도로환경조성으로 지역경기 활성화 도모.

○ 추진기간 : 2012. 1. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 2,100백만원

- ‘12년도 예산액 : 2,100백만원

○ 주요내용

- 도로개설 L=334m B=25.0m

○ 추진경과

- 2012.09.27. : 실시설계용역 착수

- 2012.11.23. : 경상북도 계약원가심사 완료

- 2012.12.17. : 공사계약

- 2013.02.27. : 국가지정문화재 주변 현상변경허가 완료

- 2014.02.19. : 준공예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 박왕기

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘12.1.1～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘12.1.1～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	신언석	지방시설7급	‘12.9.10～현재	설계및공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)세원

○ 시공자

- (주)명성종합건설

추진실적

○ 2012.12.21 예천IC진입로 확장공사 사업 시행 중

- 사 업 량 : 도로개설 L=334m B=25.0m

- 사 업 비 : 2,100백만원

- 사업기간 : 2012.12.21 ～ 2014.02.19

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-12

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

우계-생천간 도시계획도로 개설

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 예천읍 시가지로 집중되는 교통량을 외곽도로로 분산시켜

교통소통을 원활히 하고 지역간 균형발전 도모.

○ 추진기간 : 2012. 1. ～ 2014. 12.

○ 총사업비 : 8,000백만원

- ‘12년도 예산액 : 1,000백만원

- ‘13년도 예산액 : 3,000백만원

- ‘14년도 이후   : 4,000백만원

○ 주요내용

- 교량개설 L=170m B=11.75m

- 접속도로 L=170m B=11.75m

○ 추진경과

- 2012.04.03. : 실시설계용역 착수

- 2013.05.23. : 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

- 2013.06.07. : 경상북도 계약원가심사 및 일상감사 완료

- 2013.06.25. : 공사계약

- 2013.06.27. : 농지전용 및 산지전용 협의완료

- 2013.08.22. : 비관리청 공사시행허가 완료

- 2013.10.21. : 상수원보호구역 행위허가 완료

- 2013.11.04. : 경상북도 하천점용허가 완료

- 2013.11.11. : 하천공사 실시계획인가 협의완료

- 2014.12.23. : 준공예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 박왕기

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘12.1.1～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘12.1.1～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	김혁제	지방시설7급	‘12.1.1~’13.6.1	공공측량 및 행정절차
담당자	신언석	지방시설7급	‘13.6.2～현재	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)도화엔지니어링,(주)동성엔지니어링

○ 시공자

- 신성종합건설(주)

추진실적

○ 2013.07.02 우계-생천간 도시계획도로 개설공사 사업 시행 중

- 사 업 량 : 교량개설 L=170m B=11.75m

접속도로 L=170m B=11.75m

- 사 업 비 : 4,000백만원

- 사업기간 : 2013.07.02 ～ 2014.12.23

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-13

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

남본삼거리-우계삼거리간 도시계획도로 개설

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 예천읍 주요 진출입로를 확장함으로써 교통소통을 원활히

하고 도로이용자의 통행안전 확보 및 지역간 균형발전 도모.

○ 추진기간 : 2011. 1. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 6,800백만원

- ‘11년도 예산액 : 3,800백만원

- ‘12년도 예산액 : 2,000백만원

- ‘13년도 예산액 : 1,000백만원

○ 주요내용

- 도로확장(3차구간) L=720m B=22.0m

- 도로확장(4차구간) L=740m B=22.0m

○ 추진경과

- 2011.03.14. : 실시설계용역 완료

- 2011.03.18. : 경상북도 계약원가심사 완료(3차구간)

- 2012.03.08. : 경상북도 계약원가심사 완료(4차구간)

- 2011.04.27. : 공사계약(3차구간)

- 2012.03.28. : 공사계약(4차구간)

- 2014.02.28. : 준공예정(4차구간)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 황완섭

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	황완섭	지방시설 사무관	‘11.1.1～’11.7.13	과업무총괄
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘11.7.14～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘11.7.14～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘11.1.1～’11.7.13 ‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	김혁제	지방시설7급	‘11.1.1～’13.6.16	설계및공사감독
담당자	신언석	지방시설7급	‘13.7.9～현재	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)한백종합기술공사 : 3차구간

- (주)설계마당 : 4차구간

○ 시공자

- 세영종합건설(주) : 3차구간

- 대흥종합건설(주) : 4차구간

추진실적

○ 2011.04.29 남본삼거리-우계삼거리간 도시계획도로(3차) 착수

- 사 업 량 : 도로개설 L=720m B=22.0m

- 사 업 비 : 4,800백만원

- 사업기간 : 2011.04.29 ～ 2012.11.23

○ 2012.11.23 남본삼거리-우계삼거리간 도시계획도로(3차) 준공

○ 2012.04.05 남본삼거리-우계삼거리간 도시계획도로(4차) 착수

- 사 업 량 : 도로개설 L=740m B=22.0m

- 사 업 비 : 2,000백만원

- 사업기간 : 2012.04.05 ～ 2014.02.28

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-14

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

대심(무리실) 도시계획도로 개설

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 장기 미집행 도시계획도로의 조기 개설로 사유재산권 보장

및 도로망 구축에 따른 지역간 균형발전 도모.

○ 추진기간 : 2011. 1. ～ 2013. 6.

○ 총사업비 : 1,750백만원

- ‘11년도 예산액 :  500백만원

- ‘12년도 예산액 : 1,250백만원

○ 주요내용

- 도로개설 L=382m B=15.0m

○ 추진경과

- 2011.01.19. : 실시설계용역 착수

- 2012.02.29. : 경상북도 계약원가심사 완료

- 2012.03.26. : 공사계약

- 2012.03.30. : 공사착수

- 2013.06.28. : 공사준공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 황완섭

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	황완섭	지방시설 사무관	‘11.1.1～’11.7.13	과업무총괄
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘11.7.14～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘11.7.14～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘11.1.1～’11.7.13 ‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	김혁제	지방시설7급	‘11.1.1～’13.6.16	설계및공사감독
담당자	신언석	지방시설7급	‘13.6.17～’13.6.28	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)한길

○ 시공자

- (주)신풍이엔시

추진실적

○ 2012.03.30 대심(무리실) 도시계획도로 개설공사 착수

- 사 업 량 : 도로개설 L=382m B=15.0m

- 사 업 비 : 1,250백만원

- 사업기간 : 2012.03.30 ～ 2013.06.28

○ 2013.06.28 대심(무리실) 도시계획도로 개설공사 준공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-15

담당부서

작성자

(예천군 / 건설과)

(권기성/054-650-6336/

ggs0318@korea.kr)

정 책 명

금당실권역 농촌마을 종합개발사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 최근 국민소득 증가, 주40시간제 근무 실시 등으로 농촌공간에 대한 국민들의 의식 변화로 농촌의 쾌적한 생활공간으로서의 기능을 강조

- 바람직한 농촌모델이 될 수 있는 농촌 정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 불어넣기 위해 농촌마을종합개발사업을 추진

○ 추진기간 : 2011.01.01 ~ 2015.12.31

○ 총사업비 : 7,000백만원

○ 주요내용

(금액단위:천원)
공 종		사업량	사업비	비 고
합 계			700,000
○ 공 사 비			5,306,942
- 순공사비			4,700,342
기초 생활	마을안길정비	0.75km	356,000
	마 을 쉼 터	3개소	354,916
소득 기반	저온저장고	1동(165㎡)	137,000
문화 복지	금당실활성화센터	1식	1,276,556
	금당실문화마당	1동(99㎡)	228,000
	건강관리실	1동(83㎡)	170,322
	마을회관 신축	1.2km	390,580
경관 시설	담장정비	0.8km	752,000
	주변경관정비	1개소	33,242
농촌 관광	송림산책로	0.1km	181,126
	숲탐방로	1식	190,600
	디딜방아복원	1식	46,310
	안내시설구축		575,000
부대공사			8,690
- 소프트웨어			606,600
○제경비			1,693,058

○ 추진경과

- 2009.07.04.~8.22 : 농촌마을종합개발 선진지견학

- 2009.09    : 농촌마을종합개발사업 추진 주민결의

- 2009.10.16 : 예비타당성조사 대상지 신청

- 2009.11.12.~11.13 : 예비타당성 서면심사

- 2009.12.07.~12.18 : 예비타당성 현장심사

- 2009.12.28. : 농촌마을종합개발사업 대상지확정

- 2011.03.22 : 기본계획수립 고시

- 2011.03.23. ~ 11.22 : 세부설계 시행

- 2011.12.16 : 시행계획수립 승인

- 2011.12.12.~2015.12.31 : S/W사업 시행

- 2011.12.22.~2015.12.31 : 기반시설공사 시행

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 6급  권중희

- 최종 결재자 : 시설 5급  안철모

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	이동한	시설6급	‘13.07.09～	업무총괄
담당	이용석	시설6급	‘11.12.01～’13.07.08	업무총괄
담당	강성철	시설6급	‘11.07.14～’11.11.30	업무총괄
담당	이동한	시설6급	‘10.04.29～’11.07.13	업무총괄
담당	박왕기	시설6급	‘09.08.12～’10.04.28	업무총괄
담당	권중희	시설6급	‘09.01.02～08.11	업무총괄
담당자	권기성	시설7급	‘13.07.09~	사업추진
담당자	김황수	시설7급	‘11.12.01～’13.07.08	사업추진
담당자	김정민	시설7급	‘11.09.08~12.30	사업추진
담당자	김정회	시설7급	‘10.09.01～’11.09.07	사업추진
담당자	권혁목	시설7급	‘09.08.12~‘10.08.31	사업추진
담당자	황재극	시설7급	‘09.01.02～08.11	사업추진

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 농림축산식품부

- 예비타당성조사 후 전문가심사 결과에 따른 대상지 선정

○ 경사북도

- 기본계획수립 승인

○ 한국농어촌공사

- 기본계획 및 실시설계

- 1단계, 2단계사업 시행

○ 금당실권역 추진위원회

- 자발적인 참여를 통한 원활한 사업추진

- 주만간 상호 협력으로 권역의 발전방향 모색

- 시설물 운영관리

○ 금당실권역 자문위원

- 각 분야별 사업아이템지원 및 기본계획수립(안) 자문

추진실적

○ 1단계사업 시행

- 사업내용 : 기초생활기반시설, 문화·복지시설, 경관개선,

주민역량강화사업

- 사 업 비 : 4,231,600천원

- 기    간 : 2011.01.01.~2013.12.31.

- 추진실적 : 95%

○ 2단계사업 시행 예정

- 2014.01.01. ~ 2015.12.31

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-16

담당부서

작성자

(예천군/건설과)

(김황수/650-6562/

halo9914@korea.kr))

정 책 명

초항교~곤충연구소 농로 개설공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 2012년 곤충엑스포의 원활한 추진을 위한 차량소통 및 주차공간 확보와 주변 환경정비로 청정 예천 이미지 조성은 물론 농지에 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여하고자 함.

○ 추진기간 : 2010. 08. 30 ~ 2012. 07. 25

○ 총사업비 : 290백만원

○ 주요내용

- 콘크리트포장 B=8.0(6.0), L=1.7km

- 암거(13*3.5) L=14m

- 역T형옹벽(H=4.0m), l=39m

- 보강토옹벽 L=126m

○ 추진경과

- 2010. 08. 30. : 초항교~곤충연구소 농로개설 계획수립

- 2010. 09. 09. : 실시설계용역 시행

- 2011. 01. 14. : 농지전용 협의

- 2011. 02. 07. : 사전환경성검토 협의

- 2011. 03. 23. : 편입토지 보상금 지급 통보

- 2011. 03. 29. : 초항교~곤충연구소 농로개설공사 시행

- 2011. 04. 25. : 초항교~곤충연구소 농로개설공사 착공

- 2011. 07. 25. : 초항교~곤충연구소 농로개설공사 준공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사 최 덕 환

- 최종 결재자 : 건설과장     황 완 섭

○ 사업관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	최덕환	시설6	10.04.29~ 11.07.13	업무총괄
담당	이용석	시설6	11.07.14~ 13.07.08	업무총괄
담당자	권기성	시설7	09.02.09~ 11.03.07	사업계획수립 및 공사감독
담당자	김황수	시설8	11.03.08~ 현재	사업계획수립 및 공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계사

(주) 설계마당 최석한

○ 시공사

(주)백송건설 김하영

추진실적

○ 2012. 07. 25 초항교~곤충연구소 농로 개설공사 준공

- 사업량 : 콘크리트포장 B=8.0(6.0), L=1.7km

- 사업비 : 1,739,367천원

- 사업기간 : 2011. 04. 25 ~ 2012. 07. 25

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-17

담당부서

작성자

건설과 / 농촌개발담당

김정민 / 054-650-6333

/ kjm6335@korea.kr

정 책 명

수용지구 지표수 보강개발사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 농업용수가 부족한 수용지구에 저수지를 설치하여 농업생산성 향상 및 안정적인 농업용수를 공급하여 농가소득을 증대하고자 함.

○ 추진기간 : 2011. 07. 04 ～ 2015. 07. 02

○ 총사업비 : 6,140백만원

○ 주요내용

- 저수지 : 1개소 신설(L=126.2m H=25.3m)

유효저수량 208.5천톤

- 용수로 : 2조 L=3,054m

- 도  로 : 3조 L=1,489m B=5.0(4.0)～4.0(3.0)m

○ 추진경과

- 2011.07.04 : 공사 및 공사감리 용역 총괄 착수

- 2011.11.17 : 1차 공사 및 1차 공사감리 용역 착수

ㆍ이설도로 : L=964m B=5.0(4.0m)

- 2012.02.29 : 2차 공사 및 2차 공사감리 용역 착수

ㆍ제 당 : L=126.2m H=11.3m

ㆍ여방수로 : L=131.0m

ㆍ복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

ㆍ기초처리 : 68공

- 2012.05.24 : 1차 공사 및 1차 공사감리 용역 준공

ㆍ이설도로 L=964m B=5.0(4.0m)

- 2013.03.29 : 3차 공사 및 3차 공사감리 용역 착수

ㆍ제 당 : L=126.2m H=14.0m

ㆍ사 통 : D=0.6m 취수공 3공

ㆍ용수로 : 2조 L=3,054m

- 2013.08.05 : 2차 공사 및 2차 공사감리 용역 준공

ㆍ제 당 : L=126.2m H=11.3m

ㆍ여방수로 : L=131.0m

ㆍ복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

ㆍ기초처리 : 68공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 6급  전재달

- 최종 결재자 : 시설 5급  박왕기

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	강성철	시설6급	‘11.07.04～’13.01.20	사업계획 수립
담당	전재달	시설6급	‘13.01.21～현재	사업계획 수립
담당자	손옥란	시설8급	‘11.07.04～’11.07.13	공사감리 감독
담당자	전웅걸	시설7급	‘11.07.14～’11.11.16	공사감리 감독
담당자	김정민	시설7급	‘11.11.17～현재	공사감리 감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- 한국농어촌공사 경북지역본부

○ 시공자

- (주)대명건설

○ 공사감리자

- 한국농어촌공사 예천지사

추진실적

○ 수용지구 지표수 보강개발사업(1차) 착수 및 준공

- 사 업 량 : 이설도로 : L=964m B=5.0(4.0m)

- 사 업 비 : 1,429백만원

- 사업기간 : 2011.11.17～2012.05.24

○ 수용지구 지표수 보강개발사업(2차) 착수 및 준공

- 사 업 량 : 제 당 : L=126.2m H=11.3m

여방수로 : L=131.0m

복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

기초처리 : 68공

- 사 업 비 : 2,000백만원

- 사업기간 : 2012.02.29～2013.08.05

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-18

담당부서

작성자

(건설과 / 도로담당)

(임종진/6334/ljj1860@korea.kr)

정 책 명

성현교 개체공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 재난위험시설로 교량이 노후하고 협소하여 안전사고 위험이 높아

개체가 시급하며, 마을간의 연결교량으로 통행에 편의를 제공

○ 추진기간 : 2013. 04. 02 ~ 2014. 09. 23

○ 총사업비 : 1,906백만원

○ 주요내용

- 교량 : L=75m, B=9.2m

○ 추진경과

- 2011.11.01 : 도 지역현안사업 건의

- 2011.12.20 : 도 지역현안사업 통보(도로철도과-19153)

- 2012.01.27 : 실시설계 용역 발주

- 2012.08.14 : 예천군 설계자문위원회 설계 자문(예천군설계자문위원회-14327)

- 2012.09.04 : 실시설계 용역 완료

- 2012.11.02 : 편입용지 보상금 사정 및 협의

- 2013.01.14 : 군 문화재 현상변경허가 협의(문화관광과-705)

- 2013.03.11 : 도 하천점용(공작물설치허가)협의(치수방재과-3974)

- 2013.03.13 : 군 일상감사(기획감사실-2242)

- 2013.03.14 : 군 계약원가심사(재무과-4231)

- 2013.03.15 : 사업 발주(총괄)

- 2013.03.26 : 계약(총괄)

- 2013.03.28 : 계약(1차)

- 2013.04.02 : 착공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설7급 임종진

- 최종 결재자 : 예천군수 이현준

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	박왕기	시설5급	‘12.01～현재	건설업무 총괄
담당	장사휘	시설6급	‘12.01～현재	도로업무 총괄
담당자	임종진	시설7급	‘12.01～현재	도로업무

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자 : (주)한백종합기술공사

○ 시공자 : 서원종합건설(주)

추진실적

○ 2013.03.15 : 사업 발주

○ 2013.04.02 : 착공