정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-17

담당부서

작성자

건설과 / 농촌개발담당

김정민 / 054-650-6333

/ kjm6335@korea.kr

정 책 명

수용지구 지표수 보강개발사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 농업용수가 부족한 수용지구에 저수지를 설치하여 농업생산성 향상 및 안정적인 농업용수를 공급하여 농가소득을 증대하고자 함.

○ 추진기간 : 2011. 07. 04 ～ 2015. 07. 02

○ 총사업비 : 6,140백만원

○ 주요내용

- 저수지 : 1개소 신설(L=126.2m H=25.3m)

유효저수량 208.5천톤

- 용수로 : 2조 L=3,054m

- 도  로 : 3조 L=1,489m B=5.0(4.0)～4.0(3.0)m

○ 추진경과

- 2011.07.04 : 공사 및 공사감리 용역 총괄 착수

- 2011.11.17 : 1차 공사 및 1차 공사감리 용역 착수

ㆍ이설도로 : L=964m B=5.0(4.0m)

- 2012.02.29 : 2차 공사 및 2차 공사감리 용역 착수

ㆍ제 당 : L=126.2m H=11.3m

ㆍ여방수로 : L=131.0m

ㆍ복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

ㆍ기초처리 : 68공

- 2012.05.24 : 1차 공사 및 1차 공사감리 용역 준공

ㆍ이설도로 L=964m B=5.0(4.0m)

- 2013.03.29 : 3차 공사 및 3차 공사감리 용역 착수

ㆍ제 당 : L=126.2m H=14.0m

ㆍ사 통 : D=0.6m 취수공 3공

ㆍ용수로 : 2조 L=3,054m

- 2013.08.05 : 2차 공사 및 2차 공사감리 용역 준공

ㆍ제 당 : L=126.2m H=11.3m

ㆍ여방수로 : L=131.0m

ㆍ복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

ㆍ기초처리 : 68공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 6급  전재달

- 최종 결재자 : 시설 5급  박왕기

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
담당	강성철	시설6급	‘11.07.04～’13.01.20	사업계획 수립
담당	전재달	시설6급	‘13.01.21～현재	사업계획 수립
담당자	손옥란	시설8급	‘11.07.04～’11.07.13	공사감리 감독
담당자	전웅걸	시설7급	‘11.07.14～’11.11.16	공사감리 감독
담당자	김정민	시설7급	‘11.11.17～현재	공사감리 감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- 한국농어촌공사 경북지역본부

○ 시공자

- (주)대명건설

○ 공사감리자

- 한국농어촌공사 예천지사

추진실적

○ 수용지구 지표수 보강개발사업(1차) 착수 및 준공

- 사 업 량 : 이설도로 : L=964m B=5.0(4.0m)

- 사 업 비 : 1,429백만원

- 사업기간 : 2011.11.17～2012.05.24

○ 수용지구 지표수 보강개발사업(2차) 착수 및 준공

- 사 업 량 : 제 당 : L=126.2m H=11.3m

여방수로 : L=131.0m

복 통 : 2.54×2.40 L=101.0m

기초처리 : 68공

- 사 업 비 : 2,000백만원

- 사업기간 : 2012.02.29～2013.08.05

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-18

담당부서

작성자

(건설과 / 도로담당)

(임종진/6334/ljj1860@korea.kr)

정 책 명

성현교 개체공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 재난위험시설로 교량이 노후하고 협소하여 안전사고 위험이 높아

개체가 시급하며, 마을간의 연결교량으로 통행에 편의를 제공

○ 추진기간 : 2013. 04. 02 ~ 2014. 09. 23

○ 총사업비 : 1,906백만원

○ 주요내용

- 교량 : L=75m, B=9.2m

○ 추진경과

- 2011.11.01 : 도 지역현안사업 건의

- 2011.12.20 : 도 지역현안사업 통보(도로철도과-19153)

- 2012.01.27 : 실시설계 용역 발주

- 2012.08.14 : 예천군 설계자문위원회 설계 자문(예천군설계자문위원회-14327)

- 2012.09.04 : 실시설계 용역 완료

- 2012.11.02 : 편입용지 보상금 사정 및 협의

- 2013.01.14 : 군 문화재 현상변경허가 협의(문화관광과-705)

- 2013.03.11 : 도 하천점용(공작물설치허가)협의(치수방재과-3974)

- 2013.03.13 : 군 일상감사(기획감사실-2242)

- 2013.03.14 : 군 계약원가심사(재무과-4231)

- 2013.03.15 : 사업 발주(총괄)

- 2013.03.26 : 계약(총괄)

- 2013.03.28 : 계약(1차)

- 2013.04.02 : 착공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설7급 임종진

- 최종 결재자 : 예천군수 이현준

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	박왕기	시설5급	‘12.01～현재	건설업무 총괄
담당	장사휘	시설6급	‘12.01～현재	도로업무 총괄
담당자	임종진	시설7급	‘12.01～현재	도로업무

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자 : (주)한백종합기술공사

○ 시공자 : 서원종합건설(주)

추진실적

○ 2013.03.15 : 사업 발주

○ 2013.04.02 : 착공