정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2013-03

담당부서

작성자

환경관리과/생활환경담당

김동태/6191/kdt111@korea.kr

정 책 명

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 예천 청복 비위생매립장을 위생매립장으로 조성하여 생활폐기물의 안정적인 처리기반을 구축하고 환경오염이 없은 환경친화적인 매립장운영으로 주변 환경피해를 최소화하기 위함.

○ 추진기간 : 2010. 1월 ~ 2013. 12월

○ 총사업비 : 15,856백만원

○ 주요내용

- 시설면적 19,520㎡(관리시설 1,810㎡, 매립시설 12,840㎡)

- 매립용량 : 125,000㎥

- 침출수 처리 : R/O시스템 40톤/일

○ 추진경과

- 2009. 05. 19 : 타당성 조사용역

- 2010. 03. 31 : 기본 및 실시설계용역

- 2011. 03. 22 : 군 관리계획 결정(변경)안 공람공고

- 2011. 03. 23 : 사전환경성검토서 주민의견 수렴

- 2011. 04. 02 : 주민설명회 개최

- 2011. 04. 20 : 설계경제성(VE) 검토

- 2011. 05. 02 : 군의회 의견청취［간담회, 임시회］
- 2011. 05. 31: 기술(설계) 심의［도청 제1회의실］

- 2011. 09. 05 : 관리계획 결정 및 지형도면 고시

- 2011. 10. 06 : 폐기물처리시설 변경 승인(경상북도)

- 2011. 12. 20 : 공사착공(태동건설(주))

- 2012. 01. 28 주민설명회 개최(90명 정도 복지회관)

- 2012. 03. 28 주민 협약식 체결(영상회의실)

- 2012. 05. 04 매립폐기물 굴착ㆍ선별 시작

- 2013. 04. 29 토목 1차분 준공

- 2013. 06. 10 매립폐기물 굴착ㆍ선별 완료

- 2013. 11월 현재 차수시설 및 관리동 공사중(공정율 92%)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방환경주사 박종하

- 최종 결재자 : 예천군수 이현준

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준		’10.01.01～현재	군 수
부군수	정기채	4급	’10.01.01～’13.01.03	부군수
부군수	이왕용	4급	’13.01.04～현재	“
과장	장무환	5급	’10.01.01～’12.06.30	과장
과장	이종헌	5급	’12.07.01～’13.07.08	“
과장	엄상흠	5급	’13.07.09～현재	“
담당	박종하	6급	’10.01.01～’13.01.20	담당
담당	오규섭	6급	’13.01.21～현재	“
담당자	임홍기	6급	’10.01.01～’12.02.20	담당자
담당자	김동태	7급	’12.02.21～현재	“

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 자원순환국 폐자원에너지과

- 경상북도 환경산림국 환경정책과

○ 설 계 사 : (주)건화, 청우엔지니어링

○ 시 공 사

- 토목분야 : (주)태동건설, 국기건설(주)

- 폐기물 선별 : (주)포스벨, 악취안정화 : (주)KC환경

- 전기분야 : (주)서창전기

○ 감 리 사 : (주)경호엔지니어링, (주)동성엔지니어링

추진실적

○ 2012. 12. 20 : 공사착공

○ 2012. 05. 04 : 굴착선별 시행

○ 2013. 01. 04 : 1차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 03. 19 : 1차 설계변경

○ 2013. 04. 04 : 2차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 04. 29 : 토목공사 1차분 준공

○ 2013. 06. 10 : 매립폐기물 굴착선병 완료

○ 2013. 07. 03 : 3차 가연성폐기물 위탁처리

○ 2013. 11. 12 : 중간검사(한국환경공단)

○ 2013. 11. ~  : 차수시설 및 관리동 마무리 공사