정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-05

담당부서

작성자

(환경관리과 /하수도담당 )

(안길준/650-6371/

ak8012@korea.kr

정 책 명

마전 농어촌마을 공공하수도시설 설치공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 지보면 소재지 전역에서 발생하는 생활오수를 적정처리하여 공중위생향상과 공공수역의 수질보전에 기여하고자 함.

○ 추진기간 : 2013.06. ~ 2015.06.

○ 총사업비 : 6,030백만원

○ 주요내용

- 하수처리장 Q=230㎥/일, 하수관거 L=6.206㎞

○ 추진경과

- 2008.12.   : 예천군하수도정비 기본계획반영

- 2011.12.   : 기본 및 실시설계 용역완료

- 2012.02.   : 환경부 국고보조금 신청

- 2013.02.   : 도 투융자심사 완료

- 2013.04.   : 도 설치인가 완료

- 2012.06.   : 환경부 총사업비 변경 완료

- 2013.06.~현재 : 총괄계약(1차분 사업)  추진중

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설주사보    안길준(성명)

- 최종 결재자 : 예 천 군 수       이현준(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	이현준	군수	‘10.07.01.~현재	군 수
부군수	정기채	4급	‘11.07.01.~’13.01.03.	부군수
부군수	이왕용	4급	‘13.01.04.~현재	〃
과 장	장무환	5급	‘09.08.12~’12.06.30.	과 장
과 장	이종헌	5급	‘12.07.01.~’13.07.08.	〃
과 장	엄상흠	5급	‘13.07.09.~현재	〃
담 당	장성윤	6급	‘11.07.14.~2012.09.09	담 당
담 당	박운수	6급	‘11.09.10.~현재	〃
담 당 자	안길준	7급	2011.12.~현재	담당자

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 상급기관

- 환경부 물환경정책국 생활하수과

- 경상북도 환경산림국 물산업과

○ 설계사 : (주)도화엔지니어링,(주)청우엔지니어링

○ 시공사 : 성일토건(주)

○ 감리사 : (주)한도엔지니어링,(주)한국종합기술

추진실적

○ 2008.12.   : 예천군하수도정비 기본계획반영

○ 2011.12.   : 기본 및 실시설계 용역완료

○ 2012.02.   : 환경부 국고보조금 신청

○ 2013.02.   : 도 투융자심사 완료

○ 2013.04.   : 도 설치인가 완료

○ 2012.06.   : 환경부 총사업비 변경 완료

○ 2013.06.~현재 : 총괄계약(1차분 사업)  추진중

○ 2013. 11. : 공정률 :38.55%

- 하수관거 L=3.590㎞