정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-12

담당부서

작성자

예천군/건설과

(신언석/650-6341

/seok4622@korea.kr)

정 책 명

우계-생천간 도시계획도로 개설

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 예천읍 시가지로 집중되는 교통량을 외곽도로로 분산시켜

교통소통을 원활히 하고 지역간 균형발전 도모.

○ 추진기간 : 2012. 1. ～ 2014. 12.

○ 총사업비 : 8,000백만원

- ‘12년도 예산액 : 1,000백만원

- ‘13년도 예산액 : 3,000백만원

- ‘14년도 이후   : 4,000백만원

○ 주요내용

- 교량개설 L=170m B=11.75m

- 접속도로 L=170m B=11.75m

○ 추진경과

- 2012.04.03. : 실시설계용역 착수

- 2013.05.23. : 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

- 2013.06.07. : 경상북도 계약원가심사 및 일상감사 완료

- 2013.06.25. : 공사계약

- 2013.06.27. : 농지전용 및 산지전용 협의완료

- 2013.08.22. : 비관리청 공사시행허가 완료

- 2013.10.21. : 상수원보호구역 행위허가 완료

- 2013.11.04. : 경상북도 하천점용허가 완료

- 2013.11.11. : 하천공사 실시계획인가 협의완료

- 2014.12.23. : 준공예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설5급 박왕기

- 최종 결재자 : 예천군수

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
건설과장	박왕기	지방시설 사무관	‘12.1.1～현재	과업무총괄
계장	유민종	지방시설6급	‘12.1.1～’13.7.8	도시계획담당
계장	이용석	지방시설6급	‘13.7.9～현재	도시계획담당
담당자	김혁제	지방시설7급	‘12.1.1~’13.6.1	공공측량 및 행정절차
담당자	신언석	지방시설7급	‘13.6.2～현재	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- (주)도화엔지니어링,(주)동성엔지니어링

○ 시공자

- 신성종합건설(주)

추진실적

○ 2013.07.02 우계-생천간 도시계획도로 개설공사 사업 시행 중

- 사 업 량 : 교량개설 L=170m B=11.75m

접속도로 L=170m B=11.75m

- 사 업 비 : 4,000백만원

- 사업기간 : 2013.07.02 ～ 2014.12.23