[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

안전재난과

②담당자

(연락처)

박노서 6155

안전재난과장

/시설5급/유민종

③정책사업명

덕거리 소하천 정비공사

④선정기준

군정 주요현안에 관한 사업

⑤사업기간

2012 ~ 2014

⑥주요내용

□ 목   적

소하천정비 기본계획에 의한 재해위험 소하천 정비사업으로 주거

환경개선과 수해피해를 예방하고 자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 하리면 오류리~금곡리

○ 사업내용 : 하천정비 L=1,650m, 교량 4개소

○ 총 사업비

(단위 : m,백만원)

전체계획		‘13까지		‘14계 획
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
1,650	3,780	1,400	2,544	250	1,236

□ 추진실적

○ 2012. 1월 : 설계용역 착공

○ 2012. 3월 : 설계자문위원회 개최

○ 2012. 4월 : 보상금 사정지급 통보

○ 2013. 6월 : 1차 사업 완료(L=340m)

○ 2013. 12월 : 2차 사업 완료(L=850m)

○ 2014. 3월 : 3차 사업 완료(L=180m)

○ 2014. 3월 : 4차 시설사업 착공

∙사 업 량 : 하천정비 L=250m, 소공원조성 1개소

∙사 업 비 : 금415백만원(도급239 관급150 폐기물25)

∙사업기간 : ‘14. 3. 19 ~ ’14. 9. 19.

∙시 공 사 : 용강산업(주) 구 석 해

<기재항목>

[별지 제2호서식]

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2013-22	담당부서 작성자	(안전재난과/하천담당) (박노서/6155)
정 책 명	덕거리 소하천 정비공사
사업개요	○ 추진배경 - 소하천정비 기본계획에 의한 재해위험 소하천 정비사업으로 주거환경개선과 수해피해를 예방하고자 함. ○ 추진기간 : 2012.01 ~ 2014.09 ○ 총사업비 : 3,780백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 하리면 오류리 ~ 금곡리 - 사업량 : 축제 및 호안 L=1,650m, 교량 4개소
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘11.12.26 : 실시설계용역 시행 - 안전재난과 하천담당 전재달, 안전재난과장 박재춘 부군수 정기채, 군수 이현준 ○ ‘12.01.03 : 소하천정비사업 확정 - 안전재난과 하천담당 전재달, 안전재난과장 박재춘 부군수 정기채, 군수 이현준 ○ ‘12.11.15 : 소하천정비공사 1차 시행 - 안전재난과 하천담당 전재달, 안전재난과장 이정희 부군수 정기채, 군수 이현준 ○ ‘13.03.20 : 소하천정비공사 2차 시행 - 안전재난과 하천담당 강성철, 안전재난과장 이정희 부군수 이왕용, 군수 이현준 ○ ‘13.10.28 : 소하천정비공사 3차 시행 - 안전재난과 하천담당 강성철, 안전재난과장 유민종 부군수 이왕용, 군수 이현준 ○ ‘14.03.24 : 소하천정비공사 4차 시행 - 안전재난과 하천담당 강성철, 안전재난과장 유민종 부군수 김상동, 군수 이현준

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능