정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	장은주(650-6919) 안전재난과장/ 시설5급/최덕환
③정책사업명	담암 재해위험지구 정비사업
④선정기준	군정 주요현안에 관한사업	⑤사업기간	2013.02.~2016.12
⑥주요내용	○ 추진배경 통수단면이 부족하여 집중호우 시 잦은 범람으로 농경지 유실 및 침수피해가 빈번한 하천을 정비하여 재해예방 및 지역 주민의 삶의 질 향상을 위함 ○ 추진기간 : 2013.02. ~ 2016.12. ○ 총사업비 : 8,598백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 예천군 호명면 내신리~담암리 일원(왕신천) - 사업량 : L=2.05km(하천정비) ∙ 교 량 공 : 교량개체 6개소 ∙ 호 안 공 : 식생매트 A=25,716㎡ ∙ 배 수 공 : 배수암거 5개소, 배수통관 등 기타 ∙ 구조물공 : L형옹벽 L=2,104m ∙ 포 장 공 : 콘크리트 및 아스콘 포장 A=8,528㎡ - 사업기간 : 2014.12.19. ~ 2016.12.17. ○ 추진경과 - 2013.02. : 실시설계 용역 착수 - 2014.04. : 사전 설계검토 및 보완 - 2014.09. : 보상협의 및 관련분야 행정절차 이행 - 2014.12. : 총괄계약 및 1차분 착공(교량3개소, (주)청진종합건설) - 2015.02. : 2차분 공사 착공(교량3개소, 홍수옹벽) - 2016.02. : 3차분 공사 착공(교량마무리, 홍수옹벽 및 호안정비) - 2016.12 : 전체공사 마무리 및 준공예정

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2016-7	담당부서 작성자	(안전재난과 / 복구지원담당) (장은주 / 650-6919)
정 책 명	담암 재해위험지구 정비사업
사업개요	○ 추진배경 통수단면이 부족하여 집중호우 시 잦은 범람으로 농경지 유실 및 침수피해가 빈번한 하천을 정비하여 재해예방 및 지역 주민의 삶의 질 향상을 위함 ○ 추진기간 : 2013.02. ~ 2016.12. ○ 총사업비 : 8,598백만원 ○ 주요내용 ◦위 치 : 예천군 호명면 내신리~담암리 일원(왕신천) ◦사업량 : L=2.05km(하천정비)
추진경과 및 사업관련자	□ 추진경과 및 사업 관련자 현황 ○ 2013.02. : 담암 재해위험지구 정비사업 실시설계용역 시행 - 안전재난과 복구지원담당 황재극, 안전재난과장 유민종, 부군수 이왕용, 군수 이현준 ○ 2014.12. : 담암 재해위험지구 정비사업 총괄계약 및 1차시행 - 안전재난과 복구지원담당 황재극, 안전재난과장 유민종, 부군수 김상동, 군수 이현준 ○ 2015.03. : 담암 재해위험지구 정비사업 2차시행 - 안전재난과 복구지원담당 황재극, 안전재난과장 유민종, 부군수 박창수, 군수 이현준 ○ 2016.02. : 담암 재해위험지구 정비사업 3차시행 - 안전재난과 복구지원담당 김혁제, 안전재난과장 최덕환, 부군수 박창수, 군수 이현준