정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	농정과	②담당자 (연락처)	지현주(650-6267) 농정과장/ 행정5급/이종헌
③정책사업명	고품질쌀 유통 활성화 사업
④선정기준	군정 주요현안에 관한사업	⑤사업기간	2015.01.~ 2017.12.
⑥주요내용	○ 추진배경 고품질 쌀 브랜드 육성 및 벼 건조·저장시설 확충 등을 통한 지역 쌀 산업의 대외 경쟁력을 확보하고 생산·유통 거점 대표 브랜드 쌀로 육성하여 농가소득 증대 및 지역 이미지 제고 ○ 추진기간 : 2015.01.~ 2017.12. ○ 총사업비 : 8,131백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 개포면 경진리 37-1 외 4필지 - 사업내용 ∙ 가공시설현대화(1개소) : 5,017백만원 ∙ 건조저장시설(500톤 5기) : 2,914백만원 ∙ 브랜드 육성(교육·홍보·컨설팅) : 200백만원 - 사업기간 : 2015.01.~ 2017.12. ○ 추진경과 - 2015. 02. : 고품질유통활성화사업 대상자 선정 - 2015. 07. ~ 08. : 기본설계심의회 - 2015. 09. ~ 11 : 부지추가매입 - 2015. 12. ~ 2016. 03. : 공장설립인허가 - 2016. 03. ~ 04. : 건축 및 기계·전기 현장설명 및 입찰 - 2016. 04. : 시공업체 선정 - 2016. 05. : 사업 착공

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2016-6	담당부서 작성자	(농정과 / 농사담당) (지현주 / 650-6267)
정 책 명	고품질쌀 유통 활성화 사업
사업개요	○ 추진배경 고품질 쌀 브랜드 육성 및 벼 건조·저장시설 확충 등을 통한 지역 쌀 산업의 대외 경쟁력을 확보하고 생산·유통 거점 대표 브랜드 쌀로 육성하여 농가소득 증대 및 지역 이미지 제고 ○ 추진기간 : 2015.01.~ 2017.12. ○ 총사업비 : 8,131백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 개포면 경진리 37-1 외 4필지 - 사업내용 ∙ 가공시설현대화(1개소) : 5,017백만원 ∙ 건조저장시설(500톤 5기) : 2,914백만원 ∙ 브랜드 육성(교육·홍보·컨설팅) : 200백만원
추진경과 및 사업관련자	□ 추진경과 및 사업 관련자 현황 ○ 2015. 2. : 고품질유통활성화사업 대상자 선정 - 농림축산식품부 식량산업과 사무관 박성기, 과장 전한영 ○ 2015. 7. ~ 8. : 기본설계심의회 - 한국식품연구원 ○ 2015. 9. ~ 11. : 부지추가매입 - 예천군농협쌀조합공동사업법인 담당 조현웅, 대표 김광수 ○ 2015. 12. ~ 2016. 3. : 공장설립인허가 - 경북도청 농지담당 김진윤, 농축산유통국 과장 최웅 ○ 2016. 3. ~ 4. : 건축 및 기계·전기 현장설명 및 입찰 - NH개발, 예천군농협쌀조합공동사업법인 담당 조현웅, 대표 김광수 ○ 2016. 4. : 시공업체 선정 - NH개발, 예천군농협쌀조합공동사업법인 담당 조현웅, 대표 김광수 ○ 2016. 05. : 사업 착공 - 건축도시과 건축담당 장원호, 건축도시과장 황이상 부군수 박창수, 군수 이현준