정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	건축도시과	②담당자 (연락처)	지휘근 (650-6341) 건축도시과장/ 시설5급/황이상
③정책사업명	한천수계 도심하천 생태복원사업
④선정기준	군정 주요현안에 관한 사업	⑤사업기간	2015.08.~2017.02
⑥주요내용	○ 추진배경 도심 실개천을 조성하여 친수공간 확보로 삶의 여유공간 제공과 차량위주의 시가지 도로를 사람 중심의 여유로운 거리로 형성하여 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2015. 08. ~ 2017. 02. ○ 총사업비 : 7,921백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 예천읍 백전리 (백전천) - 사업량 : 생태복원사업 L=0.36Km, 호안및생태원조성 등 - 사업기간 : 2015. 08. ~ 2017. 02. ○ 추진경과 - 도심하천시범사업 선정(환경부 MOU 체결) : 2011. 6월 - 주민설명회 실시 3회 : 2013. 5. 3. 외 2일 - 기본 및 실시설계 기술검토 완료 : 2013. 12. 31. - 예천군 설계 자문위원회 자문 : 2014. 1. 13. - 생태하천복원 심의위원회 심사승인 : 2014. 5. 20. - 편입물건 감정 평가 : 2014. 6. 27. - 편입물건 보상 통지 : 2014. 10. 21. - 지정폐기물 처리공사 착공 : 2015. 6. 5. - 도 계약원가심사 완료 : 2015. 7. 13. - 사업발주 완료 : 2015. 7. 15 (총괄) - 1차 공사 : 2015.08.25 ~ 2016. 02. 25 (준공 2015. 12.18) - 2차 공사 : 2016.01.13. ~ 2017. 02. 04

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-4	담당부서 작성자	(건축도시과 / 도시계획담당) (지휘근 / 650-6341)
정 책 명	한천수계 도심하천 생태복원사업
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 도심 실개천을 조성하여 친수공간 확보로 삶의 여유공간 제공과 차량위주의 시가지 도로를 사람 중심의 여유로운 거리로 형성하여 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2015. 08. ~ 2017. 02. ○ 총사업비 : 7,921백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 예천읍 백전리 (백전천) - 사업량 : 생태복원사업 L=0.36Km, 호안및생태원조성 등
추진경과 및 사업 관련자)	□ 추진경과 및 사업 관련자 현황 ○ 2015. 07. : 한천수계 도심하천 생태복원사업 착공 (총괄) - 건축도시과 도시계획담당 강성철, 건축도시과장 황이상 부군수 박창수 , 군수 이현준 ○ 2015. 08. : 한천수계 도심하천 생태복원사업 (1차) 착공 - 건축도시과 도시계획담당 강성철, 건축도시과장 황이상 부군수 박창수 , 군수 이현준 ○ 2015. 12. : 한천수계 도심하천 생태복원사업(1차공사 변경) - 건축도시과 도시계획담당 강성철, 건축도시과장 황이상 ○ 2015. 12. : 한천수계 도심하천 생태복원사업(1차공사 준공) - 건축도시과 도시계획담당 강성철, 건축도시과장 황이상 ○ 2016. 01. : 한천수계 도심하천 생태복원사업 (2차) 착공 - 건축도시과 도시계획담당 강성철, 건축도시과장 황이상 부군수 박창수 , 군수 이현준