정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)		최관열(650-6908) 문화관광과장/ 5급/ 김수현
③정책사업명	녹색문화상생벨트조성[예천지구]
④선정기준	군정 주요현안에 관한사업		⑤사업기간		2011 ~ 2019
⑥주요내용	○ 추진배경 - 낙동강 연안의 우수한 강 문화와 생태자원을 관광자원으로 특화하고 기존 관광자원과 연계하여 녹색문화 신 성장 동력 으로 활용 ○ 사업위치 : 예천군 풍양면 삼강리 삼강주막 일원 ○ 사업개요(예산포함) - 개발면적 : 211,141㎡ - 사업기간 : 2011 ~ 2019년(9년간) - 총사업비 : 94,193백만원 (국비 48,096 지방비 28,812 민자 17,285) - 사업내용 : 휴양·문화, 전시·체험, 공공편익, 공원, 상가 및 숙박시설 등 조성 ○ 추진상황 및 계획 - 2015년까지 : 인허가 및 설계용역 완료, 용지매입 완료, 건설공사 착공, 문화재발굴조사 완료 - 2016. 12. : 전시관 골조공사 및 오수처리장 설치 완료 - 2017. 12. : 건설공사 마무리 및 건축·토목공사 준공 - 2018년 이후 : 부대공사 준공, 민자 유치 및 관광지개장

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-2	담당부서 작성자	(문화관광과 / 관광개발담당) (최관열 / 650-6908)
정 책 명	녹색문화상생벨트조성[예천지구]
사업개요	○ 추진배경 - 낙동강 연안의 우수한 강문화와 생태자원을 관광자원으로 특화 하고 기존 관광자원과 연계하여 녹색문화 신성장 동력으로 활용 ○ 추진기간 : 2011 ~ 2019년(9년간) ○ 총사업비 : 94,193백만원 ○ 주요내용 - 휴양·문화, 전시·체험, 공공편익, 공원, 상가 및 숙박시설 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진경과 ○ 2008. 09. : 대경권 광역경제권 선도프로젝트 선정[균발위] ○ 2010. 03. : 3대문화권사업 기본계획 수립[문광부] ○ 2010. 11. : 중앙 투융자심사 승인[행자부] ○ 2010. 11. : 간이예비타당성 조사완료[기재부] ○ 2013. 04. : 농업진흥지역 해제 및 농지전용협의 ○ 2013. 05. : 전략환경영향평가 협의 ○ 2014. 04. : 관광지 지정 및 조성계획 승인 ○ 2014. 09. : 기타 관련행정절차(산지전용,도로점용 등) 완료 ○ 2014. 10. : 설계용역 완료 ○ 2014. 12. : 토지보상 및 매입 완료 ○ 2015. 01. : 건설공사 착공 ○ 2015. 12. : 문화재 발굴조사 완료 ※ 2016. 6월말기준 종합진도율 35% □ 사업관련자 ○ 2011.02. : 녹색문화상생벨트조성사업 추진계획 보고 - 관련자 : 문화관광과 담당자 장원호, 담당 황이상, 과장 이경식 부군수 정석권, 군수 이현준 ○ 2011.06. : 녹색문화상생벨트조성사업 주민설명회 - 관련자 : 문화관광과 관광개발담당 황이상, 문화관광과장 이경식 기획감사실장 박재혁, 부군수 정석권, 군수 이현준 이장 정재윤외 21명 ○ 2014.04. : 관광지지정 및 조성계획 승인, 지형도면 고시 - 관련자 : 경상북도 관광진흥과 담당자 신영균, 담당 임진걸, 과장 김일환, 국장 김남일 ○ 2014.09. : 녹색문화상생벨트조성사업 설계용역 최종보고회 - 관련자 : 문화관광과 담당자 최관열, 담당 황이상, 과장 박중식 부군수 김상동, 군수 이현준 기획감사실장 이경식외 실과단소장 17명 ㈜도화엔지니어링 이사 강성철, ㈜간삼건축 소장 남명관, ㈜시공테크 부장 정서진, TDI컨설팅 실장 박희은 ○ 2015. 01.～ : 건설공사 착공 - 관련자 : 문화관광과 관광개발담당 고세환, 문화관광과장 이기성 부군수 박창수, 군수 이현준