[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	건축도시과	② 담당자 (전화번호)	권영익(650-6353) 건축도시과장/ 시설5급/황이상
③ 정책사업명	신청사 건립 사업
④ 선정기준	군정 주요현안에 관한 사업	⑤ 사업기간	2014. 9 ～ 2017. 12
⑥ 주요내용	○ 추진배경 - 현 청사의 노후화, 사무공간의 협소, 주차공간 부족 등 주민불편사항 해소 및 신청사 건립을 통하여 군민 편의제공과 삶의 질 향상, 문화‧복지 서비스 제공을 통한 다양한 행정 소요 충족 ○ 사업위치 : 예천군 예천읍 대심리 353 ○ 사업개요(예산포함) - 대지면적 : 41,893㎡ - 연 면 적 : 17,617㎡ - 건축규모 : 지하1층, 지상5층 - 사업기간 : 2014. 9 ~ 2017. 12 - 총사업비 : 49,500백만원 - 설 계 자 : ㈜정림종합, ㈜삼원종합건축사사무소 공동 - 시 공 사 : ㈜흥원종합건설, 진남토건(주) ○ 추진상황 및 계획 - 2014. 7 : 청사 건립 타당성 조사, 신청사 건립기금 설치 및 운영조례 제정 - 2015. 6. ~ 11. : 기본 및 실시설계, 행정절차 완료 - 2015. 12. 30. : 착공 - 2016. 1 ~ 12. : 본청 및 의회 구조체 공사. 전기.통신.소방. 기계설비 공사. 토목공사. 기타공사. - 2017. 1. ~ 12. : 본청 및 의회 내, 외부 마감공사. 전기.통신. 소방. 기계설비 공사. 토목. 조경공사. 기타공사. - 2017. 12월말 : 준공 예정