[별지 제2호 서식]

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-14	담당부서 작성자	정재영(650-6353) 건축도시과장/시설5급/황이상
정 책 명	신청사 건립 사업
사업개요	○ 추진배경 - 현 청사의 노후화, 사무공간의 협소, 주차공간 부족 등 주민불편사항 해소 및 신청사 건립을 통하여 군민 편의제공과 삶의 질 향상, 문화‧복지 서비스 제공을 통한 다양한 행정 소요 충족 ○ 추진기간 : 2014.09. ~ 2018.01. ○ 총사업비 : 55,000백만원 ○ 주요내용 - 대지면적 : 41,911㎡ - 연 면 적 : 17,688㎡ - 건축규모 : 지하1층, 지상5층 - 설 계 자 : ㈜정림종합, ㈜삼원종합건축사사무소 공동 - 시 공 사 : ㈜흥원종합건설, 진남토건(주)
추진경과 및 사업 관련자	○ 14.07.21 : 청사 건립 타당성 조사, - 관련자 : 재무과 심재완, 재산관리담당 최종태, 경리담당 윤재영, 재무과장 이종헌, 기획감사실 예산담당 김중진, 기획감사실장 이경식, 부군수 김상동 ○ 14.09.25 : 신청사 건립기금 설치 및 운영조례 제정 - 관련자 : 기획감사실장 이경식 외 실과단소장 17명, 부군수 김상동 ○ 14.11.06 : 타당성조사 용역보고회 및 주민공청회 개최 - 관련자 : 한국지방행정연구원 신두섭, 대구경북연구원 최영은, 대구대학교 조덕호 ○ 15.01.05 : 기존 건물철거공사 설계용역 - 관련자 : 재무과 심재완, 재산관리담당 최종태, 경리담당 윤재영, 재무과장 이종헌 ○ 15.03∼06 : 기존 건물철거 - 관련자 : 재무과 김도윤, 경리담당 윤재영, 재무과장 안태일, 부군수 박창수 ○ 15.01.27∼03.16 : 기본계획수립 용역 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 재무과 경리담당 윤재영, 재무과장 안태일 ○ 15.03.16∼05.18 : 건축물 현상설계공모 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상 ○ 15.06∼11 : 기본 및 실시설계(※모든 행정절차 포함) - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 재무과 경리담당 윤재영, 재무과장 안태일, 기획감사실 예산담당 김중진, 기획감사실장 신동은, 부군수 박창수, 군수 이현준 ○ 15.06∼08 : 건설사업관리자(CM) 선정 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 부군수 박창수, 군수 이현준 ○ 15.11∼12 : 입찰공고 및 개찰(조달청) - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상 ○ 15.12.24 : 공사계약 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 부군수 박창수, 군수 이현준 ○ 15.12.30 : 착공 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 부군수 박창수, 군수 이현준 ○ 16.01~12 : 본청 및 의회 구조체 공사 / 전기·통신·소방·기계설비 공사 / 토목공사 / 기타공사 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 최재수, 건축담당 신현무, 공단조성담당 김정회, 건축도시과장 황이상, 총무과 박종태, 산림축산과 김신훈, 건설교통과 박성윤, 문화체육사업소 김경동 ○ 17.01~18.01 : 본청 및 의회 내·외부 마감공사 / 전기·통신· ·소방·기계설비 공사 / 토목공사 / 조경공사 / 기타공사 - 관련자 : 건축도시과 권영익, 서재영, 최재수, 건축담당 신현무, 공단조성담당 김정회, 건축도시과장 황이상, 총무과 박종태, 산림축산과 김신훈, 건설교통과 박성윤 ○ 18.01.30 : 준공 - 관련자 : 건축도시과 정재영, 주택담당 최재수, 건축담당 신현무, 건축도시과장 황이상, 총무과 박종태, 산림축산과 김신훈, 건설교통과 박성윤, 부군수 이재윤, 군수 이현준

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능