[별지 제1호 서식]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	경북 육상실내훈련장 건립
② 추진배경	4계절 이용이 가능한 육상 실내훈련장 건립
③ 사업개요	○ 사업목적 : 육상 전지훈련 유치 및 각종 대회 개최를 통한 지역경기 활성화 ○ 사업내용 : 육상 실내훈련장 5,613.7㎡ ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 5. ○ 사 업 비 : 8,000백만원(국 2,400, 도 500, 군 4,300, 특교 800)
④ 사업부서	문화체육사업소	⑤ 담당자	황우섭
⑥ 선정기준	주요 국･도･군정 현안에 관한 사항	⑦ 사업기간	2016. 1. ~2018. 5.
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
○ 기본계획 및 타당성 조사용역		2015. 1~3	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 최영종 주무관 황주섭
○ 공유재산 관리계획(수시분) 제출 ‣ 문서제목 : 2016년도 공유재산 관리계획(수시분) 제출 (※재무과-4155(2016.3.17.)호 원안 의결)		2016.3.8.	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 공공건축사업계획 사전검토(국가 공공건축지원센터) ‣ 문서제목 : 공공건축사업계획 사전검토 신청 (경북 육상실내훈련장 건립)		2016. 3.30.	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 제안공모 관리용역 시행 ‣ 문서제목 : 경북 육상실내훈련장 제안공모 관리용역		2016. 5.17.	부군수 박창수 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 경북 육상실내훈련장 건립 제안공모 공고 ‣ 문서제목 : 경북 육상실내훈련장 건립사업 제안 공모 공고	2016.5.31	군 수 이현준 부군수 박창수 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 경북 육상실내훈련장 건립 제안공모 작품심사 및 당선작 발표 ‣ 문서제목 : 경북 육상실내훈련장 건립 제안공모 심사결과 공고	2016.7.22.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 경북 육상실내훈련장 건립 기본 및 실시설계 용역 시행 ‣ 문서제목 : 경북 육상실내훈련장 건립 기본 및 실시 설계 용역 시행 (용역기간:2016.08.08.~2016.11.20.)	2016.8.3.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 건설사업관리 용역 시행 ‣ 문서제목 : 통합(예천국민체육센터 및 실내 게이트볼장 + 경북육상실내훈련장 건립사업) 건설사업관리 용역 시행	2017.2.28.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 각종행정절차 이행(교통영향평가, 기술자문, 원가심사, 지방건축위원회 심의, 건축협의 등)	2017.1~3.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 경북 육상실내훈련장 건립공사 발주 ‣ 문서제목 : 경북 육상실내훈련장 건립공사 시행 ※전기, 통신, 소방공사 및폐기물처리용역 포함	2017.4.11.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 경북 육상실내훈련장 건립(건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리용역 착공	2017.5.11.	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭