[별지 제1호 서식]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	예천 국민체육센터 건립
② 추진배경	신도청 시대에 부흥하는 체육센터 건립
③ 사업개요	○ 사업목적 : 군민들에게 건전한 스포츠 공간 및 여가·문화활동간 제공 ○ 사업내용 : 국민체육센터 6,902.03㎡ ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018.11 ○ 사 업 비 : 13,600백만원(국 3,300백만원 군 10,300백만원)
④ 사업부서	문화체육사업소	⑤ 담당자	황우섭
⑥ 선정기준	군정 주요현안에 관한사업	⑦ 사업기간	2016. 1.~2018.11.
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
○ 예천 국민체육센터 건립 기본계획 용역 ‣ 문서제목 : 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 신축공사 기본계획수립 용역 시행		2015.10.19.	부군수 박창수 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 최영종 주무관 황주섭
○ 공공건축사업계획 사전검토(국가 공공건축지원센터) ‣ 문서제목 : 공공건축사업계획 사전검토 신청 (예천국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립)		2016. 3.2.	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 공유재산 관리계획(수시분) 제출 ‣ 문서제목 : 2016년도 공유재산 관리계획(수시분) 제출 (※재무과-4155(2016.3.17.)호 원안 의결)		2016.3.8.	소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 일반설계공모 관리용역 발주 ‣ 문서제목 : 예천국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립 일반설계공모 관리용역 시행		2016.7.14.	부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 최영종 주무관 황우섭

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 예천 국민체육센터 일반설계공모 공고 ‣ 문서제목 : 예천국민체육센터 및 실내게이트볼장 일반설계공모 공고	2016.9.19.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 예천 국민체육센터 일반설계공모 작품심사 및 당선작 발표 ‣ 문서제목 : 예천국민체육센터 및 실내게이트볼장 설계공모 심사결과 보고	2016.11.18.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 예천 국민체육센터 기본 및 실시설계 용역 시행 ‣ 문서제목 : 예천국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립 기본 및 실시설계 용역 시행 (용역기간:2016.12.02.~2017.03.01.)	2016.12.1.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 건설사업관리 용역 시행 ‣ 문서제목 : 통합(예천국민체육센터 및 실내 게이트볼장 + 경북육상실내훈련장 건립사업) 건설사업관리 용역 시행	2017.2.28.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 각종행정절차 이행(교통영향평가, 설계경제성 검토, 기술자문, 원가심사, 지방건축위원회 심의, ,각종 예비인증, 건축협의 등)	2017.2~5.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건축공사 발주 ‣ 문서제목 : 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립공사 시행	2017.4.25.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립 전기, 통신, 소방, 폐기물처리용역 시행 ‣ 문서제목 : 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립 전기공사, 소방공사, 통신공사, 폐기물처리용역 시행	2017.5.30.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭
○ 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립(건축,전기, 통신,소방, 폐기물처리용역 착공 ‣ 문서제목 : 예천 국민체육센터 및 실내게이트볼장 건립 전기공사, 소방공사, 통신공사, 폐기물처리용역 착공계	2017.6.19.	군 수 이현준 부군수 서문환 소 장 박창배 담 당 도영기 주무관 황우섭