[별지 제1호 서식]

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	녹색문화상생벨트 조성사업
② 추진배경	국가균형발전의 일환으로 추진되는 3대문화권 선도사업
③ 사업개요	○ 사업목적 : 낙동강 연안의 강 문화와 생태자원을 관광자원으로 특화하고 기존 관광자원과 연계하여 녹색문화 신 성장동력으로 활용 ○ 사업내용 : 휴양문화, 전시체험, 공공편의, 상가 및 숙박시설 등 조성 ○ 사업규모 : 부지 211,141㎡, 건축 5,736㎡ ○ 사 업 비 : 92,316백만원(국비 48,731 지방비 29,084 민자 14,501)
④ 사업부서	예천군 문화관광과	⑤ 담당자	담당자 시설7급 민선기 담당자 시설6급 최관열 담당자 시설6급 권영익
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2011~2019년
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
○ 캠핑장 조성공사 착수		2018.12.26	군 수 김상동 부군수 장창호 과 장 오규섭 담 당 고세환 주무관 최관열
○ 상가 및 숙박시설 민간사업자 선정 및 MOU 체결		2018.03.08	군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 김재현 담 당 고세환 주무관 최관열
○ 상가 및 숙박시설 민간사업자 제안공모 시행		2017.12.14	군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 김재현 담 당 고세환 주무관 최관열
○ 예천 삼강 관광지 지정변경 및 조성계획 변경 승인 신청(경상북도)		2017.10.26.	군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 김재현 담 당 고세환 주무관 최관열

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 총사업비 조정 ※ 총사업비 92,316백만원 (국 48,731 도 6,265 군 22,819 민자 14,501)	2017.08.01	기획재정부
○ 문화재 정밀발굴조사 완료(문화재청) (2015.6.4. ~ 2015.12.17.)	2015.12.17.	군 수 이현준 부군수 박창수 과 장 김수현 담 당 고세환 주무관 최관열
○ 문화재 시굴조사 완료(문화재청) (2014.6.23. ~ 2015.4.27.)	2015.04.27.	부군수 박창수 과 장 김수현 담 당 고세환 주무관 최관열
○ 건설공사 착공	2014.12.29.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 이기성 담 당 황이상 주무관 최관열
○ 토지보상 완료(수용재결 포함) (2012.2.29. ~ 2014.12.12.)	2014.12.12.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 이기성 담 당 황이상 주무관 박민이
○ 전시물 제작·설치 사업 착수	2014.11.05.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 이기성 담 당 황이상 주무관 최관열
○ 인허가(관련행정절차) 및 설계용역 완료 (2011.11.22. ~ 2014.10.08.)	2014.10.08.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 이기성 담 당 황이상 주무관 최관열
○ 중간평가 ※ 총사업비 94,193백만원 (국 48,096 도 6,184 군 22,628 민자 17,285)	2014.10.02.	문화체육관광부

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 예천 삼강관광지 지정 및 조성계획 승인 (2012.10.18. ~ 2014.4.28)	2014.04.28.	경상북도
○ 건설사업관리 용역 착수	2014.02.10.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 김진철 담 당 황이상 주무관 최관열
○ 예천 삼강 관광지 지정 및 조성계획 승인 신청 (경상북도)	2012.10.18.	군 수 이현준 부군수 정기채 과 장 박중식 담 당 황이상 주무관 윤광모
○ 토지보상 위수탁 협약 체결(농어촌공사)	2012.02.29.	군 수 이현준 부군수 정기채 과 장 박중식 담 당 황이상 주무관 장원호
○ 인허가(관련행정절차) 및 설계용역 착수	2011.11.22.	군 수 이현준 부군수 정기채 과 장 박중식 담 당 황이상 주무관 장원호
○ 주민설명회 개최	2011.06.15.	군 수 이현준 부군수 정석권 과 장 이경식 담 당 황이상 주무관 장원호
○ 녹색문화상생벨트조성사업 추진계획(안) 보고	2011.02.07.	군 수 이현준 부군수 정석권 과 장 이경식 담 당 황이상 주무관 장원호
○ 간이 예비타당성조사 결과 통보 ※ 총사업비 115,452백만원 (국 56,821 도 7,805 군 34,875 민자 15,951)	2010.11.30.	기획재정부

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 중앙 투·융자심사 승인	2010.11.04.	행정안전부
○ 3대문화권 문화생태 관광기반 조성사업 기본 계획 수립(한국관광공사)	2010. 03월	문화체육관광부
○ 3대문화권 문화생태 관광기반조성 사업제안서 제출(경상북도 새경북기획단)	2009.06.12.	부군수 김상준 과 장 조동윤 담 당 함명수 주무관 권순진