[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마전천 정비공사
② 추진배경	지보면 소재지를 관통하고 있는 소하천으로 인명피해 및 재해 발생이 높으며 과거 취락지, 농경지 유실 등 재해 위험으로부터 사전 예방 하고자 함
③ 사업개요	○ 사업목적 : 소하천 정비를 통한 재해 사전 예방 ○ 사업내용 : 하천정비 L=3.4km , 교량 7개소 ○ 사업기간 : 2015.04.28.~2023.09.03 ○ 사 업 비 : 7,484백만원
④ 사업부서	안전재난과	⑤ 담당자	시설7급 안길준
⑥ 선정기준	소하천 기본계획에 의한 사업	⑦ 사업기간	2015. 04. 28. ~ 2023. 09. 03.
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
○ 마전천 정비공사 실시설계 용역 시행		2014.01.22.	군 수 이현준 부군수 김상동 과 장 유민종 담 당 강성철 주무관 박노서
○ 마전천 정비공사 주민설명회 개최		2014.06.25.	과 장 유민종 담 당 강성철 주무관 박노서
○ 마전천 정비공사 소규모 환경영향평가 용역 시행		2014.09.04.	부군수 김상동 과 장 유민종 담 당 강성철 주무관 박노서
○ 마전천 정비공사 문화재 지표조사 용역 시행		2014.12.08.	과 장 유민종 담 당 강성철 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사 원가심사 및 일상감사 의뢰		2015.01.30.	과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 마전천 정비공사 보상계획 공고	2015.02.12.	부군수 박창수 과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사 분할측량 실시	2015.02.16.	과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사 감정평가 의뢰 및 실시	2015.03.06.	과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사 편입토지 보상금 지급 통보	2015.04.03.	과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사(총괄)시행 (하천정비 L=3.4km , 교량 7개소)	2015.04.06.	군 수 이현준 부군수 박창수 과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사(1차)시행 축제공 : 흙깍기 및 유용성토 10,138㎥, 사토 13,117㎥ 교량공 : 합성라멘교설치 1개소 호안공 : 식생호안블럭쌓기 A=14,832㎡ 부대공 : 1식	2015.05.27.	군 수 이현준 부군수 박창수 과 장 유민종 담 당 장성윤 주무관 박동훈
○ 마전천 정비공사(2차)시행 축제공 : 흙깍기 및 유용성토 4,823㎥, 사토 9,540㎥ 교량공 : 합성라멘교설치 2개소, R.C라멘교설치 1개소 호안공 : 식생호안블럭쌓기 A=10,000㎡,식생옹벽블럭쌓기 A=4,630㎡ 부대공 : 1식	2016.08.25.	군 수 이현준 부군수 서문환 과 장 최덕환 담 당 황재극 주무관 류주영
○ 마전천 정비공사(3차)시행 축제공 : 흙깍기 및 유용성토 3,990㎥ 교량공 : 합성라멘교설치 1개소, R.C라멘교설치 1개소 호안공 : 식생호안블럭쌓기 A=3,817㎡ 부대공 : 1식	2018.03.27.	군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 강성철 담 당 김혁제 주무관 박창현

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 마전천 정비공사(3차) 시공중지 (경상북도 설계변경 계약원가심사 및 보상협의 지연)	2019.03.18.	부군수 장창호 과 장 전재달 담 당 권혁목 주무관 현영민