[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	오천·우망 농어촌마을 하수도정비
② 추진배경	「예천군 하수도정비기본계획변경(2015.2.)」에 따라 예천군 호명면 오천리 및 풍양면 우망리, 청곡리 일원 하수도시설의 설치
③ 사업개요	○ 사업목적 : 지역의 발생오수를 차집 처리하여 방류수역의 수질확보 ○ 사업내용 : 오수관로 설치 L=10.156km, 하수처리시설 150㎥/일 ○ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2021. 6. ○ 사 업 비 : 7,951백만원
④ 사업부서	환경관리과(하수도팀)	⑤ 담당자	신언석
⑥ 선정기준	법령(환경부, 환경개선특별회계) 대규모사업	⑦ 사업기간	2017. 5. ~ 2021. 6.
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도 외 2개 지구 기본 및 실시설계용역 시행(환경관리과-5839)		2017.02.14.	군 수 이현준 부군수 서문환 과 장 권영덕 팀 장 전재달 주무관 이정일
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도 외 2개 지구 기본 및 실시설계용역 착수계(환경관리과-19875)		2017.05.30	과 장 권영덕 팀 장 전재달 주무관 이정일
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도설치공사 재원협의 및 총사업비 변경승인 알림(경상북도 물산업과-265)		2019.01.09.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 류주영

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 오천 농어촌마을하수도외 1개 지구 기본 및 실시설계 설계안전성검토 용역 실시(환경관리과-6265)	2019.02.20.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공공하수도 설치인가(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (경상북도 물산업과-2719)	2019.03.12.	과 장 박종하(대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공공하수도 설치인가(오천 농어촌마을 하수도 설치공사) (경상북도 물산업과-2717)	2019.03.12.	과 장 박종하(대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 도로점용 허가신청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-11392)	2019.03.28	과 장 이옥기(대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 경상북도 지정문화재 현상변경 허가신청(삼수정) (우망 농어촌마을 하수도 설치공사)(환경관리과-11528)	2019.03.29.	과 장 이옥기(대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 농지전용 협의 요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-12695)	2019.04.05.	과 장 박종하(대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 일상감사요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-14022)	2019.04.15.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석

주요 추진내용	일 시	관 련 자
○ 일상감사요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-17592)	2019.05.10.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공사계약 원가심사 요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-19473)	2019.05.22	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석