정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	보문상수도 급수구역 확장
② 추진배경	예천상수도의 여유량을 미급수지역인 보문면 일원에 공급함으로써 미급수지역의 상수도 보급률 향상 및 수도운영 효율성 제고로 지역주민의 보건위생 향상에 기여하고자 함
③ 사업개요	사업목적 : 보문면 미 급수지역에 지방상수도 공급 사업내용 : 송ㆍ배수관 부설 L=69.3㎞, 가압장 5개소 배수지 1개소(400토/일) 사업기간 : 2015. 1. ~ 2021. 12. 사 업 비 : 15,870백만원
④ 사업부서	환경관리과(상수도팀)	⑤ 담당자	과 장 박종하 주 무 관 현영민
⑥ 선정기준	환경부(균형발전특별회계) (지방이양전환사업)	⑦ 사업기간	2015. 1.~2021. 12.
⑧ 그 간 주요 추진내용
주요 추진내용		일 시	관 련 자
예천군 수도정비기본계획 변경(안) 승인 알림(낙동강유역환경청 상수원관리과-1286)		2015. 5. 14	부군수 박창수 과 장 윤상무 팀 장 최덕환 주무관 임병길
보문상수도 급수구역 확장사업 기본 및 실시설계용역 시행(환경관리과-24880)		2015. 7. 17.	군 수 이현준 부군수 박창수 과 장 윤상무 팀 장 최덕환 주무관 전웅걸
보문상수도 급수구역 확장사업 총사업비 변경신청(환경관리과-19147)		2016. 5. 30	부군수 정해영 (대결) 과 장 윤상무 팀 장 장성윤 주무관 임병길
예천군 일반수도사업(보문상수도 급수구역 확장) 변경인가 (도물산업과-4550)		2017. 4. 18.	과 장 권영덕 팀 장 이동한 주무관 임병길

주요 추진내용	일 시	관 련 자
보문상수도 급수구역 확장공사 시행(환경관리과 – 3205)	2017. 1.24.	군 수 이현준 부군수 서문환 과 장 권영덕 팀 장 이동한 주무관 손옥란
보문상수도 급수구역 확장공사 착공신고서(환경관리과-8057)	2017. 3. 03.	과 장 권영덕 팀 장 이동한 주무관 손옥란
준공계(보문상수도 급수구역 확장공사(1차))(환경관리과-8999)	2018. 3. 13.	과 장 장사창 팀 장 이동한 주무관 권기량
보문상수도 급수구역 확장공사 시행(2차)(환경관리과 – 10580)	2018. 3. 26	군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 장사창 팀 장 이동한 주무관 권기량
보문상수도 급수구역 확장공사 시행(3차) (환경관리과 – 15924)	2019. 4. 29	군 수 김학동 부군수 장창호 과 장 임홍기 팀 장 이동한 주무관 류주영
준공계(보문상수도 급수구역 확장공사(2차))(환경관리과 – 19774)	2019. 5. 24	과 장 임홍기 팀 장 이동한 주무관 류주영
보문상수도 급수구역 확장공사 시행(4차) (환경관리과 – 8465)	2020. 3. 5	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 이동한 주무관 현영민
준공계(보문상수도 급수구역 확장공사(3차))(환경관리과 – 27404)	2020. 7. 14	과 장 박종하 팀 장 임병길 주무관 현영민