정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사
② 추진배경	도로망 확충(군도 1호선 우회도로 개설)
③ 사업개요	사업목적 : 곤충도시 예천의 대표적 시설물인 곤충생태원의 주 진입로가 협소하여 이를 개선하고 시설의 활성화 도모 사업내용 : 우회도로 L=0.9km, B=8.5m, 연결도로 L=0.1km, B=8.5m 주차장 A=4,800㎡ 사업기간 : 2018.01 ~ 2020.12 사 업 비 : 2,052백만원
④ 사업부서	건설교통과	⑤ 담당자		과 장 박운수 주 무 관 김성민
⑥ 선정기준	군정 주요현안에 관한사업	⑦ 사업기간		2018.01 ~ 2020.12
<그간 주요 추진내용>
주요 추진내용			일 시		관 련 자
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 기본 및 실시설계 용역			2018.02.13		군 수 이현준 부군수 이재윤 과 장 장사휘 팀 장 이용석 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 전략 및 소규모환경영향평가 용역			2018.08.17		과 장 장사휘 팀 장 이용석 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 주민설명회 개최			2019.05.02		과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 사전재해영향성 협의 완료			2019.10.14		과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 소규모환경영향평가 협의 완료			2019.10.18		과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 예천군 기술자문 시행 - 설계의 적정성 검토			2019.11.06		과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 시행 (총괄)			2019.12.06		군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 시행 (1차)			2019.12.23		부군수 이병월 과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 군도1호선 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시			2020.02.10		부군수 이병월 과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 시행 (2차)			2020.03.11		부군수 이병월 과 장 장사휘 팀 장 박운수 주무관 정대웅
벅스 어드벤쳐파크 진입로 확포장공사 시행 (1~2차)			2020.08.13		과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 김성민