정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	오천·우망 농어촌마을 하수도정비
② 추진배경	「예천군 하수도정비기본계획변경(2015.2.)」에 따라 예천군 호명면 오천리 및 풍양면 우망리, 청곡리 일원 하수도시설의 설치
③ 사업개요	사업목적 : 지역의 발생오수를 차집 처리하여 방류수역의 수질확보 사업내용 : 오수관로 설치 L=10.156km, 하수처리시설 150㎥/일 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 1. 사 업 비 : 7,951백만원
④ 사업부서	맑은물사업소(하수도팀)	⑤ 담당자	소 장 김세일 주 무 관 신언석
⑥ 선정기준	대규모 예산사업	⑦ 사업기간	2017.05.~2022.01.
<그간 주요 추진내용>
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도 외 2개 지구 기본 및 실시설계용역 시행 (환경관리과-5839)		2017.02.14.	군 수 이현준 부군수 서문환 과 장 권영덕 팀 장 전재달 주무관 이정일
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도 외 2개 지구 기본 및 실시설계용역 착수계 (환경관리과-19875)		2017.05.30.	과 장 권영덕 팀 장 전재달 주무관 이정일
○ 오천·우망 농어촌마을 하수도설치공사 재원협의 및 총사업비 변경승인 알림 (경상북도 물산업과-265)		2019.01.09.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 오천 농어촌마을하수도외 1개 지구 기본 및 실시설계 설계안전성검토 용역 실시 (환경관리과-6265)		2019.02.20.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공공하수도 설치인가(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (경상북도 물산업과-2719)		2019.03.12.	과 장 박종하 (대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공공하수도 설치인가(오천 농어촌마을 하수도 설치공사) (경상북도 물산업과-2717)		2019.03.12.	과 장 박종하 (대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석

○ 도로점용 허가신청 (우망 농어촌마을 하수도 설치공사 (환경관리과-11392)	2019.03.28.	과 장 이옥기 (대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 경상북도 지정문화재 현상변경 허가신청(삼수정) (우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-11528)	2019.03.29.	과 장 이옥기 (대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 농지전용 협의 요청 (우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-12695)	2019.04.05.	과 장 박종하 (대결) 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 일상감사요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-14022)	2019.04.15.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 일상감사요청(우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-17592)	2019.05.10.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 공사계약 원가심사 요청 (우망 농어촌마을 하수도 설치공사) (환경관리과-19473)	2019.05.22.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 설치공사(총괄) 시행 (환경관리과-21588)	2019.06.04.	군 수 김학동 부군수 장창호 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 설치공사(1차) 시행 (환경관리과-27818)	2019.07.17.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 전기 및 계측제어공사 시행 (환경관리과-28720)	2019.07.24.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 오천 농어촌마을 하수도 설치공사(총괄) 시행 (환경관리과-31627)	2019.08.14.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석

○ 오천 농어촌마을 하수도 설치공사(1차) 시행 (환경관리과-38939)	2019.10.08.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 오천 농어촌마을 하수도설치 전기 및 계측제어공사 시행 (환경관리과-41133)	2019.10.22.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 예천군 농어촌마을 하수도정비사업 (오천, 우망) 총사업비 (사업기간) 변경 승인 (경상북도 맑은물정책과-2290)	2020.03.02.	과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 설치공사(2차) 시행 (환경관리과-18677)	2020.05.08.	군 수 김학동 부군수 이병월 과 장 임홍기 팀 장 임종진 주무관 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 설치공사(3차) 시행 (환경관리과-33900)	2020.08.28.	군 수 김학동 부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 신언석
○ 오천 농어촌마을 하수도 설치공사(2차) 시행 (환경관리과-45295)	2020.11.16.	군 수 김학동 부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 신언석
○ 준공검사 결과보고(우망 농어촌마을 하수도 설치공사(1차), (2차),(3차)) (환경관리과-52900)	2020.12.24.	부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 신언석
○ 준공검사 결과보고(오천 농어촌마을 하수도 설치공사(1차)) (환경관리과-52922)	2020.12.24.	부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 신언석
○ 우망 농어촌마을 하수도 설치공사(4차) 시행 (맑은물사업소-384)	2021.01.15.	군 수 김학동 부군수 김준호 소 장 김세일 팀 장 신언석
○ 오천 농어촌마을 하수도 설치공사(3차) 시행 (맑은물사업소-1914)	2021.03.18.	군 수 김학동 부군수 김준호 소 장 김세일 팀 장 신언석