[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	백송~오천간 도로
② 추진배경	도로망 확충(군도25호선)
③ 사업개요	사업목적 : 도청 신도시와의 접근성 향상과 지역주민 및 지역을 방문하는 방문객들에게 편의를 제공하고자 함. 사업내용 : 도로 개설 L=813m B=8.0(6.5)m, 부체도로 L=745m B=3.0m 사업기간 : 2022.01. ~ 2025.12. 사 업 비 : 4,000백만원
④ 사업부서	건설교통과 도로팀		⑤ 담당자	과 장 박운수 주무관 이희종
⑥ 선정기준	군정현안		⑦ 사업기간	2022.01.~2025.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 백송~오천간 도로개설공사 기본 및 실시설계와 군관리계획 결정 및 재해영향성검토 용역 시행		‘22.03.02	군 수 김학동 부군수 전재업 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 백송~오천간 도로개설공사 주민설명회 개최(22.08.26)		‘22.08.17	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 백송~오천간 도로개설공사 소규모환경영향평가용역 시행		‘22.08.30	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 백송~오천간 도로개설공사 군관리계획(도로, 지구단위계획) 결정(변경)(안)에 대한 관련부서 (기관) 협의 요청		‘22.11.21	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 백송~오천간 도로개설공사 소규모 환경영향평가 협의 완료		‘22.12.16	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영

○ 백송~오천간 도로개설공사 소규모 재해영향평가용역 시행	‘23.01.20	부군수 이규삼 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 이희종
○ 백송~오천간 도로개설공사 손실보상 산정 및 통보	‘23.03.08	부군수 이규삼 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 이희종
○ 백송~오천간 도로개설공사 군관리계획(지구단위계획구역 및 지구단위계획:호명지구) 공동 위원회 심의 완료	‘23.04.06	부군수 이규삼 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 이희종
○ 백송~오천간 도로개설공사 소규모재해영향평가 협의 완료	‘23.05.03	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 이희종
○ 백송~오천간 도로개설공사 군관리계획(지구단위계획구역 및 지구단위계획_호명지구) 결정 (변경) 및 지형도면 등 고시	‘23.05.30	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 이희종