[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	호명 종산교차로~청복간 연결도로 개설
② 추진배경	도로망 확충(면도102호선, 리도202호선)
③ 사업개요	사업목적 : 대한민국 양궁의 메카인 예천진호국제양궁장과 도청 신도시 간 도로개설을 통해 이용자들에게 편리한 접근성 제공 사업내용 : 도로확포장 L=2.1km, B=11.0m 사업기간 : 2021.01. ~ 2025.12. 사 업 비 : 7,209백만원(국비 7,000백만원, 군비 209백만원)
④ 사업부서	건설교통과 도로팀		⑤ 담당자	과 장 박운수 주무관 민선기
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2021.01. ~ 2025.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 지역개발사업구역지정 및 기본 및 실시설계 용역 착수		‘21.11.22	군 수 김학동 부군수 김준호 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 지역개발계획 경미한 변경 승인 ※ 경상북도 도시재생과-5419(2022.6.2.)		‘22.06.02	실 장 김덕년 팀 장 김현자 주무관 김봉규
○ 단위사업 사전타당성 평가 완료		‘22.10.07	실 장 김덕년 팀 장 김현자 주무관 김봉규
○ 주민설명회(1차) 개최		‘22.11.02	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 전략 및 소규모환경영향평가 용역 착수		‘22.12.19	부군수 전재업 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 류주영
○ 주민설명회(2차) 개최		‘23.03.29	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 민선기
○ 재해영향평가 용역 착수		‘23.05.17	부군수 이규삼 과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 민선기
○ 지역개발사업구역 지정 신청 ※ 건설교통과-60818(2023.6.20.)		‘23.06.20	과 장 박운수 팀 장 임종진 주무관 민선기