정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	예천군 수도정비기본계획수립 용역
② 추진배경	예천군 도시계획 및 기타관련계획에 따른 용수수요량을 추정하여 급수수요 증가에 능동적으로 생활용수를 공급하기 위함
③ 사업개요	사업목적 : 용수수요량 추정하여 급수수요 증가에 능동적 으로 생활용수를 공급하기 위함 사업내용 : 기본계획 규모결정, 수요관리계획 등 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 12. 사 업 비 : 1,211백만원
④ 사업부서	맑은물사업소(상수도팀)	⑤ 담당자	소 장 김호태 주 무 관 정재구
⑥ 선정기준	연구용역	⑦ 사업기간	2020.10.~2023.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 예천군 수도정비기본계획 변경(안) 승인 알림 (낙동강유역환경청 상수원관리과-1286)		2015.05.14.	부군수 박창수 과 장 윤상무 팀 장 최덕환 주무관 임병길
○ 기본 및 실시설계 용역 일상감사, 원가심사 완료 (도 감사관–7991)		2020.05.28.	과 장 임홍기 팀 장 이동한 주무관 현영민
○ 기본 및 실시설계 용역 입찰자 선정을 위한 사업수행능력평가 실시 (환경관리과-7824)		2020.07.16.	부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 기본 및 실시설계 용역 입찰 완료 및 계약		2020.10.20.	과 장 박종하 팀 장 황옥희 주무관 김경남
○ 기본 및 실시설계 용역 착수 (환경관리과-41442)		2020.10.22.	과 장 박종하 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 상수원보호구역 해제 행정절차 진행 등으로 기본 및 실시설계 용역 과업 중지 (맑은물사업소-8256)		2021.09.01.	소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 수도정비기본계획(변경) 초안 검토 요청 맑은물사업소 → 도 맑은물정책과 (맑은물사업소-124)		2022.01.04.	소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 수도정비기본계획(변경) 초안 검토의견 통보 도 맑은물정책과 → 맑은물사업소 (도 맑은물정책과-7486)		2022.07.18.	소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 기본 및 실시설계 용역 과업 중지 해제 (맑은물사업소-10372)		2022.12.01.	소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인사항 내용 검토 지연으로 기본 및 실시설계 용역 과업 중지 (맑은물사업소-11064)		2022.12.22	소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 수도정비기본계획(변경) 승인 신청 맑은물사업소 → 도 맑은물정책과 (맑은물사업소-2400)		2023.03.08.	소 장 김호태 팀 장 권기량 주무관 정재구