정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업
② 추진배경	재난ㆍ가뭄 발생 시 제한급수 없이 생활용수를 안정적으로 공급할 수 있도록 광역, 지방상수도 급수구역 간 무단수 연계관로 체계 구축 필요
③ 사업개요	사업목적 : 재난ㆍ가뭄 발생시 광역상수도~지방상수도 연계로 제한급수 없이 생활용수 공급 사업내용 : 관로부설(D400mm) L=13.84km, 가압장 1개소 사업기간 : 2020. 01. ~ 2023. 12. 사 업 비 : 10,254백만원
④ 사업부서	맑은물사업소(상수도팀)	⑤ 담당자	소 장 김호태 주 무 관 정재구
⑥ 선정기준	대규모 예산사업	⑦ 사업기간	2020.01.~2023.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 예천군 수도정비기본계획 변경(안) 승인 알림 (낙동강유역환경청 상수원관리과-1286)		2015.05.14.	부군수 박창수 과 장 윤상무 팀 장 최덕환 주무관 임병길
○ 기본 및 실시설계 용역 일상감사, 원가심사 완료 (도 감사관–7991)		2020.05.28.	과 장 임홍기 팀 장 이동한 주무관 현영민
○ 기본 및 실시설계 용역 입찰자 선정을 위한 사업수행능력평가 실시 (환경관리과-7824)		2020.07.16.	부군수 김준호 과 장 박종하 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 기본 및 실시설계 용역 입찰 완료 및 계약		2020.10.20.	과 장 박종하 팀 장 황옥희 주무관 김경남
○ 기본 및 실시설계 용역 착수 (환경관리과-41442)		2020.10.22.	과 장 박종하 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 가압장 부지 협의 완료		2021.04.21.	소 장 김세일 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 사업 시행 관련 부서 협의		2021.08.~10.	소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 총괄 시행 및 건설사업관리용역 착수 (맑은물사업소-9892, 10115)		2021.10.~11.	군 수 김학동 부군수 김준호 소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 1차분 시행 및 착공 (맑은물사업소-11675)		2021.12.20.	군 수 김학동 부군수 김준호 소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 2차분 시행 및 착공 (맑은물사업소-2974)		2022.04.01.	군 수 김학동 부군수 전재업 소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 1차분 준공 (맑은물사업소-10857)		2022.12.16.	군 수 김학동 부군수 전재업 소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 정재구
○ 3차분 시행 및 착공 (맑은물사업소-2834)		2023.03.17.	군 수 김학동 부군수 이규삼 소 장 김호태 팀 장 권기량 주무관 정재구