정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장
② 추진배경	식수원 오염 및 수량부족으로 식수에 어려움을 겪고 있는 용문면 선리 미 급수구역 주민들에게 예천정수장의 지방상수도를 안정적으로 공급하고자 함
③ 사업개요	사업목적 : 용문면 선리 미 급수지역에 지방상수도 공급 사업내용 : 송ㆍ배ㆍ급수관 부설 L=12㎞, 가압장 2개소 배수지 1개소(50톤/일), 기계 및 전기설비 1식 사업기간 : 2021. 02. ~ 2023. 12. 사 업 비 : 1,900백만원
④ 사업부서	맑은물사업소(상수도팀)	⑤ 담당자	소 장 김호태 주 무 관 정재구
⑥ 선정기준	대규모 예산사업	⑦ 사업기간	2021.02~2023.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 실시 설계 용역 시행 및 착수 (맑은물사업소-1420)		2021.02.26.	부군수 김준호 소 장 김세일 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 실시 설계 용역 준공 (맑은물사업소-4635)		2021.05.14.	부군수 김준호 소 장 김세일 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 사업 건의(맑은물사업소→ 도 맑은물정책과) (맑은물사업소-6385)		2021.07.07.	소 장 권영익 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 일상감사, 원가심사 완료 (도 맑은물정책과 – 1394, 1538)		2022.02.11. 2022.02.16	소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 인허가 요청 기술자문 요청 (맑은물사업소-3334)		2022.04.11.	소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 (총괄, 1차) 시행 및 착공 (맑은물사업소-5402, 7721)		2022.06.15. 2022.08.31.	군 수 김학동 부군수 전재업 소 장 김호태 팀 장 임병길 주무관 현영민
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 (2차) 시행 및 착공 (맑은물사업소-2831)		2023.03.16.	군 수 김학동 부군수 이규삼 소 장 김호태 팀 장 권기량 주무관 정재구
○ 예천상수도 용문면 선리 급수구역 확장공사 (1차) 준공 (맑은물사업소-4611)		2023.05.02.	부군수 이규삼 소 장 김호태 팀 장 권기량 주무관 정재구