예천군 고시 제 2012 -162 호

예천군 수도정비기본계획(변경) 승인고시

1. 수도법 제4조 제3항에 의거 환경부 수도정책과-6274호(2011. 12. 03)로 승인된 예천군 수도정비기본계획(변경)에 대하여 같은법 제4조 제5항에 따라 아래와 같이 승인 사항을 고시합니다.

2. 관계도서는 예천군청 환경관리과에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2012년  3월 5일

예     천     군     수

수도의 정비에 관한 기본방침

수도 보급률이 낮은 지역의 수도 보급을 확대하고, 수돗물의 안정적 공급을 위한 정책을 장기적이고 계획적으로 추진하며, 항상 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급 하므로서, 군민의 보건·위생 향상과 쾌적한 생활환경 조성에 기여코자함.

승인고시 주요사항

가. 기본계획의 개요

나. 지방상수도 시설확충 및 개량계획

다. 마을상수도(소규모 급수시설)에 대한 정비 및 지방상수도 전환계획

라. 상수도 수질 및 수요관리 계획

마. 상수도 운영 및 관리개선 계획

바. 기술진단 및 재해대책

사. 주요사업 시행에 따른 재정계획

승인고시 세부내용

가. 기본계획의 개요

구 분		개 요					비 고
목 표 년 도		기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계
		2008년	2010년	2015년	2020년	2025년
급수현황 및 행정구역 면적		◦ 행정구역 총면적 : 660.83㎢ ◦ 1개 읍 11개 면지역 : 예천읍, 용문면,상리면, 하리면, 감천면, 보문면, 호명면, 유천면, 용궁면, 개포면, 지보면, 풍양면					기준년도 (2008년현재)
인구(인)	계획인구	48,444	44,600	41,360	37,860	34,700
	보급율(%)	64.2%	64.8%	78.9%	93.9%	96.2%
	급수인구	31,078	28,895	32,628	35,557	33,398
일평균급수량 원단위 (L/인․일)	예천읍	376	349	334	325	318	첨두부하율 1.35
	면지역	284	299	285	278	272	첨두부하율 1.30
계획일최대 수요량 (㎥/일)	생활용수	10,316	9,327	10,202	10,270	9,734
	기타용수	-	1,250	1,500	1,575	1,653	군부대
	소 계	10,316	10,577	11,702	11,845	11,387
정수장 시설용량 (㎥/일)	예천정수장	8,400	8,400	10,800	10,800	10,800	2,400㎥/일증설 (2015년)
	용문정수장	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	감천정수장	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	풍양정수장	1,000	1,000	1,000	1,400	1,400	400㎥/일증설 (2020년)
	지보정수장	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	용궁정수장	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	상리정수장	-	-	-	-	800	800㎥/일신설 (2025년)
	개포정수장	-	-	1,000	1,000	1,000	2012년 운영
	소 계	13,400	13,400	16,800	17,200	18,000
단계별 용수공급계획		2단계 : 예천급수구역 확장계획으로 예천정수장 2,400㎥/일증설 개포급수구역 2012년 지방상수도 공급 3단계 : 풍양급수구역 확장계획으로 예천정수장 400㎥/일증설 4단계 : 상리·하리면 지방상수도 전환으로 상리정수장 800㎥/일신설
마을상수도 및 소규모 급수시설(개소)		◦ 현재 마을상수도 및 소규모급수시설 인구 : 14,314인					1단계 : -개소 2단계 : 102개소 3단계 : 45개소 4단계 : 48개소 지방상수도전환
		219	225 (개인지하수→소규모 전환6개소)	123	78	30

나. 지방상수도 시설확충 및 개량계획

수도시설 확충계획

❍ 상수도시설은 국가하천인 낙동강에서 원수를 공급받는 풍양, 지보정수장이 있으며, 지방하천인 한천, 금곡천, 내성천, 금천에서 원수를 공급받는 예천, 용문, 감천, 용궁정수장이 있음.

❍ 예천군은 2008년 급수보급율이 64.2%로 경상북도 타군 평균 68.2% 보다 상대적으로 낮으며 2025년 계획 급수보급률 96.2%로 향상시키기 위하여 단계별로 시설확충계획 수립

❍ 취·정수시설 확충

구 분	1 단 계 (2008~2010년)	2 단 계 (2011~2015년)	3 단 계 (2016~2020년)	4 단 계 (2021~2025년)	비 고
예천 급수구역	-	• 여과지 확장 Q=2,400m3/일 • 정수지 확장 V=837.2m3	-	-
용궁 급수구역	-	-	• 정수지 확장 V=96m3	-
풍양 급수구역	-	-	• 여과지 확장 Q=400m3/일 • 정․배수지 확장 V=356.4m3	-
상리 급수구역	-	-	-	• 상리취․정수장 신설 Q=800m3/일

❍ 송·배수시설 확충

구 분	1 단 계	2 단 계	3 단 계	4 단 계
배 수 지		V=800m3	V=734m3	V=200m3
가 압 장		21개소	20개소	26개소
		V=922m3/일	V=1,057m3/일	V=1,063m3/일
배수관로		D50~D150mm	D50~D250mm	D80~D200mm
		L=168km	L=87km	L=65km

수도시설의 개량계획

❍ 기존 시설물 개량

예천군은 취수원의 수질이 평균적으로 좋음(Ⅰb)이상으로 양호하여 완속여과공정으로 정수를 생산하고 있으며, 시설물이 간소하며 유지관리가 대체적으로 잘 되고 있음.

- 예천군 관내 시설이 노후된 정수장, 배수지 및 가압장 시설물 개량

정수장 비상발전기 및 피뢰침 신설

펌프, 밸브 교체 및 펌프 지지대 교체

❍ 상수관로 개량

2008년 유수율 71.7%를 2015년 80.0%, 2025년에는 85.0%까지 제고토록 상수관망최적관리시스템 구축

- 상수관망의 성능진단(노후도, 수압, 수질)에 따른 개량계획 수립

- 유수율 제고, 수질향상, 비상대책 효과

- 블록시스템 구축 계획 수립 소블럭 15개소

- 배수관로 L=9.97 km, 급수관로 L=36.53 km, 밸브류 75개소 개량

구 분	합계	1단계	2단계	3단계	4단계	비고
정 수 장	-	-	• 정수장 비상발전기 신설 • 취수장, 정수장피뢰침 신설 • 펌프교체 • 펌프 지지대 교체 • 유입유출배관밸브	• 밸브교체 • 펌프 지지대 교체 • 정수장 피뢰침 신설	-	1식
급배수관로 (m)	46,497	-	46,497	-	-
밸 브 류 (개소)	75	-	75		-

다. 마을상수도(소규모 급수시설)에 대한 정비 및 지방상수도 전환계획

마을상수도 및 소규모급수시설 정비계획

❍ 현장조사 결과를 기준으로 마을상수도 및 소규모급수시설 정비계획 수립

- 관로공사, 관정개발 및 물탱크 설치 및 교체

- 정수장치, 자동염소투입기 교체 및 설치

(단위: 개소)

계	마을상수도	소규모급수시설	비 고
219	19	200	2008년 기준

지방상수도 전환계획 수립

❍ 송.배수시설 확장계획을 고려하여 지방상수도 전환계획 수립

(단위: 개소)

계	1단계(2010년)	2단계(2015년)	3단계(2020년)	4단계(2025년)
195	-	102	45	48

라. 상수도 수질 및 수요관리 계획

수질관리

❍ 장래 먹는물 수질기준(현행 55개 항목) 강화에 따른 수질관리계획 수립

수요관리

❍ 노후관로 정비를 통한 누수량 점감

❍ 유수수량 증대계획 : 2025년 목표유수율 85%

❍ 중수도 보급 확대 및 절수설비 보급

❍ 수도요금 체계확립

마. 상수도 운영 및 관리개선 계획

운영체계 개선

❍ 수도요금의 현실화

❍ 기구정비 방안제시

관리 개선계획 수립

❍ 수도인력 확보 및 교육훈련계획 제안

❍ 상수도시설 정보화 관리계획 및 수립제안

❍ 노후기기 교체방안 수립

바. 기술진단 및 재해대책

기술진단

정수장 기술진단 : 취수지점부터 정수장까지의 취수시설·도수시설(도수시설) 및 정수시설과 그에 속하는 시설물을 대상으로 하는 기술진단계획 수립

상수도관망 기술진단 : 정수장 이후의 송수시설·배수시설 및 배수관에 속하는 관과 그에 속하는 시설물을 대상으로 하는 기술진단계획 수립

재해대책

❍ 수질사고 예방 및 대책수립

❍ 취수량 부족시를 대비한 대체수원 개발계획 수립

❍ 갈수기, 동절기, 하절기시 급수대책 체계수립

사. 주요사업 시행에 따른 재정계획

(단위:백만원)

구 분	계	1단계 (2010년)	2단계 (2015년)	3단계 (2020년)	4단계 (2025년)	비 고
소요사업비	148,286	4,051	66,685	29,629	47,921